설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제2차)

□ 공사명 : 용허리공원 빗물저류조설치공사           부서: 방재시설부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	사토장 운반거리 변경	현장여건 상이	558,604	5,060	553,544
2	저류조 기둥부 틀비계 누락분 반영	설계도서내용불투명,누락,오류	11,500		11,500
3	지중구조물 추가 발생에 따른 폐기물 처리비용 반영	현장여건 상이	22,470	624	21,846

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
사토장 운반거리 변경	○잔토처리개선방안 검토 ○단가산출서보완등 재검토 ○사토장운반거리재검토	○암석대 매각대금환급반영 ○단가산출내용 첨부 ○본부방침 적용	558,604	5,060	토공	내역 공제
저류조 기둥부 틀비계 누락분 반영	○비계설치도면 등 상이한 부분 보완 및 재검토	○비계설치기준적용 (품셈 제2장 가설공사)	11,500		구조물공
지중구조물 추가 발생에 따른 폐기물 처리비용 반영	○단위중량 재검토 ○제비율적용 재검토	○단위중량 수정반영 ○당초계약제비율적용	22,470	624	폐기물 처리비	수량 적용

※ 주요공종

- 토공, 가시설공, 구조물공, 포장공, 교량공, 터널공, 차선도색, 부대공 등