설계변경 자문회의 지적사항

조치결과 (2019년 제2차)

『지반보강그라우팅 설계변경 반영,

및 교각(P4)공법변경』

노들섬 특화공간조성 토목공사

2019년 04

서 울 특 별 시

도시기반시설본부

설계변경자문회의 지적사항 조치결과

(2019년 제2차)

□ 공사명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

부서: 토목부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	지반보강그라우팅 설계변경	-현장여건 상이 -민원해결, 보수, 보강	264,484,000	111,452,000	153,032,000
2	교각(P4) 공법변경	-사업계획 변경(정책, 계획변경) -공법변경(신기술,신공법포함)	598,356,000	1,474,000	596,882,000

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

설계변경자문회의 요청서 및 자문회의 후 안건별로 상세 비교표를 명시할 것

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강       ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이               ⑤ 유지관리, 사용부서 요구    ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경                    ⑧ 제도, 기준변경            ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액 (직접공사비)	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
지반보강그라우팅설계변경	타공법과의 비교검토 근거 첨부요함	(별첨1.) 차수및지반보강공법 비교	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	일위대가표 적용근거 첨부	(별첨2) 서울시 지하철건설본부 지하철9호선 적산기준	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	설계변경 사유가 불분명함 -구체적인 타당성 있는 사유근거 제시	(별첨3.) 관련예정공정표 (최초계약,변경계약) 및 관련문서	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	설계비를 재검토 바람	(별첨4.) 비교 견적서 2부	공사금액 해당없음

자문건명	지적사항	조치결과	요구액 (직접공사비)	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
지반보강그라우팅설계변경	-자재단가 조서 누락	(별첨5.) 자재단가조서	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	-일위대가 산근(#2,#3) 누락	(별첨6.) 일위대가 산근#2,#3	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-단가산출서 각 호표의 단위수량 산출기준(서울시 적삭기준) 첨부 해서 조정	(별첨2) 서울시 지하철건설본부 지하철9호선 적산기준	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-조사된 자재단가 적용한 자재조 서첨부(Page118참조) 필요	(별첨7.) 자재단가조서 별첨5. 와 동일	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	-단가산출서 Page 98~106 일위대가 적용 품셈적용근거 첨부 필요	(별첨8.) 관련 품셈	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	-수량산출서 Page 204 교각4 도장 산출근거(코핑,기둥,받침판) 확인필요	(별첨9.) 교각4 도장수량산출서	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-27P 일위대가목록의 단위불일치 (변경 전, 변경 후) -27P, P51 단위는 품셈에 맞게 소문자로 표시	(별첨10.) 일위대가목록표 차수그라우팅(SGR) 수량집계표	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-52P, 54P 수량산출서 및 도면의 천공수량 오기(344공⇒342공) 산출근거(1,3,4)의 연장오기 (68.4m⇒68m) -55P 도면수정 ⦁Key Map 수정보완 ⦁종평면도 치수미기입 ⦁56P서측토공계획단면도삭제필요	(별첨11.) SGR수량 산출서 수정도면	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	-196P,197P등의 단위는 품셈에 맞게 소문자로변경 -189P,196P 수량집계표의 철근가공조립 공종이 200P의 산출근거및내역서(185P)와 다르게 기입됨(매우복잡→복잡) -H13,H13는 H16으로 변경	(별첨12.) 수량산출서 185P는 설계사에서 내역 작성시 오류이며 당현장에서는 복잡으로 적용하였음. H13,H13은 설계도 면에 따라 시공완료 됨	공사금액 해당없음

자문건명	지적사항	조치결과	요구액 (직접공사비)	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
교각(P4) 공법변경	-교각 코핑부 내부 점검은 어떻게 하는지? 개선필요	-본 강제교각 코핑부는 폐합단면으로 되어있고 폭이 1.4m에 불과해 내부점검통로가 불필요함	공사금액 해당없음
	-교각 상부에 배수가 되도록 구배조정 검토	교각 상부에 보행육교가 거취되어 빗물 투과율이 없고, 폭이 1.4.m에 불과해 배수에 대한 구배가 불필요함	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-당초 설계 미반영 사유 보완	(별첨13.) 설계사의견서	공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-해당 공사의 특수성,지역여건 또는 공법 등을 고려하여 현장의 실정에 맞게 설계서를 작성토록 되어 있는데 설계변경으로 자문요 청서에는 설계변경 원인에 대한 설계사의 의견이 누락되어 있으므로 첨부할것		공사금액 해당없음
지반보강그라우팅설계변경	-기초자료(설계변경 시점기준: 2018.12월) 주유비 조정 경유 1408.04원/ℓ→1317.3원/ℓ 외 자재 단가 조정	자재비 수정 (별첨14.) 자재단가조서 서울형 품셈을 적용한 천공단가산출서 및 금액조정 내역서	171,780,959	-69,912,086	지반보강	천공단가산출적용기준 및 자재단가변경
지반보강그라우팅설계변경	-그라우팅(약액주입)용 지반천공(서울형품셈 적용)
교각(P4) 공법변경	-설계변경 자문요청서의 설계변경 사유를 수정할 것 (요청서 앞의 설계변경 유형과 뒷페이지가 상이)	(별첨15.) 설계변경 자문요청서	공사금액 해당없음
교각(P4) 공법변경	-기초자료(설계변경 시점기준 : 2018.12월) 자재 철편 790원→580원 외 자재비 수정	자재비 수정 (별첨16.) 자재단가조서 단가산출근거 및 금액조정 내역서 운반거리 조정 130km→40km	403,620,894	-1,119,251	보행육교	자재단가변경 및 운반거리 변경
교각(P4) 공법변경	-P102 운반거리 및 운반속도 근거 재확인 필요

※ 주요공종

- 지반보강공, 보행육교

별첨 1.

(자재단가 조서)

별첨 2.

(서울특별시 지하철9호선 적산기준)

별첨 3.

(관련문서 및 예정공정표)

별첨 4.

(비교견적서)

별첨 5.

(검토의견서)

별첨 6.

(일위대가 산근#2,#3)

별첨 7.

(자재단가조서)

별첨 8.

(관련품셈)

별첨 9.

(교각4 도장수량산출)

별첨 11.

(SGR수량 산출서)

(도   면)

별첨 12.

(수량산출서)

별첨 15.

(설계변경자문요청서)

별첨 14.

(자재단가조서,

단가산출근거 및 금액조정 내역서)

별첨 16.

(자재단가조서,

단가산출근거 및 금액조정 내역서)

별첨 13.

(설계사 의견서)