설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제8차)

□ 공사명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사            부서: 토목부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	램프교량 보완설계 검토	②	182,500	증1,700	184,200
2
3
4

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
1	용융도금에 대한 견적서 보완필요(P.27)	기존 일위대가를 적용함 ☞ 물가지 사본 제출	182,500	-	구조물공	-
2	신축이음장치 30mm 설치비 단가산출서 품셈 적용 산출근거 보완요망 (P.29)	표준품셈 6-7-2 교량 신축이음장치 설치적용 ☞품셈기준 신축량80mm 해당제품 신축량30mm 적용품은 80mm품의 80분의 30 즉 37.5% 를 적용함	182,500	-	구조물공	-
3	후판재료비 적용시 서울점포상차단가로 적용되어있는데 공장상차비용 적용 검토 요망	☞후판의 수량(0.6ton)이 소량으로 50ton 이상이 공장 상차임으로 서울점포상차 적용이 타당하다고 사료 됨	182,500	-	구조물공	-
4	철근수량 변경되었으나 관급자재 내역에는 미반영,재검토 필요	☞누락된 관급자재(철근) 을 내역에 반영함	182,500	증1,700	구조물공	누락분 반영

※ 주요공종

- 토공, 가시설공, 구조물공, 포장공, 교량공, 터널공, 차선도색, 부대공 등