□ 설계변경 자문회의 지적사항 조치계획

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
동상방지층 수량변경	- 동상방지층 삭제에 따른 토공 물량변동 비교검토	- 절토 및 사토량 감소금액 반영	감425	감147	포장공	절토, 사토 금액 반영
배수구조물 시공방법 변경	- 실적공사비 반영여부 검토	- 실적공사비 협의율 반영	감106	감5	배수공	실적공사비 협의율 적용
	- 단가산출 적정성 여부 검토	- 실적공사비(협의율)+ 표준품셈(낙찰율) 적용
자전거도로 포장규격 변경	- 박층포장 타공법 비교검토	- 비교검토표 첨부	감 68	-	포장공
가드레일 규격변경	- 원설계자 검토의견서 누락	- 첨부	증104	-	부대공
	- 충돌시험성적서 누락	- 첨부
	- 자재단가 재검토(조달단가)	- 조달단가 없음
보차도경계석 규격 변경	- 신규단가 재검토	- 재료비(협의율)+시공비(기계약단가) 적용	증105	-	포장공
군 작전연결통로 설치	- PC암거설치 비교견적실시	- 비교견적서 보완	증232	감1	부대공	실적공사비 협의율 적용
	- 견적서 수취인 변경	- 수취인 변경
	- 실적공사비 반영여부 검토	- 실적공사비 협의율 반영
발파암 판정(2차) 결과 반영	- 암판정위원 서명 누락	- 서명 첨부	증355	감91	토공	실적공사비 협의율 적용
	- 발파암 매각절차 서류누락	- 매각관련 서류 첨부
선사로 종단계획고 조정에 따른 변경	- 단가산출, 일위대가표상 단가적용 상이	- 오류부분 수정	감356	감17	토공	가드레일 단가수정
	- 자재가격, 노임단가 적용시기 통일	- 14년 전반기 단가 동일 적용
발파암 판정(3차) 결과 반영	- 암판정위원 서명 누락	- 서명 첨부	증195	감12	토공	실적공사비 협의율 적용
	- 발파암 매각절차 서류누락	- 매각관련 서류 첨부
도로 노면표시 원인자부담공사 반영	- 수량증가분 계약단가와 산출단가 비교검토	- 비교표 첨부	증 52	-	차선 도색