설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동대문구

○ 사  업  명 : 도시구조물 벽면녹화

○ 사  업  비 : 20백만원(도면작성비 1, 공사비 19)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2015. 4. 3.(금)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

◦덩굴식물은 헤데라와 담쟁이를 50:50으로 혼식하여 조기녹화 될 수 있도록 할 것

◦ 덩굴식물은 관목에 인접하여 식재 시 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 관목의 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재

◦ 현장여건상 식재기반은 자연지반 플랜터 조성을 우선 검토 하고 자연지반 플랜터 조성이 어려울 경우에 한해 인공식재기반 조성을 검토 할 것

◦ 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미, 유효보도폭 확보 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

◦ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.