설계원가 자문 주요내용

■ 공 사 명 : 지하철2호선 지하구조물 내진보강공사(25~27공구)

■ 발주부서 : 서울교통공사(토목1사업소)

■ 자문내용 : 토목분야

구 분		공 종	검토 내용	비고
설계서	설계 도면	기둥연성보강도 (난연)-NBR공법	○ 기둥 중 일부 미보강하는 이유 - 홍대입구역 : 5개, 신당역 : 19개	25공구
		지장물 임시 철거 및 복구	○ 벽돌쌓기(1.0B), 모르타르(T18) 등 설계 도면 표시
		법랑패널 설치	○ 원형, 사각 알루미늄 판넬 설치 설계도면 표시
		보양시설 설치 및 철거	○ 샌드위치 판넬, 방습필름 설치 등 설계도면 표시
		조립식 사무실, 창고	○ 역내 사무실, 창고 위치 및 폭,길이 등 평면도면
	단가 산출	일위대가표	○ NBR공법 일위대가표(77page) 기구손료 조정 - 경비 → 재료비(한국건설기술연구원) ○ 자재단가(101~102page)를 견적서로 적용 - 견적서 2개 이상 중 최소치 적용 ○ 품질시험비 : 한국화학융합시험연구원 견적만 가능한지 여부 ○ 벽체헐기 : 소형장비 등 종류
	설계내역서	기둥내진보강	○ 기둥내진보강NBR공법 - 품셈기준 산출 : 작업반장 제외, 잡재료비 등	26공구
		자재	○ 자재 규격 등을 내역서 또는 공사설계설명서(구, 시방서)에 기술할 것
	시방서	내진보강공사	○ P3-14) 문구 : 18공구 → 27공구 수정 도장관련 롤러도장인지 붓인지 명시 ○ 기둥내진보강 NBR공법 : 작업반장, 보통인부, 특별인부 수량 산출 근거(면적당 산출 또는 높이별 산출인지 명시)	27공구
	설계내역서	지장물이설비	○ 벽체헐기(블록6") : 구조물헐기(소형브레이커)로 적용 벽돌쌓기(1.0B) : 잡재료비 6% → 공구손료 2%(품셈건축2-1-1)
	설계내역서	가설공	○ 역사내 조립식 창고 (12개월) → 컨테이너 설치는 불가능한지 여부
		부대공	○ 내진보강자재 품질시험 항목 및 산출근거 - 시방서 명시
		중기사용료	○ 환율 ＄1,203원 적용할 것