한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역)기본 및 실시설계용역

과       업       개       요

□ 과업의 목적

도시고속도로와 연결하는 한강횡단 교량중 일부(동호·올림픽대교 남단IC) 연결로의 기하구조 개선 및  연결로 추가설치로  접근 경로의 다양성을 확보하고 주변 간선도로의 교통 용량 증대 및 분산 유도

□ 과업의 내용

구분	과 업 규 모	비 고
과업의위치	서울특별시 송파구 풍납동 일대
과업의규모	- 램프신설 : R-F L=1,383m, R-G L=600m - 램프이설 : R-I L=499m, R-F2 L=667m, R-C L=325m, R-D L=96m - 본선이설 : 올림픽대로 하남방향 L=1.50km, 김포방향 L=1.46km - 구 조 물 : 교량 4개소 / 953.6m
과업기간	2013. 5. 16 ~ 2015. 4. 30

□ 과업 추진경위 및 향후일정

2013. 5. 16	:	기본 및 실시설계용역 착수
2013. 10. 31	:	기본설계 자문회의
2013. 12 ~2014. 8	:	한강 하천협의 (서울지방 국토관리청) -2차
2014. 3. 20	:	주민설명회 (풍납2동 주민센터)
2014. 4 ~ 5	:	측량 및 지반조사 (보링12공)
2014. 8. 6	:	디자인심의 (조건부 동의)
2014. 9. 25	:	기본설계 심의 (조건부 채택)
2015. 4. 30	:	실시설계 완료 예정

한강상 교량 연결램프 구조개선 기본 및 실시설계(올림픽대교 남단) - 위치도

한강상 교량 연결램프 구조개선 기본 및 실시설계(올림픽대교 남단)

평면도

종단면도