1. 설계 용역 및 공사 현황 (도시기반시설본부 시설국 토목부 소관)

(단위:천원)

용역(공사)명	공사개요	예산		착공일	준공예정일	공정(%)
		2018년예산	집행예산
월드컵대교 건설공사	○ 위치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동 ○ 규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km ○ 사업기간 : 2010.3. ~ 2020.8. ○ 총사업비 : 258,858,000	50,000,000	22,189,443	2010.3.22.	2020.8.31.	48.6
율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사	○ 위치 : 종로구 창덕궁 돈화문~원남동 사거리 ○ 규모 : 도로확장(B=30m, L=810m), 지하차도 320m ○ 사업기간 : 2010.10.11. ~ 2019.12.31. ○ 총사업비 : 85,400,000	11,187,000	1,537,636	2010.10.1.	2019.12.31.	56.4
밤고개로 확장공사	○ 위치 : 강남구 세곡동사거리 ~ 수서IC ○ 규모 : 도로확장(6차로 → 7~8차로), L=1.85Km ○ 사업기간 : 2017.5.18. ~ 2018.12.30. ○ 총사업비 : 41,300,000	12,967,000	1,929,638	2017.5.18.	2018.12.30.	18.4
남부순환로(개봉1동 사거리주변) 평탄화 공사	○ 위치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC간 ○ 규모 : 구조개선 폭 30m(6차로), 연장 1,100m ○ 사업기간 : 2016.3.25. ~ 2019.3.24. ○ 총사업비 : 31,000,000	4,603,647	196,345	2016.3.25.	2019.3.24.	21.2
종로 중앙버스전용차로 공사	○ 위치 : 세종대로사거리 ∼ 동묘앞 사거리 ○ 규모 : 중앙차로 3.8㎞, 정류장 15개소 ○ 사업기간 : 2017.8.29. ∼ 2018.6.30 ○ 총사업비 : 14,800,000	7,600,000	3,449,951	2017.8.29.	2018.6.30.	99.1
신림~봉천터널 도로 건설공사	○ 위치 : 서울시 관악구 신림동(시흥IC)~봉천동(관악JCT) ○ 규모 : 왕복 4차로 연장 5.58km(1공구:3.10km,2공구:2.48km) ○ 사업기간 : ’10. 10. ∼ ’20. 12. ○ 총사업비 : 5,507억원	29,800,000	6,561,000	2010.10.	2020.12	24
올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 올림픽대교남단일원 ○ 규모 : 램프신설 L=1,383M ,램프이설 L=1,309M ○ 사업기간 : ’16. 04. ∼ ’20. 03. ○ 총사업비 : 473억원	5,350,000	1,675,000	2016.04.	2020.03	32
성산대교 북단 성능 개선공사	○ 위치 : 서울시 마포구 망원동(성산대교 북단) 인근 ○ 규모 : 접속교(212m), 램프 2개소(100m) ○ 사업기간 : 2017.03.23. ~ 2018.12.22 ○ 총사업비 : 27,191,000천원	12,932,300	3,072,075	2017.03.	2018.12.	39
성산대교 남단 성능 개선공사	○ 위치 : 서울 영등포구 양화동(서부간선도로) ○ 규모 : 남단접속교(L=362m),램프4개소(L=625m) 슬래브철거․ 신설, 구조물 보수․ 보강, 가교설치 ○ 사업기간 : 2018.01.01.~ 2019.04.30 ○ 총사업비 : 18,421,643천원	5,038,483	-	2018.01.	2019.04.	6
퇴계로 외 1개소 도로공간 재편공사	○ 위치 : 퇴계로 및 만리재로 ○ 규모 : 퇴계로 L=850m,B=35.0~41.0m 만리재로 L=1,170m, B=25.0~30.8m ○ 사업기간 : 2017.01.04.~ 2018.04.30 ○ 총사업비 : 5,514,360천원	1,050,000	1,048,362	2017.01.	2018.04.	100
동부간선도로 확장공사	○ 위치 : 노원구 월계동(월계1교)～의정부시계 ○ 규모 : 도로확장 폭원 : 4→6차로, 연장 6.85Km ○ 사업기간 : '07.10.17. ～'20.12.31 ○ 총사업비 : 486,600,000	4,960,000	12.761.000	'07.10.17	'20.12.31	47.3
중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	○ 위치 : 노원구 월계역 ~ 하계동 청구아파트 ○ 규모 : 보행교량 : 폭4.5m 연장261m ○ 사업기간 : '16.4.29.～'18.11.30 ○ 총사업비 : 11,900,000	5,750,000	905,785	'16.4.29	'18.11.30	68.2
천호대로 확장공사	○ 위치 : 광진구 구의동 58-15 ～ 광장동 388-10 ○ 규모 : 폭 6→10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함) ○ 사업기간 : '10.10.11.～'18.06.30. ○ 총사업비 : 106,000,000	21,100,000	4,034,254	'10.10.11	'18.06.30.	85.7
여의교 확장공사	○ 위치 : 여의교 북단 ～ 대방역 간 ○ 규모 : 여의교 확장(8차로→9차로(1차로 확장) ○ 사업기간 : '16.11.29~'18.6.25 ○ 총사업비 : 7,800,000	3,500,000	867,663	'16.11.29	'18.6.25	81.0
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	○ 위치 : 올림픽대로 서울교 ~ 여의동로 ○ 규모 : 진입램프 개설 :L=712.6m, B=6.4m ○ 사업기간 : '16.11.29 ~ '18.11.29 ○ 총사업비 : 13,700,000	8,900,000	2,424,910	'16.11.29	'18.11.29	54.5
탄천변 동측도로 확장공사 실시설계	○ 위치 : 송파구 잠실경기장 ～ 송파구 문정동 ○ 규모 : 도로확장 : 폭2 → 4차로, 연장 5,590m ○ 사업기간 : '09.3.5.～'18.12.31. ○ 총사업비 : 1,560억원(공사비 1,480억원, 기타 80억원)	1,500,000	-	'08.12.31.	'18.12.31.	45
양재대로지하차도 설치 기본 및 실시설계	○ 위치 : 강남구 구룡터널 교차로 ~ 일원터널 교차로 ○ 규모 : 폭4차로, 연장1.174km ○ 사업기간 : '13.7.8.～'18.4.30. ○ 총사업비 : 1,862억원(공사비1,693억, 보상비98억, 설계비19억, 감리비52억)	10,410,000	-	'13.07.08.	'18.07.30.	99.2
대청지하차도 설치공사 실시설계용역	○ 위치 : 삼성의료원 교차로 주변 ○ 규모 : 대청지하차도 설치 - 폭 4차로, 연장 525m(Box 180m, U-type 345m) ○ 사업기간 : 2014.10. ~ 2022.12. (설계기간 14.10.06.~18.12.31.) ○ 총사업비 : 626억원	214,349	-	'14.10.06.	'18.12.31.	80
한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계	○ 위치 :한남2고가(한남동 707), 구로고가(가리봉동 139) ○ 규모 : 고가철거 872m - 한남2고가차도 : 폭15m, 연장 341m - 구로고가차도 : 폭 18.5m, 연장 531m ○ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 12. 31. (설계기간 17.4.11.~18.4.24.) ○ 총사업비 : 147억원	8,900,000	-	'17.04.11.	'18.04.24.	100
제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계	○ 위치 : 서울시 마포구 상암동 월드컵로 ○ 규모 - 구룡사거리 : 구룡교 확장(폭6.0m, 연장300m) - 월드컵파크3단지 교차로 : 신호연동화 - 월드컵경기장교차로 : 지하차도신설 폭4차로 연장540m - 월드컵로 : 양측 2차로 확장 ○ 사업기간 : 2009.12. ~ 2021.12. (설계기간 17.5.10.~18.5.31.) ○ 총사업비 : 720억원	4,000,000	-	'17.05.10.	'18.05.31.	95
월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역	○ 위치 : 서울시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단 ○ 규모 : 남단 연결로 개선 ○ 사업기간 : '17.8.7～'18.6.30. ○ 총사업비 : 12.9억 원(설계:11.5억, 설계감리:1.4억	1,290,000	-	'17.08.07	'18.06.30.	62
천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 실시설계	○ 위치 : 서울시 천호대교 남단 ~ 강동구 성내동 엘웨딩홀 교차로 ○ 규모 : - 천호지하차도 평면화 B=16m(4차로), L=355m(BOX 100m, U-Type 255m) - 중앙버스전용차로 설치 L=1.2㎞(중앙정류소 2개소) ○ 사업기간 : 2016.5. ~ 2018.12. (설계기간 17.11.14.~18.5.13.) ○ 총사업비 : 28.8억원	2,710,738	-	'17.11.14.	'18.05.13.	90
양재고개 녹지연결로 조성사업 기본 및 실시설계	○ 위치 : 서초구 서초동 산30-18일대(양재고개) ○ 규모 - 녹지연결로 폭 10~16m, 연장 100m 설치 및 수목식재등 ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12. 31. (설계기간 17.10.17.~18.10.16.) ○ 총사업비 : 147억원	3,110,000	-	'17.10.17.	'18.10.16.	45
강남순환도시고속도로 건설공사	○ 위치 : 금천구 독산동 ~ 강남구 수서동 ○ 규모 : 연장 22.9km, 왕복 4~10차로 ○ 사업기간 : 2001.12.29. ~ 2019.12.31. ○ 총사업비 : 2,567,100,000 (재정: 1,657,300, 민자: 909,800,000)	36,138,881	4,312,739	2001.12.29.	2019.12.31.	89.9
광복교~안양교 도로확장공사	○ 위치 : 구로구 개봉동 ~ 구로동 ○ 규모 : 도로확장 4->6차로, 연장 1.110m ○ 사업기간 : 2016.04.01. ~ 2019.09.12. ○ 총사업비 : 83,284,000	11,059,067	2,534,955	2016.04.01.	2019.09.12.	33.0
노들섬 특화공간 조성 토목공사	○ 위치 : 용산구 이촌동 302-146 일대 ○ 규모 : 옹벽보수(10,137m2), 보도육교(폭 3.5m, 연장 139m) ○ 사업기간：2017.11.13. ~ 2018.12.31. ○ 총사업비 : 5,825,853	5,649,000	354,118	2017.11.13.	2018.12.31.	38.0
한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사	○ 위치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단 ○ 규모 : 고가차도 철거(폭 15m, 연장 341m) 버스전용차로 설치(연장 2km, 정류장 3개소) ○ 사업기간 : 2017.12.26. ~ 2018.11.30. ○ 총사업비 : 12,151,000	11,664,172	-	2017.12.30.	2018.11.30.	3.0
동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	○ 위치 : 과천대로 서울시계~동작대로 방배경찰서 앞 ○ 규모 : 중앙버스전용차로 2.8km, 정류장 4개소 ○ 사업기간 : 2017.12.22. ~ 2018.6.30. ○ 총사업비 : 8,000,000	8,000,000	577,284	2017.12.22.	2018.06.30.	6.5