[설계VE 제안 및 채택결과]

○ 사업명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계VE

	아이디어 제안 및 채택결과

아이디어건수(A)	반 영(B)							미반영(기각)		반영률(B/A)
	대안반영			설계보완		발주처 제안
(ㅊ
47건	23건			10건		1건		13건		72.3%

□ 대안반영 아이디어(23건)

(단위: 백만원)

No.	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	증감액
1
1	상하수도	기존 건물의 안정성 및 민원방지를 위한 계측기 추가	82.6	104.9	(증) 22.2	안전성 향상 (I-05)
2	상하수도	잡석 터파기선 일치	1,713.3	1,628.1	(감) 85.2	시공성 향상 (I-06)
3	상하수도	PC박스 운반비 현실화	331.7	311.9	(감) 19.8	비용 절감 (I-07)
4	상하수도	가시설 여유고를 고려한 강재량 조정	589.4	582.2	(감) 7.2	시공성 향상 (I-08)
5	토목시공	버팀보 잭 타입 변경	39.9	18.3	(감) 21.6	비용 절감 (I-16)
6	토목시공	C.I.P구간 가시설 공법 변경	54.7	25.8	(감) 28.9	시공성 향상 (I-17)
7	토목시공	RC암거구간 외부방수 삭제	96.0	-	(감) 96.0	비용 절감 (I-18)
8	토목시공	되메우기 토사 변경	463.4	377.6	(감) 85.8	시공성 향상 (I-19)
9	토목시공	잔토처리 운반거리 상세화	1,103.4	999.9	(감) 103.5	시공성 향상 (I-20)
10	토목시공	구조물 기초의 잔류침하를 고려하여 모래지정 미반영	2.6	-	(감) 2.6	비용 절감 (I-21)
11	토목시공	RC암거 철근을 기존구조물에 연결	40.9	26.9	(감) 14.0	시공성 향상 (I-25)
12	토목시공	작업장내 이동형 가설방음, 방진막 설치	98.1	93.9	(감) 4.2	민원예방 (I-27)
13	토목시공	도로 오염 방지시설 설치	-	22.0	(증) 22.0	민원 예방 (I-28)
14	토목시공	신설암거의 종점부와 기존박스 연결부의 변곡부 곡선처리	-	0.1	(증) 0.1	시공성 향상 (I-30)
15	토목시공	폐기물처리를 구체화	43.2	32.8	(감) 10.4	시공성 향상 (I-32)
16	토목시공	암거와 간섭발생 가로보 상향 이동	-	-	증감없음	시공성 향상 (I-38)
17	토목시공	기존암거와 신설암거구간 가시설 삭제	725.4	483.3	(감) 242.1	시공성 향상 (I-39)
18	토목시공	SD3구간 종점 기존암거 접합부 2련 암거로 계획	36.1	28.4	(감) 7.7	시공성 향상 (I-42)
19	토목시공	기존구조물 절단간격을 확대	325.3	216.9	(감) 108.4	시공성 향상 (I-43)
20	토목시공	가시설 가로보 강재규격 변경	612.6	574.9	(감) 37.7	시공성 향상 (I-45)
21	토목시공	계측보고서 작성비용 현실화	84.2	63.2	(감) 21.1	비용 절감 (I-48)
22	토목시공	포장구간 기존경계석 및 측구 철거 후 재설치	26.7	66.7	(증) 39.9	시공성 향상 (I-49)
23	토목시공	순환골재 반영	79.2	70.4	(감) 8.8	비용 절감 (I-57)
합계			6,548.6	5,727.9	(감) 820.7

□ 설계보완 아이디어(10건)

(단위: 백만원)

No.	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	증감액
1
1	상하수도	특정업체 지양	-	-	-	도서보완 (I-13)
2	상하수도	모래 사급자재로 적용	-	-	-	도서보완 (I-14)
3	토목시공	장비 거치 계획 수립	-	-	-	도서보완 (I-35)
4	토목시공	공사 단계별 교통처리 계획 수립	-	-	-	도서보완 (I-36)
5	토목시공	종평면도의 평면도에 구조물 규격 연장 및 가시설 복공구간등의 치수선을 반영	-	-	-	도서보완 (I-51)
6	토목시공	종평면도 평면 및 종단면도의 수평 축척을 통일	-	-	-	도서보완 (I-52)
7	토목시공	횡배수연결과 보강상세도 추가	-	-	-	도서보완 (I-53)
8	토목시공	현장사무실 및 숙소 비용 반영	-	-	-	도서보완 (I-54)
9	토목시공	시공상세도 작성비용 반영	-	-	-	도서보완 (I-56)
10	토목시공	우수계획평면 상세도 작성	-	-	-	도서보완 (I-58)

□ 발주처 제안 아이디어(1건)

No.	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	증감액
1
1	토목시공	한전 지중선 전력구와 신설구조물 동시시공	-	-	-	발주처간(하천관리과,한국전력) 시공협의 방안 검토 후 반영 (I-34)

□ 미반영 아이디어(13건)

(단위: 백만원)

No.	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	증감액
1
1	상하수도	기존 BOX와 신설 BOX의 통수단면 확보	-	-	-	설계기반영 사항 (I-01)
2	상하수도	기존 BOX와 신설 BOX 하부 부력 앵커 설치	-	-	-	구조계산서 기반영사항 (I-02)
3	상하수도	표층 아스콘 재활용	-	-	-	발주처 협의사항 (I-03)
4	상하수도	최신 수문량 활용을 통한 홍수능력 검토의 정확성 확보	-	-	-	발주처 상위계획(하천기본계획) 진행 중 (I-04)
5	상하수도	가시설 강재량 조정	-	-	-	터파기 완료 후 PC암거 설치시, 버팀보 해체로 인한 일시적 버팀대 순간격을 5.0m로 고려하여 구조검토 하였으며, 4.0m로 고려시 순간격이 7.0m로 구조계산이 불안정 한것으로 나타나 원안 적용함 (I-10)
6	상하수도	운반비 반영	-	-	-	현장도착도 설계 기반영사항 (I-11)
7	토목시공	신설암거와 기존암거와의 합벽 설치	-	-	-	-SD3-2구간은 교통처리계획(사거리 차량 통행, 상가구간(카센터)내 차량진입, 서문여고 주차장 출입)으로 복공 미설치시 민원이 우려됨 -SD3-1구간의 경우 합벽으로 시공시 약 8억원의 공사비 절감이 가능하나 교각 및 전신주(이설불가)구간 내 합벽시공이 어려우며 상가구간(식당)의 경우 합벽 후에도 차량통행폭을 확보하기 어려움 (I-22)
8	토목시공	구조물깨기시 절단공법을 변경	-	-	-	특정업체 공법 반영불가 (I-23)
9	토목시공	신설암거의 기초를 상향	-	-	-	SD3 종단계획상(1:1,000) 기존박스 하단고보다 계획고를 상승시키는 방안은 해당구간이 저지대로서 신설암거 규모를 줄일 수밖에 없어(2.5x2.5→2.5x2.0) 수위저감효과가 줄어들 우려가 있음. (I-24)
10	토목시공	물돌리기를 변경	-	-	-	기존 물돌리기는 초기 우오수가 사당천 본류로 방류되어 하류부에 악취로 인한 민원발생이 우려되어 본선내 수로(마대)를 만들어 초기 우오수가 사당천 본류와 섞이지 않도록 하였으며, 종점부 미설치시 평상시 역류가능성도 있어 종점부에도 설치함 (I-29)
11	토목시공	도로구간 빗물받이를 선배수시설로 변경	-	-	-	유지관리기관(서초구) 협의결과 선배수시설 설치시 악취발생 및 유지관리가 어렵다는 의견을 반영하여 기존 빗물받이+배수관으로 설치계획 함 (I-41)
12	토목시공	SD-5구간 가시설 중간 스트럿을 삭제하고(스트럿을 강성이 큰 원형강관 또는 각관 적용) 분리 PC암거를 일체PC암거로 변경	-	-	-	PC암거(4.0X3.5) 일체형은 생산업체수가 적어 시공시 자재수급의 어려움이 우려되며, 도심지 높이제한으로 현장으로 반입이 어려움 (I-44)
13	토목시공	SD3구간 포장면을 양측 경사에서 편경사로 변경	-	-	-	도로포장면을 편경사로 적용시 SD3(서문여고)구간은 우수시 인접 주택지로 물이 집중되어 흘러갈 우려가 있어 민원발생 (I-50)