『터널내 위치 번호판 설치』

공  사   시  방  서

2015년 11월

(안전총괄본부)

공  사  시  방  서

1. 총칙

1.1. 적용 범위

1) 본 시방서는 서울특별시에서 시행하는 “터널내 위치 번호판 설치”에 관계되는 사항을 규정한 것으로서 계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석과 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하려는 것이며, 특별한 경우를 제외하고 본 시방서에 따른다.

1.2. 적용 규정

본 시방서에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 필요한 경우에 각 호의 규정을 준용한다.

1) 도로표지 관련 규정집

2) 근로기준법 및 노동 관련법

3) 토목공사 일반표준시방서

4) 산업안전보건법

5) 건설공사 관련법령 및 규정

6) 기타 건설공사의 안전ㆍ환경 등에 관한 법령 및 규정

7) 한국산업규격

8) 도로명주소안내시설규칙

2. 사업시행

2.1. 수급자의 의무

1) 사업의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 설치하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 사업의 시행 때문에 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 하며 발주자가 당해 사업를 최종 인수하기 전까지는 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 사업의 목적물이 손상을 받을 때, 또는 사업의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주자의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 설치와 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측ㆍ예방하여 민원이 발생하지 않도록 한다.

2.2. 공정표 및 제작 계획서

1) 계약상대자는 착공 시 전체 예정 공정표를 제출하고 7일 이내에 설계도서 및 시방서에 의하여 사업 전반에 대한 공종별 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

2) 사업의 진척상황과 실시공정을 기록하는 공사 일보 및 기성고를 조사하여 발주자의 지시에 따라 제출하여야 하며 공사 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 사유와 공정만회대책을 수립하여 보고하여야 한다.

3) 수급자는 건설 산업 기본법과 관련규정에 의거 아래와 같이 설치계획서를 작성하여 발주에게 제출하여 승인을 받은 후 설치에 착수한다.

① 개요, 설치구분

② 설치방법

③ 현장 조직표, 인사, 노무계획, 긴급 시의 체계도

④ 실시예정공정표

⑤ 주요자재, 주요장비의 사용계획

⑥ 본 시방서 각 장에 표시한 품질관리 등의 설치관리 계획

⑦ 안전, 위생과 환경관리 대책

⑧ 기타

4) 설치계획서는 발주자의 승인을 받아 공사의 진척에 맞추어 단계별로 작성한다.

5) 설치계획의 변경이 요구될 때에는 변경설치계획서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

6) 통행관리계획서의 제출

계약상대자는 설치계획서 제출 시 사업시행으로 인하여 통행차량과 주민의 소통에 지장이 없도록 아래와 같은 교통관리계획을 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

① 신호수 배치(인원과 지점표시)

② 각종 교통안내표지판의 설치계획(위치, 종류, 수량)

③ 기타 안전사고 예방을 위한 각종 안전시설 설치계획(위치, 종류, 수량)

3. 설치기준

3.1. 설계도서 등

1) 설치에 앞서 각 공종별 도면, 시방서, 설계내역서 등 제반 본 사업관 관련된 설계도서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 설치가 되도록 하여야 한다.

2) 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 발주사에게 통보하여 지시를 받아야 한다.

3.2. 치수

설계서 및 시방서 등에 표시된 치수는 모두 마무리된 치수이다.

3.3. 수량의 단위 및 계산

수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준 품셈의 수량 계산 규정에 따라야 한다.

3.4. 사전조사

1) 설치 작업을 시작하기에 앞서 설치구역 전반에 걸쳐 시설물 설치가 위치, 규격 등을 확인하여 설치할 시설물의 규격별 수량 및 설치유형 등을 확인하고 발주자가 제공한 자료와 비교 점검하여야 한다.

2) 조사 결과는 도면에 표시하거나 목록을 작성하여 설치시 활용하도록 한다.

2) 기타 사업에 관련된 환경(도로상황, 설치방해물, 도로시설물 등)에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

4. 설치관리

4.1. 설치기간

1) 설치기간은 계약기간으로 하고 수급자는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 시작하고 즉시 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 사업의 완료 전에 특정부분에 대한 사업의 완료 또는 설치순서 변경에 대하여 발주자의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

2) 계약상대자는 제작 중 아래와 같은 사유가 발생하여 예정된 설치기간 내 준공이 어렵다고 판단될 때 발주자가 지정한 양식에 의거 연기신청서를 발주자에게 제출하여야 하며 발주자는 이를 검토하여 연기사유가 합당하면 설치기간을 연기 할 수 있다.

① 설치기간 중 강설, 한파로 작업이 중단된 일수가 평균 강우(강설) 일수보다 많을 때

② 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

③ 공법 등 계획이 변동되었을 때

④ 설계변경으로 공사 중단 지시를 하였을 때

⑤ 발주자의 계획변경으로 설치하지 못하였을 때

⑥ 기타 민원의 발생 등 설치지연의 불가피한 상황이 발생하였을 때

4.2. 설치의 일시 중지

발주자는 다음 사항에 대하여 설치를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건 때문에 설치에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 계약상대자가 설계도서대로 설치하지 않거나 또는 발주자의 지시에 응하지 않을 때

3) 설치 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 계약상대자의 설치방법 또는 설치가 미숙하여 조잡한 설치가 우려될 때

5) 관련되는 다른 사업(공사)의 진척으로 보아 설치의 계속 시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법하도급 거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력 상황이 발생하였을 때

4.3. 설계변경 조건

본 사업은 다음과 같은 상황이 발생하였을 때 설계 변경할 수 있다.

1) 시행 중 발주자의 계획․방침 변경으로 추가, 삭제, 물량의 증감 발생

2) 현장의 제반 조건이 설계도서와 현저하게 다를 때

① 현장 여건변동 및 수량변경이 있을 때

② 수량 등의 계산착오로 인한 사항

3) 천재지변 등 불가항력 상황이 발생하였을 때

4) 기타 현장 여건이 설계 당시와 변동되어 계약내용의 변경이 필요한 경우

4.4. 작업시간

1) 시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나 야간 또는 휴일에 작업할 때에는 미리 발주자의 승인을 받아야 한다.

2) 시행상의 형편에 따라 작업 시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일 작업의 필요성을 발주자이 인정할 때에는 수급자는 그 지시에 따라야 한다.

4.5. 공정관리

발주자가 지시하는 방법과 요령에 따라 공정을 철저하게 관리하여야 한다.

4.6. 현장관리

1) 설치 중 발주자의 허가 없이 유수와 교통의 방해가 되는 행위 또는 공중에 위해를 끼칠 만한 설치방법을 써서는 안된다.

2) 공사 현장에서 일반인과 근로자의 출입감시, 풍기와 보건위생의 단속, 화재,

도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4.7. 사용 재료의 관리

1) 자재 중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 한다.

2) 자재는 KS 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 KS 제품이 아닌 경우에는

발주자와 협의하여 사용한다.

3) 재료가 현장에 반입되어 발주자의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업, 통행, 기타 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고, 수시로 감독관의 점검이 쉽게 될 수 있게 한다.

4) 본 설치에 쓰이는 재료의 사용 수량은 발주자의 확인을 받고 기록 하여야 한다.

5. 안전 및 환경관리

5.1. 안전관리

계약상대자는 시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 발주자의 지시를 따라야 한다.

5.2. 안전조치

1) 설치에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 점검, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 발주자의 승인을 받아야 한다.

2) 설치 작업 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

5.3. 안전 교육 및 제작

1) 발주자가 지시하는 설치 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전 교육을 실시하여야 한다.

2) 계약상대자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 설치방법, 현장 정리정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전설치에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

5.4. 사고보고 및 응급조치

1) 설치작업 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시, 발주자에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 구조물의 파손

② 사상사고

③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

④ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 즉시 보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

5.5. 환경오염관리

환경오염방지에 관한 법률을 준수하고 설치 중 먼지, 진동, 충격, 소음 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 발주자의 지시에 따라야 한다.

6. 번호판 부착 위치 조사 및 설치

터널내 위치번호판 설치에 필요한 규칙과 세부 사항은 『서울특별시 디자인      심의 기준』에 준하여 설치하여야 한다.

6.1. 번호판 부착 위치 조사

1) 번호 부여 방식 : 서울특별시청을 기준으로 양방향 및 일방향 모두                     하행인 경우 홀수, 상행인 경우 짝수

- 하행인 경우 차량 진행 방향으로 터널 벽면 우측에 홀수 번호판 부착 : 1, 3, 5, . . .

- 상행인 경우 차량 진행 방향으로 터널 벽면 우측에 짝수 번호판 부착 : 2, 4, 6, . . .

2) 계획위치 평면도를 기준으로 진행방향 우측에 약 50m 간격으로 부착할 수 있도록 위치를 확인한다.

3) 설치 높이는 소화기의 설치 높이와 비슷하게 하여 부착할 수 있도록 부착위치를 조사한다.

4) 터널 벽면의 굴곡(바닥과 벽간의 각도), 벽의 마감재, 보행자 통로와 칸막이를 조사 한다.

5) 터널 길이가 200m 이하인 경우 조사 대상에서 제외한다.

6) 조사 전 관리기관의 협조요청이 필요할 경우 작업 일정을 사전 제출하여야 한다.

7) 수급자는 안전 헬멧, 안전 조끼, 마스크 등 안전장구를 반드시 착용 하고, 조사 시 사고예방에 만전을 기하여야 하며, 가급적 교통량이 적은 야간에 조사하도록 한다.

8) 기존 시설물 및 교통에 영향을 주지 않도록 한다.

9) 조사 시 본 과업지시서에서 정하지 않은 사항은 발주자와 협의 후 진행하여야 한다.

6.2. 번호판 설치

1) 설치는 계획위치 평면도의 설치장소를 기본으로 하며, 현장조사에 의거하여 설치하여야 한다.

2) 번호판 표면이 손상되지 않도록 유의하도록 하며, 수평을 유지하여 설치하여야 한다.

3) 번호판의 내용이 조사내용과 일치하는지 확인 후 설치한다.

4) 접착성이 뛰어난 실리콘을 사용하고, 충분히 충진하여 떨어지지 않도록 한다.

5) 설치 전 관리기관의 협조요청이 필요할 경우 작업 일정을 사전 제출하여야 한다.

6) 계약상대자는 안전 헬멧, 안전 조끼, 마스크 등 안전장구를 반드시 착용 하고, 설치 시 사고예방에 만전을 기하여야 하며, 가급적 교통량이 적은 야간에 설치하도록 한다.

7) 기존 시설물 및 교통에 영향을 주지 않도록 한다.

8) 설치 시 본 시방서에서 정하지 않은 사항은 감독관과 협의 후 진행하여야 한다.

6.3. 번호판 설치상세

편도 1 ~ 2차로 : 500 × 600mm	편도 3차로 : 600 × 700mm

6.4. 위치번호판 제작설계도

1) 편도 1 ~ 2차로 : 500 × 600mm

2) 편도 3차로  : 600 × 700mm

6.5. 위치번호판 설치방법