문서번호	정보통신보안담당관-18568
결재일자	2015.10.14.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신기획팀장	정보통신보안담당관
협조
	정보기획팀장

-북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP설치공사-

설 계 변 경 계 획

2015. 10

정보통신보안담당관

-북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP설치공사-

설  계  변  경  계  획

북촌한옥마을 IoT실증사업에 필요한 센서설치가 추가 발생된바, 시급성을 감안하여 기시행 CCTV 및 무선AP 설치공사에 반영 설계변경코자 함.

Ⅰ		관련근거

북촌 사물인터넷(IoT) 인프라 구축계획 (정보통신보안담당관-13864/’15.07.29)

북촌 사물인터넷 인프라 구축사업 관련 협조요청 (정보기획담당관-15242/’15.09.30)

Ⅱ		공사개요

건    명 : 북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP 설치공사

공사범위

CCTV 4개소 설치 및 피플카운팅 시스템 구축

무선AP 16개소 설치(AP 28, 브릿지 12), 광케이블 포설 및 접속

계약금액 : 182,774,160원

계 약 자 : 합동전자통신(주) 대표 하명용

공사기간 : 2015.08.31. ~ 2015.10.19

Ⅲ		설계변경안

주요내용

구 분	당 초	변 경	사 유
공사내역	없 음	IoT센서 3종 추가 광성단 및 시험 30코아 추가	IoT실증사업을 위한 센서 부착요청 및 안정적인 네트워크 구성필요 (정보기획담당관)
계약기간	'15. 8 .31. ~ 10.19	'15. 8.31. ~ 10.22	센서 자재가 17일 이후 납품 되므로 연장
계약금액	182,774,160원	203,121,600원	시공내역 추가로 증액

추가내역

공 종	규격	단위	변경전	변경후	비 고
안테나	제작사양	EA	-	14	증)14
센서	제작사양	EA	-	14	증)14
스케너	제작사양	EA	-	14	증)14
UTP케이블	CAT5e 4P	M	314	571	증)257
RJ45 Cap	AMP	EA	56	96	증)40
금속가요전선관	단순도통	M	310	494	증)184
전선관 커넥터	방수 22㎜	EA	56	92	증)36
전원케이블	방수 22㎜	M	390	496	증)106
브라켓	제작사양	EA	11	27	증)16
광케이블 성단	SC-LC	코아	60	90	증)30
광케이블 시험	도통시험	코아	34	64	증)30

소요예산 : 증 20,347,440원

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
직 접 공사비	재료비	116,699,821	119,692,239	2,992,418
	노무비	21,082,921	30,343,235	9,260,314
	간접노무비	2,023,960	2,912,950	888,990
경비		11,477,040	14,072,112	2,595,072
일반관리비		9,077,025	10,021,232	944,207
이 윤		5,797,560	7,614,232	1,816,672
공급가액		166,158,327	184,656,000	18,497,673
부가가치세		16,615,833	18,465,600	1,849,767
총공사비		182,774,160	203,121,600	20,347,440

예산항목

정보기획담당관, 지식정보사회 선도기반구축, 정보화기반 시설확충,

서울 사물인터넷 도시조성, 시설비

Ⅳ		행정사항

재무과 설계 변경 의뢰   :  2015. 10. 15

붙 임 : 1. 변경설계서 1부.

2. 정보기획담당관 협조 공문 1부. 끝.