문서번호	물재생과-6074
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
협조
	주무관

설 계 변 경 보 고

-‘14년 차집관거 성능개선 시설공사-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

중랑물재생센터

물재생과

설 계 변 경 보 고

2014년도 차집관거 통수능 확보를 위한「차집관거 성능개선 시설공사」시행중 물재생과-5106(2014.9.30.), 5794(2014.10.28.)에 따라 화계천 신설(분류벽)구간 축소 및 가오천 개량(분류벽)구간 등 추가 공사 반영에 대하여 계약물량 증감사항을 설계변경 시행코자 함.

1		공사 현황

○ 공 사 명 : 차집관거 성능개선 시설공사(‘14년 발주분)

○ 총공사비 : 964,159천원(도급비 : 905,459천원, 관급비 : 58,700천원)

○ 시 공 사 : 서일종합건설(주) 대표 김 선 경

○ 공사기간 : ‘14. 05. 27 ~12. 31.

○ 공사개요 : 통수능개선 L= 4,057m(신설 : 1,487m, 개량 : 2,570m)

구 분	위 치	내 용
통수능개선	화계천	- 분류벽 신설(B=0.8m, H=1.0m) L=775m 분류벽 개량(증고, H=0.2m) L=2,570m
	가오천	- 분류벽 신설(B=0.6m, H=0.5m), L=713m

2		보고 내용

○ 설계변경 사유 : 계약물량 증감 및 신규공종 반영

- 화계천(좌안) 분류벽 신설구간 감소(230m) 및 개량(증고)구간 증가(282m) 반영

- 화계천 차집관거 신설구간내 바닥보강(L=533m)공사 반영

- 가오천 분류벽(증고) 개량구간 추가(L=1,670m) 등 공사 반영

- 가오천 차집관거 신설구간내 바닥보강(L=713m)공사 반영

○ 주요공종 변경내용

위치	구분	단위	당 초	변 경	증감사항	비고
화계천	분류벽 신설	m	775	238	감537
	분류벽 개량	m	2,570	2,852	증282
	바닥보강	m	-	533	증533
가오천	분류벽 개량	m	-	1,670	증1,670
	바닥보강	m	-	713	증713

○ 설계변경 금액                                           (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		905,459,200	905,459,200	0
도급비	공급가액	823,144,728	823,144,728	0
	부가가치세	82,314,472	82,314,472	0
	계	905,459,200	905,459,200	0

3		조치계획

○ 위와 같이 계약금액 변동없이 신규비목(공종)에 대하여 낙찰율을 적용하고,     공사 계약물량 증감사항을 반영 설계변경후 재계약코자함.

붙  임 : 1. 방침서 각1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.