1. 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계

도시철도설계부(772-7130)	부장 : 박 상 돈/ 과장 : 김 진 팔 / 담당 : 신 상 형

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	5대도시 분류	안전도시

전략목표 (성과목표)	서울시	사람이 우선하는 편리한 서울교통
	실․본부․국	철저한 공정관리로 차질없는 광역철도 건설
	과․담당관	철저한 공정관리로 차질없는 광역철도 건설
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
		하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 공정률	-	-	70%	100%
업무 프로세스		① 용역 타당성심사(’14.2) → ② 용역 발주 심의(’14.2) → ③ 사업수행능력 평가세부 기준 협의(‘14.2) → ④ 계약심사단 심사(’14.2) → ⑤ 용역계약심의(’14.2)→ ⑥ 용역시행방침 (‘14.2) → ⑦ 용역입찰공고(‘14.2)→ ⑧ 수행능력평가서 평가(‘14.3)→ ⑨ 낙찰자 선정(’14.3) → ⑩ 계약 체결(‘14.4) → ⑪ 설계용역 시행 → ⑫ 건설기술심의 (’14.9) → ⑬ 건설공사 분야(토목,건축 등) 설계 완료(’14.11) → ⑭ 시스템공사분야(궤도,시스템) 설계완료(’15.7) → ⑮ 준공(’15.7)
협력체계 (파트너십)	내 부	기술심사담당관(①,②,⑫)), 재무과(④,⑤,⑦,⑨,⑩)
	자치구	강동구
	외 부	국토교통부, 기획재정부, 경기도, 하남시, LH공사, SH공사

□ 사업목적

○ 수도권 남동부 지역의 대규모택지지구 개발에 따른 수송수요 증가에 대비하여 철도 노선 신설

○ 철도교통망이 부재한 하남축에 신규 광역철도 공급으로 대중교통서비스 향상 도모

□ 설계개요

○ 기    간 : 2014. 4. ～ 2015. 7. (전체사업 : 2011~2020)

○ 구    간 : 강동구 상일동 ~ 하남미사 ~ 하남시 창우동

○ 규    모 : 연장 7.725km, 정거장 5개소, 차량기지 입․출고선 1개소

○ 추진계획

- ‘14.04.  : 설계용역 착수

- ‘14.08.  : 건설기술심의(설계심의)

- ‘14.11.  : 건설공사 분야(토목,건축 등) 설계완료

- ‘15.07.  : 시스템공사 분야(궤도,시스템) 설계완료

□ 홍보계획

○ ‘14.11  : 하남선(5호선연장) 건설공사 발주(토목,건축 등) 언론보도

□ 세부추진계획

(단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	기본 및 실시설계 공정율	70% (5,800)	10% (828)	30% (1,657)	60% (2,486)	70% (829)
기타지표

○ 사업비 집행계획(2014년 : 5,800백만원 : 국비  3,480, LH 분담금 2,320)

(단위:백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	기본 및 실시설계	5,800	828	1,657	2,486	829
2

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	- 관계기관 협의 * 국토교통부, 경기도, 하남시, LG공사, 도시철도공사 등
2월	- 용역타당성심사, 용역발주심의, 계약심사단 심사, 용역계약심의 - 사업수행능력 평가세부기준 협의 - 용역 발주 및 입찰 공고
3월	- 사업수행능력 평가서 접수 및 평가 - 입찰 및 낙찰자 선정	10
4월	- 기본 및 실시설계 추진 ․ 착수보고회 개최 / ․ 지반조사 및 시험, 측량 및 지장물 조사
5월	- 기본 및 실시설계 추진 ․평면 및 종단선형 결정 ․본선 및 정거장 규모 및 건설 공법 검토	20
6월	- 기본 및 실시설계 추진 ․본선 및 정거장 구조물 공법 선정 ․본선 및 정거장 가시설 공법 선정	30
7월	- 기본 및 실시설계 추진 ․본선 및 정거장 구조물 설계/ ․본선 및 정거장 가시설 설계 - 사전재해영향성 검토서 작성	40
8월	- 기본 및 실시설계 추진 ․본선 및 정거장 구조물 설계/ ․본선 및 정거장 가시설 설계	50
9월	- 기본 및 실시설계 추진 ․개착구간 교통처리계획 수립/ ․건설기술심의(토목,건축분야 등 설계심의) - 사업계획 승인서 작성	60
10월	- 기본 및 실시설계 추진 ․건설기술심의(설계심의) 결과 반영 - 사전재해영향성 검토서 협의
11월	- 기본 및 실시설계 추진 ․공사비 산출 / ․건설공사 발주(토목,건축분야 등)
12월	- 기본 및 실시설계 추진 ․건설공사 계약 체결	70

2. 신림선 경전철 실시설계

도시철도계획부(772-7020)	부 장 : 박 상 돈 / 팀장 : 이 철 / 담당 : 김 형 건

사업구분	□ 핵심사업 ■ 주요사업	5대 도시 분류	안전도시

전략목표 (성과목표)	서울시	사람이 우선하는 편리한 서울교통
	실․본부․국	신교통수단 도입․건설
	과․담당관	신교통수단 도입․건설
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
		신림선 경전철 실시설계 공정률	60%	70%	90%	100%
업무 프로세스		① 지반조사 등 현황조사(’11.7) → ② 노선검토(평면 및 종단선형) → ③ 관계 기관 협의(’12.10) → ④ 정거장, 출입구 등 구조물 배치계획 검토(‘12. 8) → ⑤ 구조물 등 상세설계 추진(~’13.12) → ⑥ 재협상 완료(‘14.1-’14. 5) → ⑦ 각종 영향평가 협의관련 내용 설계반영(’14.8) → ⑧ 도시관리계획 절차이행 및 건설기술 심의 업무추진(’14.11) →⑨ 실시계획 승인업무 추진(’15.1) → ➉ 공사착수(’15. 2)
협력체계 (파트너십)	내 부	교통정책담당관(③~⑥)
	자치구	영등포구, 동작구, 관악구(③)
	외 부	민간사업자(①～➉)

□ 사업목적

○ 신림선 경전철 민간투자사업의 시공 및 공용중 시민안전성, 편의성, 최고수준의 품질확보를 위해 민간사업자의 실시설계 과정에서 적극적으로 관련업무 수행

※ BTO 민자사업으로 공사 준공과 동시에 시설물은 우리시에 귀속됨

□ 설계개요

○ 설계기간 : 2011 ～ 2014 (※전체사업 : 2007~2017)

○ 설계규모 : 총연장 7.8km, 정거장 10개소(환승 4개소 포함), 차량기지 1개소

○ 설 계 비 : 150억원(※ 협약예정금액, 2007.7.1 불변가, 조사비 21억원 포함)

○ 추진내용 : 2012.12월 기준 약 50% 설계 진행중

- 2011.07 ~ 2012.12 : 지반조사 및 노선 평면, 정거장, 본선 각 구조물 계획

- 2013.01 ~ 2013.12 : 정거장, 본선 및 환기구 구조 상세설계 추진

- 2014.01 ~ 2014.05 : 재협상 추진

<향후 계획>

- 2014.06 ~ 2014.09 : 재협상에 따른 실시설계 추진

- 2014.10 ~ 2014.11 : 도시관리계획, 교통처리계획, 기술심의 및 보완작성완료

- 2014.12 ~ 2015.01 : 실시계획 승인업무 수행

- 2015.02              : 공사 착수

□ 홍보계획

○ 2014.06 : 신림선 경전철 재협상 완료 및 실시설계 본격 착수 언론보도

○ 2014.12 : 신림선 경전철 실시계획 승인사항 언론보도

□ 세부추진계획                                              (단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	신림선 실시설계 공정율	90% (4,347)	73%	76% (500)	80% (2,000)	90% (1,847)
기타지표

○ 사업비 집행계획(2014년 : 4,347백만원  :  국비 1,000백만원, 시비 3,347백만원)

(단위:백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	실시설계 및 설계감리 등	4,347	-	500	2,000	1,847
2

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	- 재협상 추진
2월	- 재협상 추진
3월	- 재협상 추진	73%
4월	- 재협상 추진
5월	- 재협상 추진
6월	- 실시설계 추진 ․ 정거장 재설계/· 본선 환기구 규모 결정 및 재설계/· 환승방안 재설계	76%
7월	- 실시설계 추진 ․ 외부출입구 설치계획 검토/․ 환승정거장 환승방안 검토
8월	- 실시설계 추진 ․ 정거장 등 구조물 가시설 설계
9월	- 실시설계 추진 ․ 본선 개착구간 가시설 검토/ ․ 개착구간 교통처리계획 수립	80%
10월	- 실시설계 추진 ․ 본선 개착구간 가시설 검토/․ 개착구간 교통처리계획 수립/· 건설기술심의 신청
11월	- 실시설계 추진 ․ 도시관리계획 등 추진/· 건설기술심의 지적사항 보완
12월	- 실시설계 추진 ․ 실시계획 승인서류 접수 및 검토 /· 공사착수 검토	90%