<서식 2>

산림내위험시설물정비

(푸른도시국 산지방재과/서부공원녹지사업소 시설과)

□ 사업개요

◦위치 : 하늘공원 북측사면

◦규모 : A=440,000㎡

◦기간 : 2013.12.19. ～ 2014.3.18. (공정율 45%)

◦총사업비 : 42,884,600원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 산림재해방지, 산림내위험시설물정비, 시설비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		7,144,000,000	49,313,000	42,884,600	-	42,884,600 ( - )	6,428,400
용 역 비		7,144,000,000	49,313,000	42,884,600	-	42,884,600 ( - )	6,428,400
	도 급 비	7,144,000,000	49,313,000	42,884,600	-	42,884,600 ( - )	6,428,400
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

-2014년 예방사방사업 대상지 조사 결과보고서 10월 통보 및 매립지 정밀안전진단 용역 발주 사전검토 등으로 11월 용역발주하여 용역기간 90일로 절대공기 부족

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

<서식 3>

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 :

□ 사업기간 :

□ 예산과목 :

□ 지출원인행위 미필사유

-

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계

확 인 자 :      직)      성명)      (인)

조 사 자 :      직)      성명)      (인)