문서번호	도로관리과-11918
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로포장관리팀장	도로관리과장	시설안전정책관
협 조
	북부도로사업소장

세종로(광화문광장) 유지관리 검토보고

2014.7

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

광화문광장 돌포장 파손 정비방안 검토보고

지속적으로 파손이 발생하는 광화문광장 돌포장에 대해 정비방안을 검토  하여 보고드림.

		광화문광장 조성현황

○ 광장조성 : 19,084㎡ (L=557m, B=34m)

○ 차도포장 : 22,867㎡ (왕복 10차로)

- 돌포장 : 규격 18×12×10, 몰탈채움

○ 공사기간 : 2007. 12. 27 〜 2010. 5. 31(공용개시일 : 2009.6.1.)

○ 하자보수 : 2009.6 ~ 2013.12 : 하자보수(대림산업)

※ 북부도로사업소 유지관리 : 2014.1 ~ 현재

		파손보수공사 개요

○ 규    모 : 화강석 포장 400㎡, 줄눈보수 450m

○ 공사기간 : 2014.5.15.~2015.2.28

○ 공 사 비 : 400백만원

- 도급비 226백만원, 관급비 64백만원, 이전비 등 110백만원

○ 시 공 사 : ㈜사림엔지니어링

		현장조사 결과

○ 조사기간 : 2014. 4. 1 ~ 7. 29(기간내 3회 실시)

○ 합동조사자 : 도로관리과 이옥휘, 북부도소사업소 도로보수과 최진규

○ 파손원인 : 돌출된 돌이 대형차량의 이동하중을 지속적으로 받으면서 돌포장 (초속경몰탈)의 구조체가 지속적으로 파손되고 있음

○ 정비대상(파손물량 지속 증가)

- 정비대상 물량 : 871㎡(당초분 400㎡, 증가분 471㎡)

- 주요 파손지점 : 세종대로사거리 횡단보도(양쪽), 교보빌딩 앞, 한국통신 앞. 세종문화회관 앞, 현대해상 앞

※ 현재까지 정비실적 : 고흥석 포장 450㎡, 판석포장 25㎡

		조 치 사 항

○ 정비인원 보강 : 2배 이상 증원(※ ‘14.8.15 이전에 정비완료)

○ 세종대로 사거리 횡단보도 주변 정비방향

- 전구간 정비후, 파손 발생 지속시 아스콘 정비방안 검토

‣ 시청방향    : 폭 20m,  연장 40m, 면적 800㎡

‣ 광화문 방향 : 폭 20m,  연장 17m, 면적 340㎡

○ 돌포장 물량 증가분 예산 추가배정 : 320백만원

구 분	소 계	기 배 정	금회배정	비 고
소요예산(백만원)	720	400	320

- 예산과목 : 도로시설물 관리, 도로 도로부속물관리(도개특), 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 시설부대비, 시설비

붙 임  1) 광화문광장 유지보수 현황 1부.

2) 광화문광장 도로파손 현황사진. 끝.