세종로 유지관리 추진현황 보고

Ⅰ		광화문광장 조성 현황

○ 위    치 : 세종로(광화문 ~ 세종로 사거리)

○ 광장조성 : 19,084㎡ (L=557m, B=34m)

○ 차도포장 : 22,867㎡ (왕복 10차로)

- 돌포장 : 규격 18×12×10(고흥석, 검회색류, 잔다듬), 몰탈채움

○ 공사기간 : ‘07.12.27 〜 ’10.05.31

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

○ 사 업 비 : 700,000,000원

- 도급비 578백만원, 관급비 73백만원, 폐기물처리비 등 49백만원

○ 공사기간 : 2015.04.21 ~ 2015.12.31

○ 계 약 자 : ㈜자오건설 대표 이기완

○ 정비물량 : 화강석포장포수 860㎡, 차도줄눈 정비 50a

Ⅲ		사업 추진 현황

○ 정비공사 추진 현황

공 종	단위	정비계획	추진현황	공정율
화강석 보수	㎡	860	850	99%
줄눈 보수	a	50	43

○ 예산 사용 현황                                             (단위 : 천원)

구 분	예산액	계약액	현재 지출액	추가정산 예상액	비고
합 계	700,000	658,798	488,300	179,800	잔액 31,900천원
공 사 비		577,812	415,700	171,300
관 급 비		72,600	72,600
폐기물처리비		8,386	0	8,500

※ 금회 배정금액(일억원 제외)

Ⅳ		문제점 및 대책

○ 문제점

- 돌포장 파손이 지속적으로 증가하며 보수공사보다 빠르게 진행됨

- 6차 작업완료후 파손현황 조사결과 약 300㎡ 추가 보수 필요하여

252백만원 소요 예상

○ 추가 예산 소요 현황                                   (단위 : 백만원)

추가 시공 소요현황 (A)			잔액 (B)	금회 배정액 (C)	부족 예산 (A-B-C)	비 고
합 계	공사비	관급비
252	216	36	32	100	120

※ 금회 배정예산 및 낙찰차액 사용시 120백만원 부족이 예상됨

○ 대책

- 아스팔트 시공 등 돌포장에 대한 근본적 대책 요구 : 도로관리과

- 추가 예산 확보 요청 : 도로관리과

Ⅴ		행 정 사 항

○ 돌포장에 대한 근본 대책 및 예산 확보 요청 : 2015.9.  끝.