작 업 지 시 서(1차)

○ 지시번호 : 2020-1차

○ 용 역 명 : 2020년 도로시설물 세척용역-서부

○ 지시일자 : 2020. 3. 31

○ 작업기간 : 2020. 4. 07 ~ 2020. 4. 30

○ 계 약 자 : 서일개발㈜ 대표 박출근

○ 지시내용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 작업 완료 후 전, 중, 후 사진과 작업내역이 첨부된 완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 작업지시 내역(도로시설물 세척 계획)

순번	시설물명	위 치	날 짜	시 간	비 고
1	남산1호터널(하행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“20.4.07(화)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	의주로지하차도	양방향중 1개 차로 전면통제 후 순차교행
2	남산1호터널(상행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“20.4.08(수)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	퇴계로지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제
3	남산3호터널(하행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“20.4.09(목)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	서빙고지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제
4	남산3호터널(상행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“20.4.10(금)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	이태원지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제
5	남산2호터널	전면통제	“20.4.11(토)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	남산2호입구지하차도	단굴 전면통제			천정 포함
6	봉산터널(상행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“20.4.12(일)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
7	봉산터널(하행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“20.4.13(월)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
8	금화터널(상행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“20.4.14(화)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	잠수교지하차도	통제 없음
9	금화터널(하행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“20.4.15(수)	금일22:00~ 익일06:00	천정,보도,방음판 포함
10	월드컵터널	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제	“20.4.16(목)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	신사지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제			천정포함
	모래내지하차도	양방향중 1개 차로 전면통제 후 순차교행			천정포함
11	증산지하차도	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제	“20.4.17(금)	금일22:00~ 익일06:00	천정,보도포함
	성산지하차도	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제			천정포함

※ 기상 및 현장여건에 따라 작업 일정이 변경될 수 있음.

서울특별시 서부도로사업소 시설보수과장 (인)