작 업 지 시 서(1차)

○ 지시번호 : 2021-1차

○ 용 역 명 : 2021년 도로시설물 세척용역-서부

○ 지시일자 : 2021. 3. 31

○ 작업기간 : 2021. 4. 4 ~ 2021. 4. 30

○ 계 약 자 : ㈜코드원 대표 서보경

○ 지시내용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 작업 완료 후 전, 중, 후 사진과

작업내역이 첨부된 완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 작업지시 내역(도로시설물 세척 계획)

순번	시설물명	위 치	날 짜	시 간	비 고
1	남산2호터널	전면통제	“21.4.4(일)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	남산2호입구지하차도	단굴 전면통제			천정 포함
2	남산1호터널(하행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“21.4.5(월)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	의주로지하차도	양방향중 1개 차로 전면통제 후 순차교행
3	남산1호터널(상행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“21.4.6(화)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	퇴계로지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제
4	남산3호터널(하행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“21.4.7(수)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	이태원지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제
	잠수교지하차도	통제 없음
5	남산3호터널(상행)	쌍굴중 1개굴 전면통제 후 1개굴 1/2 교행통행	“21.4.8(목)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	서빙고지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제			천정,보도 포함
	금화터널(상행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제			천정 포함
6	월드컵터널	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제	“21.4.9(금)	금일22:00~ 익일06:00	천정 포함
	모래내지하차도	양방향중 1개 차로 전면통제 후 순차교행			천정포함
	금화터널(하행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제			천정,보도,방음판 포함
7	증산지하차도	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제	“21.4.10(토)	금일22:00~ 익일06:00	천정,보도포함
	성산지하차도	편도 3차로 중 1~2개차로 부분통제			천정포함
8	봉산터널(상행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“21.4.11(일)	금일22:00~ 익일06:00	천정,보도,방음판 포함
	신사지하차도	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제			천정포함
9	봉산터널(하행)	편도 2개 차로 중 1개 차로 부분통제	“21.4.12(월)	금일22:00~ 익일06:00	천정,보도,방음판 포함

※ 기상 및 현장여건에 따라 작업 일정이 변경될 수 있음.

서울특별시 서부도로사업소 시설보수과장 (인)