문서번호	시설보수과-4698
결재일자	2017.7.3.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
협 조

센터내 노후불량 시설물 (경계석 및 배수로 파손 등) 및 운영과 요청사항 추진계획 보고

2017. 07.

중랑물재생센터

(시설보수과)

센터내 노후불량 시설물 및 운영과 요청사항 추진계획 보고

센터내 노후 시설물(도로경계석 및 배수로 등) 및 탈수기동 샤워실 설치에 따른 오수관 정비계획를 보고 드림.

※ 관련문서 : 슬러지 운반업체 인부사용 샤워실 설치요청(운영과-4923,2017.06.02)

건축시설물 유지보수 작업시행 (시설보수과-4323,2017.06.30)

계약현황

❍ 계 약 명 : 2017년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 계약기간 : 2017. 3.20~2017.12.31

❍ 계 약 자 : 새서울건설(주) 대표 이은경

❍ 계약금액 : 173,071천원

노후・파손 시설물 및 운영과 요청 현황

❍ 노후 시설물 현황

- 도로경계석 및 배수로 노후 파손 현황

‣ 3처리장 B,C계열 사이 도로경계석 및 배수로 노후 파손

3처리장 B,C계열 사이 도로경계석 및 배수로 현황(L=320m)

기타 센터내 산재된 도로경계석 파손 현황(L=48m)

❍ 운영과 요청사항 탈수기동 샤워실 설치에 따른 오수관 정비

- D=150mm, L=60m

※ 위치도

검토의견

❍ 3처리장 B,C계열 경계석 및 배수로는 노후불량으로 기능이 상실되어 정비, 센터내 기타 산발적으로 파손된 경계석 및 운영과에서 요청한 탈수기동 샤워실 설치에 따른 오수관 정비가 시급한 실정임.

❍ 센터내 노후・불량 시설물정비(개략공사비 62,257천원)를 위하여 ‘17년 토목시설물 유지보수(연간단가)업체인 새서울건설㈜ 대표 이은경에게 3차 작업지시하여 작업토록하고, 추후 설계변경에 반영하여 정산처리 및 추가 소요 공사비 발생시 본공사의 시설비 집행잔액을 사용 공사시행 필요함.

❍ 소요예산 검토

(단위 : 천원)

예산액	계약금액	금회(3차) 개략공사비 (관급비 포함)	관급자재 상세	비 고
200,000	173,071	‣공사비 : 80,818 ・도급비 : 62,257 ・관급비 : 18,561	‣콘크리트(25-28-120) ・36㎥×59,320=2,135,520원 ‣배수로(300×300×2000m) ・153×45,600=6,976,800원 ‣경계석(200×250×1,000) ・350×20,380=7,133,000원 ‣경계석(곡선 200×250×1,000) ・39×35,010=1,365,390원 ※ 조달수수료 약 950,970원	관급자재비용(18,561천원)은 낙찰차액내에서 사용

향후계획

작업지시		관급자재구매		실 작업기간
‧ ‘17.07.04 ‧ 노후불량 경계석, 배수로, 오수관 정비		‧ 경계석, 배수로, 레미콘 등 ‧ 관리과로 구매의뢰 ‧ ‘17.07.04 한		‧ ‘17.07.10~’17.08.06 ※ 자재 납품, 기상상황 및 현장여건에 따라 유동적

첨부. 1. 관련공문 각 1부. 끝.