중부소방서 재건축 추진 계획 보고

재건축 추진일정

◆ 서울특별시 소방청사 신축사업 업무추진 지침 ⇒ 2017. 8. 21(소방본부)

○ 주요절차

①계획(안) 수립		②타당성 조사		③투자 심사 및 공유재산 심의		④설계용역		⑤공사계약 및 발주 등
소방서	⇒	관할소방서 (용역의뢰)	⇒	본부,시	⇒	사업개시 연도	⇒	사업개시 차년도
(2018년)		(2018년)		(2019년)		(2020년)		(2021년)

① 소방서 재건축 사업계획(안) 수립

- 사업계획 수립 (소방서) ⇒ 확정 방침 (본부-행정2부시장)

- 사업계획 수립 검토사항 ⇒ 소방기관 설치기준, 사업 타당성, 사업규모, 소요예산, 사업추진 일정

- 사업계획(안) 활용 :투자심사, 공유재산 심의, 타당성 조사 등 기초자료

② 타당성 조사(소방서) :

- 서울시연구원 의뢰 :  6개월 이상(비용 무료)

- 학술연구용역 추진 :  3 ~ 6개월(별도 예산 확보)

③ 투자심사 및 공유재산 심의 (시 자산관리과)

- 사업비 40억원 이상은 중앙투자심사

- 공유재산 심의 : 연 5 회(1,3,5,7,10월)

- 소요기간 : 6개월 ~ 1년

④ 설계용역

- 발주방침 수립 전 도시공간개선단 협의 및 도시기반 시설본부 의뢰

- 설계방식 : 현상설계 공모

⑤ 공사계약 및 발주 ⇒ 도시기반시설본부 수행

○ 예산편성 등 사업비 확보 ⇒ 소방본부

※ 관할소방서 : 예산편성 기초자료 제출

중부소방서 당면업무

○ 현장에 강하고 역사 도심에 적합한 중부만의 새로운 소방청사 추진

- 소방청사에 직장 어린이 집 설치

※ 소방본부 직장 어린이 집 설치 계획에 의거 신축 청사에 설치 근거 마련

- 무인방수차, 굴절 탑차 등 특수소방차 운영관련 차고 면적 증가

- 역사 도심에 적합한 청사 마련 (붉은 벽돌 건물 외관 공사)

- 강당 시설의 다목적화 (훈련시설, 체력단련 등 다목적 시설)

○ 관련부서 협의 사항

- 어린이 집 설치 등과 관련 건축면적 및 공사비 증액 협의(자산관리과, 예산담당관 등)

- 타당성 조사 관련 본부 조직경영팀, 소방행정타운 T/F팀과의 지속적인 업무 협의

○ 당면 업무 추진 관련 전담인력 확보

- 인    원 : 1명 (장비회계팀 상주)

- 지원기간 : 2018. 7. 18 ~ 별도 명령시까지

- 배 치 자 : 행정팀에서 적임자 선정(업무 경험자, 희망자 등)

- 추진업무 : 서울시 타당성 조사 추진 업무 및 향후 재건축 추진관련 제반업무