소 속	서울특별시	부서명	도로시설과 (☎ 02-2133-1675)
작성자	성 기 선	e-mail	sks3300@seoul.go.kr

□ 안전분야

< PSC교량 외부긴장재 보강을 통한 시설물 안전성 확보 >

1. 추진배경

○ 정릉천고가 중대 결함 발견(‘16. 2.)에 따른 유사 공법 PSC교량 긴급 정밀점검결과 정릉천고가 외 2개 교량(두모교, 서호교)에 대한 추가 보수보강을 실시함으로써 재난안전사고 예방은 물론 시설물의 수명 연장

2. 추진근거

○ 법, 조례 등 관련근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제13조(긴급안전점검의 실시) 및 제24조(시설물의 보수·보강 등)

○ 소방안전교부세 대상사업 해당 사업명

- PSC교량 외부긴장재 보강(정릉천고가교, 두모교, 서호교)

3. 추진기간 : 2017. 9. ~ 2020. 10.(3년)

4. 시행주체 : 서울시특별시

5. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		합계	’15년	’16년	’17년	’18년
PSC교량 외부긴장재 보강		7,908	0	0	7,908	0
재원	· 소방안전교부세	7,312	0	0	7,312	0
	· 지방비(시·도비)	596	0	0	596	0
	· 재난안전특별교부세	0	0	0	0	0
	· 국비	0	0	0	0	0
	· 기타	0	0	0	0	0

6. 추진내용

○ PSC교량 긴장재 교체기준 마련 및 손상 긴장재 교체완료(29개소)

- 교체대상 : 29개소(정릉천고가 25개소, 서호교 4개소)

- 교체기준

상태등급	부식정도	조치사항	비 고
d	긴장재 단면손실 5% 미만	보수 후 모니터링
	긴장재 단면손실 5% 이상	긴장재 교체 대상설정 후 실행방안 검토
e	소선파단 포함 긴장재 단면손실 5% 이상

※ 긴장재 단면손실 5% 미만 : 장기관찰(긴장재 선별하여 학회와 공단에서 관찰)

○ PSC교량 긴장재 보강기준 마련 및 추가긴장재 설치

- 교체대상 : 148개소(두모교 108개소, 서호교 40개소)

- 보강기준 : 정밀 구조해석한 결과 긴장재 안전여유 확보 대책이 필요하며, 공용 중 전단면 압축(Full Prestressing) 상태를 유지하는 수준으로 전 경간에 추가 긴장재 설치하여 안전성 확보

- 교체방안

보강 개요도	보 강 방 안
두모교	○ 이격발생 15경간(긴장재Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 보강), 비이격 발생 전구간(긴장재Ⅰ 보강) ○ 이격발생 세그먼트 이음부 에폭시주입 : 25개소 <추가 긴장재 설치 방법> - 추가긴장재Ⅰ(예비홀 Φ 15.7mm-17가닥,전경간) : 139경간×2 = 278개소 - 추가긴장재Ⅱ(강봉홀 Φ 15.7mm-7가닥,이격부) : 15경간×2 = 30개소 - 추가긴장재Ⅲ(추가 에비홀 실시설계 용역, 이격부) : 15경간×2 = 30개소
서호교	○ 전구간 긴장재 보강 - 추가긴장재 보강(예비홀 Φ 15.2mm-16가닥) : 66경간×2 = 132개소

- 추가긴장재 보강내용

□두모교 : 추가긴장재Ⅰ 보강 78개소,  추가긴장재Ⅱ 보강 30개소

□서호교 : 추가긴장재Ⅰ 보강 40개소

7. 주요 성과

○ (우수사례 및 성과)

-‘16.2월 정릉천고가교 외부텐던이 파단되는 중대결함이 발생하여 2017년   PSC교량의 긴장재 유지관리 수립을 위한 학술용역을 시행하여 체계적    관리방안 및 긴장재 손상유형별 보강 기준을 전문가로 구성된 안전정책   자문단 자문 후 관련 지침을 마련하였으며,

-  PSC교량의 설계하중에 대한 안전성 확보, 긴장재의 상태평가 결과 손상  시설물 손상이 심화되기 전에 적정 수준의 선제적 긴장재 보수·보강 공사를 단계적으로 추진하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 안전성 및 내구성 확보.

○ (현장사진)

보강 전		보강 후
	□

8. 향후 추진계획

○ 두모교 추가텐던 Ⅲ 실시설계(’17.12. ~ ’18.06.)

○ 2018년 외부긴장재 보강공사 시행(’18.09. ~ ’19.10.)

- 두모교 : 추가텐던Ⅰ설치 44개소, 추가텐던 Ⅲ설치 30개소(4,780백만원)

- 서호교 : 추가텐던Ⅰ설치 84개소(2,900백만원)

○ 2019년 외부긴장재 보강공사 시행(’19.05. ~‘20.10.)

- 두모교 : 추가텐던 Ⅰ설치 128개소(4,240백만원)