소방관서 도색 보수공사

< 금호119안전센터 도색 보수공사>

직 책	성 명	전화번호
소방행정과장	문정명□	02-456 -5880
장비회계팀장	김정협□	02-446 -0119
담당자	신종춘□	02-452-0797

□ 사업목적

○  금호119안전센터 공공기관 청결 유지 및 청사 미관 개선.

□ 사업개요 및 현황

○ 현실태 및 문제점

- 청사내 벽 균열 및 페인트가 일어나고 있음.

- 청사내 노후로 인한 도수 보색작업이 필요하다 요구됨.

○  사업내용

- 위     치 : 성동구 금호1가 179-3

- 재 료 비 : 내부말비계, 보양, 친환경수성,  세라믹, 에나멜 도장원료

- 사업기간 : 2015. 6 ~ 9월

○  사 업 비 : 11백만원

□ 사업추진 사전절차

○ 기술용역타당성 조사 해당없음

□ 2015년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 천원)

구 분	2015 요구	산 출 내 역
계	11,200천원	※ 붙임 견적서 참조
∘ 가설공사	1,652천원	- 내부말비계 및 보양 재료비 262천원
		- 노무비 1,390천원
∘ 도장공사	9,548천원	- 친환경수성 및 세라믹, 에나멜 도장원료 2,177천원
		- 노무비 7,371천원

□ 세부 추진절차 및 예산집행계획

(단위 : 백만원)

세부추진절차	추진기간	예산집행계획	추 진 내 용
		집행액
계
○기본계획수립	2015.6월		∘2015.6.29 : 기본계획 수립 ∘2015.7.1~7.15 : 견적 및 설계 ∘2015.7.15~7.30 : 입찰 및 계약 ∘2015.8.1 : 착공 ∘2015.9.30 : 준공
○설 계	2015.7월
○입찰, 계약	2015.7월
○착 공	2015.8월
○준 공	2015.9월

□ 관련사진

청사내 균열 및 보수작업 요구공간	청사내 균열 및 보수작업 요구공간

청사내 균열 및 보수작업 요구공간	청사내 균열 및 보수작업 요구공간

□ 기대효과

○ 청사 미관 개선 및 공공장소로서 깨끗한 이미지 부여.