소방관서 보수 ․ 보강 공사 사업설명서

< 능동119안전센터 청사주변 아스콘 작업 및 보안 CCTV 설치 >

-능동 센터 추진사항

1. 차고 앞 및 주차장 바닥 아스콘 작업

2. 청사 보안 CCTV 설치 – 건물 전면 2개, 건물 후면 1개

□ 사업목적

○ 능동119안전센터 차고 앞 및 주차장 바닥이 거칠어 소방차량 출동․귀소시 소방차량 등 타이어 마모가 증가되고 있어, 청사주변 매끄럽고 평탄하게 아스콘 작업을 실시하여 타이어 훼손을 감소하고자 함.

○ 소방안전교육을 받고자 하는 시민고객이 광나루시민안전체험관으로 잘못 인식 및 어린이대공원 등 이용객, 산보하는 인근 주민이 화장실 이용하고자 수시 출입하여 보안에 취약한 실정으로, 청사주변 CCTV를 설치하여 청사 내․외 보안을 강화하고자 함.

□ 사업개요 및 현황

○ 현실태 및 문제점

- 차고 앞 및 주차장 바닥이 거칠어 소방차량 운행시 타이어 마모가 증가

- 소방안전교육을 받고자 하는 시민고객이 광나루시민안전체험관으로 잘못 인식 및 어린이대공원 등 이용객, 산보하는 인근 주민이 화장실 이용하고자 수시 출입하여 보안에 취약한 실정임.

○ 사업내용

- 위  치 : 서울시 광진구 능동 316-3(능동로 242)

- 규  모 : 청사주변 차고 앞, 주차장 바닥 아스콘 작업 및 청사보안 CCTV

설치

아스콘 작업 (차고 앞, 주차장 바닥) : 차고앞(83.6㎡)+주차장66㎡

청사보안 CCTV 설치(전면 2, 후면 1)

- 기  간 : 2017년 1월 ～ 6월

○ 사 업 비 : 8백만원

□ 사업추진 사전절차 이행여부

○ 기술용역타당성 조사 : 해당없음

□ 2017년도 요구예산 세부산출내역

(단위 : 천원)

구 분	2017 요구	산 출 내 역
계
아스콘 작업	5,000
CCTV 설치	3,000

□ 세부 추진절차 및 예산집행계획

(단위 : 천원)

세부추진절차	추진기간	예산집행계획	추 진 내 용
		집행액
계		8,000
○기본계획수립	2017. 1월		∘2017. 1.28 : 기본계획 수립 ∘2017. 3.1~3.31 : 설계용역 ∘2017. 4.1~4.15 : 공개입찰 및 계약 ∘2017. 4.15 : 착공 ∘2017. 6.30 : 이전공사 준공
○설 계	2017. 3월
○계 약	2017. 4월	8,000
○착 공	2017. 4월
○준 공	2017. 6월

□ 관련사진

<차고 앞 전면> <주차장>
<차고 앞, 후면 주차장 전경> - 차고 앞, 후면 주차장 바닥이 거칠고 평탄치가 않음. - 바닥이 매끄럽고 평탄하게 아스콘 작업이 필요함.	<청사 및 주변 전경> - 청사를 수시 출입하는 이용객이 많아 보안이 취약한 실정임. - 청사 전면 2개소, 후면 1개소 등 3개소 CCTV 설치

□ 기대효과

○ 차고 앞 및 주차장 바닥에 아스콘 작업을 실시하여 타이어 훼손이 감소됨.

○ 청사주변 CCTV를 설치하여 청사외부 보안 강화.