□ 서울시 소송관련 요구자료

가. 광명시에 제출된 무허가 지장건물 조속철거 요구 민원 파악제출

⇒ 인터넷 민원 : 9건,  기타 유선민원 등 : 50건 이상

나. 무허가 건물로 인한 시흥대교 공사중지와 이로인한 시흥대교 유지관리 비용 등

○ 시흥대교 시점부 교통전환공사비 : 8억원(2012. 9.  설계변경에 반영)

○ 시흥대교 유지관리비 : 2013. 12. 7. ∼  공사 재착공시까지

연번	구 분	금 액	비 고
	계	217,000천원	(1년기준)
1	영업배상책임보험	19,000천원
2	간접경비(인건비, 현장경비등)	75,000천원
3	사정지지연금(금융손실비용)	123,000천원

○ 공사 재착공 이후 물가상승 변동분 공사비 증액과 감리비 증액 설계변경에 반영 예정

다. 시흥대교 우회로(교통전환구간)로 인한 교통사고 피해 사항.

일 자	주요사고 유형	처리내용	비 고
2013.01.02	안양천 차량추락	개별보상
2013.03.06	강재방호벽 저촉(타이어 파손외)	개별보상
2013.04.25	강재방호벽 저촉(차량문짝 긁힘)	개별보상
2013.07.15	강재방호벽 저촉(휠얼라이먼트 손상외)	개별보상
2013.07.18	강재방호벽 저촉(차량문짝 긁힘)	개별보상
2014.03.31	오토바이 정면충격에 의한 사망사고	미해결
2014.04.16	시흥대교 경사계단 화재	자체처리

※ 기타 접촉사고 등 사고건수 : 30건 이상

라. 기타, 소송관련 참고자료 등.

⇒ 철거민 요구사항

- 이주대책(이주단지 조성)

- 특별공급 아파트 분양가 인하(약 200만원) 및 즉시 전매