설계변경 위원회 자문요청의뢰

문서번호		요청부서				요청일		2015년 9 월 일
공 사 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(시설현대화 전력공급공사 토목)
공사개요	공사규모		- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일 - 시설현대화 전력공급공사
	공사기간		2015. 9. ~ 2016. 2.28
	감 리 사		㈜한국종합기술 외 1개사
	설 계 사		㈜우리엔지니어링
	시 공 사		지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			중랑물재생센터 시설현대화 전력공급공사 설계변경 件				요청금액		359,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 중랑천 용수공급설비가 우선 계획되어 시공됨에 따라 시설현대화 설비 공급예정인 변압기를 이용하여 중랑천 용수공급설비에 우선 전력 공급함으로써 시설현대화 설비에 공급할 전력을 확보하기 위하여 금회 154kV 변전소 증설이 필요하게 됨.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 시설현대화 시설에 전력공급 확보를 위한 기존 154kV 변전소 증설과 기존GIS설비개량 및 부 대설비가 적정하게 계획됨
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 154kV기초(A=419㎡) - PHC말뚝(336m) - 기타 부대공사 ▪ 물량 증감내역 - 철근(43ton) - 레미콘(588㎥) - PHC말뚝(336m)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 359,000 천원 - 증 감 : 359,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 - 구조물공 - 기초공 - 기타부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부 4. 설계내역서 1부					▪ 공사예정시기 - 2015. 10월 ▪ 소요관급자재 - 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
계약금액	322,005,000천원	계약일	2009. 2. 12.	시공사	지에스건설㈜ 외 3개사
공사기간	2009. 2. 13 ~ 2016. 2. 28	낙찰율	해당없음(T/K)	설계자	㈜삼안 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	㈜한국종합기술 외 1개사
공사규모	• 시설현대화 25만톤 • 고도처리개량 88만톤 • 중랑천용수공급시설 20.3만톤

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			• 154kV기초(A=419㎡) • PHC말뚝(336m) • 기타 부대공사	• 154kV기초(A=419㎡) • PHC말뚝(336m) • 기타 부대공사
공 사 비			359,000 천원	359,000 천원
적 용 요 율	해당없음		해당없음	공사계약일반조건제21조 규정 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	- 전력공급계획반영 설계변경실시 업무지시(설비부-5745호,‘14.05.29) - 시설현대화 전력공급공사 실정보고 승인(도기본-15-3966호,’15.07.28)
	관련규정	공사계약일반조건 제21조 제2,3,4항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 시설현대화 설비 공급예정인 변압기를 이용하여 중랑천 용수공급설비에 우선 전력 공급함으로써 시설현대화 설비에 공급할 전력을 확보하기 위하여 금회 154kV 변전소 증설 및 개량하는 것으로 변경.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 시설현대화 전력공급공사 설계변경 실정보고 승인(도기본-15-3966호,’15.07.28)

- 전력공급 계획통보(물재생시설과-5861호,14.05.08)

- 전력공급계획반영 설계변경실시 업무지시(설비부-5745호,14.05.29)