노후 상수도관 정비 진행사항

□ 사업개요

구 분	단위	합 계	2019년		2020년 이 후
			상반기	하반기
당 초	연장(㎞)	14.5	9.1		5.4
변 경	연장(㎞)	14.5	9.1	5.4

□ ’19년 상반기 추진실적

○ 정비실적                                           (기준일 7. 10.)

구 분	목표(㎞)	실적(㎞)	공정률(%)	비 고
배급수관	6.7	4.0	59.7
송배수관	2.4	0.8	33.3	취소1건 포함

○ 세부현황                                           (기준일 7. 10.)

구 분	공사명	구경(㎜)	연장(㎞)	실적(㎞)	진행(%)
송배수관		합 계	2.4	0.8
	가리봉동121~127번지간 송배수관정비공사	200~900	0.8	0.8	100
	신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사	200~600	0.1		굴착조정
	신방화사거리~공항대로 송배수관 부설공사	200~400	1.5		공사취소
배급수관		합 계	6.7	4.0
	개봉동 335-35번지외 8개소 배급수관 정비공사	80~300	1.5	0.8	53.3
	오류1동 6-6~35-2외 2개소 배급수관 정비공사	80~300	0.8	0.8	100
	신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사	80~300	1.1	0.5	45.4
	신도림동 291번지외 6개소 배급수관 정비공사	80~300	1.5	1.0	66.7
	2019년 상수도공사(연간단가-5건)	80~300	1.8	0.9	50.0

※ 송배수관 공사중 취소 1건은 서울지방국토관리청에서 시행중인 민간투자사업과 공사구간이 중복되어 금년도 공사추진 불가로 대체구간 선정하여 설계중

※ 대체구간 : 경인로외 1개소 송배수관 정비 및 부설공사(D=500㎜ L=1.3㎞)

○ 부진공정 만회대책

- 작업팀 보강으로 공정 단축계획 수립 및 지속적 관리

- 주간/월간 공정보고회 개최 등 실적 관리로 9월말까지 공사 완료 예정

- 공사장별 “밴드” 활성화로 사업소․공단․업체간 신속한 전달 및 소통

□ ’19년 하반기 추진계획

○ 노후 송ㆍ배급수관 구간의 도로굴착 관리부서(구청, 도로사업소 등) 및 유관기관과의 지속적인 업무협의로 조속한 공사추진

○ 하반기 추가사업 개요

- 정비목표 : 5.4㎞

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2019. 12.

- 세부현황

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장 (m)	사업비 (백만원)	건수	연장 (m)	사업비 (백만원)	연장 (m)	사업비 (백만원)
소 계	5,395	4,900	1	630	700	4,765	4,200
양천구	686	600				686	600
구로구	3.672	3,400	1	630	700	3,042	2,700
강서구	1,037	900				1,037	900

- 세부 추진일정

구 분	’19년 세부 추진일정																					비고
	6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
공사시행 방법및현장조사 등 (단가/단위발주검토등)
도로관리심의 요청
설계 및 도면심사
계약심사 및 입찰공고(긴급)
자재구매
단위발주 계약 및 착수
터파기 및 관부설
단위발주분 준공처리
단가계약 공사시행

□ ’19년 하반기 추진실적

○ 구청별 ’19년 하반기 굴착기간 조정시 추가 굴착 승인 및 도로사업소

굴착가능 협조요청

○ 송배수관 대체 시행구간에 대한 공사 및 교통처리용역 설계등 실시

○ 연간단가 시행구간은 지역구분 없이 공사시행(시설물, 누수복구 포함 등)

□ 향후계획

○ 단위사업 발주 및 연간단가공사 시행건에 대하여는 복수의 공사팀 운영 등으로

년내 마무리토록 조치

- 공사 추진중 노후관 발견시 병행공사 시행

○ 공사장 안전관리 및 교통소통 대책 수립, 수계전환 등 사전 준비사항

이행 철저

○ 공사 주민설명회 실시 및 유관기관 협의