앞서가는 송파, 당신을 담습니다
		송파구
수신	서울특별시장(안전총괄과장)
(경유)
제목	송파안전체험교육관 관련 사업계획 변경 승인 및 보조금 교부요청

1. 우리구에서 운영중인 송파안전체험교육관의 시설 위험요소를 제거하고 안전한 교육환경을 조성하기 위하여,

2. 당초의 「VR 체험존 조성 및 시설환경 개선사업」계획을 다음과 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

□ 변경 사항

구분		당초계획		변경(안)
사업명		VR 체험존 조성 및 시설환경개선		(좌동)
세부사업		• VR 체험존 조성 • 시설환경개선 □옥상 등 안전 난간 설치 □계단 추락방지시설 등 설치		• VR 체험존 조성 • 시설환경개선 □옥상 등 안전 난간 설치 □노후 전선 케이블 교체 및 보강
소요예산		100,000천원		(좌동)

□ 변경 사유

- 시설증축 운영에 따른 전력량 증가에도 불구하고 교육관 최초 설립 당시 포설한 전선케이블 보강작업이 없어 최근 전선케이블 일부가 소손 되어 시설 정전 발생

- 정전 지속 시 교육생 사고 및 시설물 손상 초래

3. 아울러 사업추진을 위한 보조금 교부를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 사  업  명 : 송파안전체험교육관 VR체험존 조성 및 시설환경개선

- 교부 요청액 : 금100,000천원(금일억원)

- 사 업 기 간 : 2018.7.~12.

- 지 급 계 좌 : 우리은행 / 1601-10600-021-8 / 송파구

붙임. 송파안전체험교육관 VR 체험존 조성 및 시설환경개선 계획 1부.  끝.

							송 파 구 청 장
★주무관										안전기획팀장										안전담당관
협조자
시행			안전담당관-9874									(	2018.06.28.					)		접수			안전총괄과-7841								(	2018.6.28.					)
우	138-702					서울시 송파구 올림픽로 326															/			http://www.songpa.go.kr
전화		(02)2147-3098						/전송			(02)2147-3885					/	이메일:smiletoday@songpa.go.kr												/	비공개(5)