붙임3

3. 수난구조대운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 『119구조․구급에 관한 법률』제3장 및 제4장

소방방재청 고시 제2013-3호『구조장비 기준』제3조 및 제4조

서울특별시『소방정 운영 및 관리규칙』

○  규    모 : 수난구조대 청사(바지선)3개대 및 구조선박 14대

○  사업기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31.(1년간)

○  총사업비 : 469백만 원('15년 : 469백만 원)

○  추진방식 : 자체추진(일반경쟁 및 전자공개 수의계약 등)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  272백만 원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	469 (100%)	( %)	( %)	1 (0%)	( %)	15 (3%)	94 (23%)	( %)	5 (25%)	( %)	5 (26%)	( %)	350 (100%)
사무관리비	25			1		15			5		4
시설비	94						94
자산취득비	350												350

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 다목적구조보트 설계에 따른 성능 검증 등 신규 건조 : 11월

○ 뚝섬수난구조대 안전시설(도교) 보강 및 보수 : 6월

- 도교의 구조변경 및 안전시설(전동위치 등)보강

○ 여의도수난구조대 장비세척실 등 환경개선공사 : 6월

○ 수난구조장비 유지관리 및 소모성 물품 구매 : 상시집행

Ⅲ. '15년 추진일정(상반기 공정율 22%)

○ 사무관리비(수난구조장비 소모성 물품 등 구매)

- '15.4월 : 수난구조장비 유지관리(목씰등 교체) 계획수립, 입찰공고

- '15.5월 : 물품납품․검수 및 대금지급

- 수난구조장비 고장발생 등 상시집행

○ 시설비(여의도, 뚝섬수난구조대 안전시설 보강 공사)

- '15.3월 : 여의도수난 잠수장비 세척실 등 환경개선공사 계획수립

- '15.3~4월 : 뚝섬수난 안전시설 보강공사 설계용역

- '15.4월 : 뚝섬수난 안전시설 보강공사 입찰공고 및 계약체결

- '15.6월 : 뚝섬수난 안전시설 보강공사 준공검사 및 대금지급

여의도수난 잠수장비 세척실 준공검사 및 대금지급

○ 자산취득비(다목적 구조보트 건조)

- '15.2월 : 계획수립, 일상감사

- '15.3월 : 계약심사 및 계약의뢰

- '15.4월 : 계약체결 및 제작(건조) - 건조기간 6개월 소요

- '15.11월 : 납품․검수 및 대금지급

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 2015회계연도 본예산은 편성되었으나 국고보조금 확정내시 지연 및 예산배정 무기한연장으로 다목적 구조선박 계약체결 완료 후 건조기간(6개월)을 고려 14회계연도내 집행불가 사고이월의 가능성이 상존함.

작성자	대장 : 홍성삼 ☎3706-1961 지대장 : 서형근 ☎3706-1940 담당 : 이상훈 ☎3706-1952