함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	삼성.봉은, 수서배수지 통수 관련 회의결과 통보

삼성․봉은, 수서배수지 통수와 관련하여 그간 추진사항을 점검하고 향후 펌프가동 등 단계별 통수시 예상되는 적수사고 우려 등 급수운영상 문제점 및 추진일정 협의를 위한 회의를 개최하고 붙임과 같이 회의결과를 통보합니다.

◈ 수서배수지 통수 추진일정

- 수서배수지 담수 및 항청소(시운전)---------------’15. 4.20~4.24

- 수계전환(수서→서초) 추진--------------------------- 4.27~5.01

• 수계전환을 통한 수서배수지 공급량 분담

┎ 당 초 : 수서(25천톤/일)

┖ 변 경 : 수서(10천톤/일)+서초(15천톤/일)

- 수서배수지 통수------------------------------------- 5.04~5.08

◈ 삼성․봉은배수지 통수 추진일정

- 탁수발생 등 사전홍보 계획 수립-------------------------’15. 4.24

- 봉은배수지 블록고립 및 수계전환------------------------- ~ 5.08

- 배수지 담수 및 세척------------------------------------- ~ 5.12

- 봉은배수지 단계별(3단계 7구역)------------------------- ~ 6.03

- 삼성배수지 통수----------------------------------------- ~ 6.30

붙임 : 1. 수서배수지 통수 관련 회의결과 1부

2. 삼성․봉은배수지 통수 관련 회의결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,급수계획과장,급수운영과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
★주무관			배수과장			급수부장
협조자	주무관
시행	배수과-2498	(	2015.4.16.	)	접수	급수운영과-6685	(	2015.4.17.	)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개