서울특별시 수선유지급여사업 공사 진행상황 (‵05.09.01기준)

□ 현  황

ㅇ (공사대상)  서울특별시 23개구 (강남구, 서초구제외) 187가구

ㅇ (협약금액)  857 백만원

ㅇ (시공업체)  서울소재 18개 전문기업 및 자활사업단

ㅇ (공사기간)  2015.07.13 ~ 2015.11.30 (공사기간은 여건에 따라 변동가능)

□ 공사 진행현황

시군구		대상가구현황				공사진행현황
		계	경보수	중보수	대보수	계	*견적 조사	공사 진행중	공사 완료
서울특별시	계	187	9	16	162	187	109	71	5
	종로구	6	2	1	3	6	6	-	-
	중구	1	-	-	1	1	-	1	-
	용산구	5	2	1	2	5	4	1	-
	성동구	2	-	-	2	2	2	-	-
	광진구	3	-	-	3	3	3	-	-
	동대문구	5	-	1	4	5	5	-	-
	중랑구	8	-	1	7	8	2	1	5
	성북구	12	1	1	10	12	12	-	-
	강북구	22	-	1	21	22	22	-	-
	도봉구	16	-	-	16	16	9	7	-
	노원구	12	-	1	11	12	12	-	-
	은평구	31	1	4	26	31	7	24	-
	서대문구	10	-	1	9	10	3	7	-
	마포구	7	1	1	5	5	-	5	-
	양천구	9	-	1	8	9	1	8	-
	강서구	6	-	-	6	6	-	6	-
	구로구	6	-	-	6	6	-	6	-
	금천구	3	-	-	3	3	3	-	-
	영등포구	6	1	1	4	6	6	-	-
	동작구	3	-	-	3	3	-	3	-
	관악구	11	1	1	9	11	11	-	-
	송파구	1	-	-	1	1	-	1	-

* 견적조사 : 실공사전 대상가구 방문하여  정확한 공사물량을 산정하는 과정

□ 담당자(실무진) 연락처

구분		담당자
수선유지급여 공사담당		고준성 차장 (02-3416-3753) 박세연 과장 (02-3416-3723) 최치완 계장 (02-3416-3577) 이상훈 주임 (02-3416-3809) 남광현 주임 (02-3416-3578)
자가주택 조사담당	강남 주거급여사업소 (동작,관악,서초,강남, 송파,강동)	고장혁 차장 (02-2182-2751)
	강서 주거급여사업소 (강서,양천,구로,영등포,금천)	강호영 차장 (02-2169-8831)
	강북1 주거급여사업소 (중랑,성북,동대문,성동,광진)	양은영 주임 (02- 964-4214)
	강북2 주거급여사업소 (마포,서대문,은평,종로,용산,중구)	김문희 차장 (02- 762-3167)
	강북3 주거급여사업소 (강북,도봉,노원)	박성규 주임 (02-3392-2671)