「하수도 악취 개선사업」수시배정요구서

1. 사업 현황

□ 사업목적

○ 개인하수처리시설은 물론 하수도시설의 정비를 병행하여 하수도 악취 저감을 극대화함으로써 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 9 ~ 12

○ 총사업비 : 3,350백만원(국비 1,000백만원, 시비 2,350백만원)

○ 시행주체 : 서울시 및 자치구

○ 사업내용 : 악취발생 실태 조사 및 악취발생 요인별 저감시설 설치

정화조 공기공급장치	하수박스 낙차완화시설	맨홀 부관

맨홀 인버트	빗물받이 악취차단장치	하수박스 악취저감장치

□ 사업 필요성

○  국민생활 불편을 초래하는 하수도 악취를 저감하고자 주요 발생원인 정화조에 악취저감시설(공기공급장치)을 설치하고 있으나,

○ 하수박스의 단차 등으로 인하여 악취물질이 재발산되고 있어 악취저감 효과를 극대화하기 위하여 하수도 시설개선 병행 필요

□ 추진경과

○ 유관기관 회의 실시

- 일시 : ‘16.01.15(금) 14:30~17:30 한국상하수도협회 회의실

- 참석 : 총 15명

· 환경부, 서울시, 자치구(하수관로 담당부서), 한국환경공단, 건설기술연구원

- 회의내용 : 사업 추진절차 및 세부시행방법 논의

- 회의결과 : 하수낙차로 인하여 악취 재발산되므로 하수박스 등 단차

지점에 대한 낙차완화시설 설치 등 하수도시설 정비 병행 필요

○ 사업계획서 접수 : ‘16.2.5~2.19

○ 사업지역 선정

- 하수도 악취의 주요 발생·발산원(정화조, 단차지점 등) 위주의 사업시행으로 사업효과 극대화할 수 있는 장소

- 명동관광특구일대, 은평구 연신내 로데오거리 등 시민 왕래가 잦은 지역 우선적으로 시행

○ 세부 사업내용

- 악취저감시설(공기공급장치) 설치 : 405개소

- 하수박스 시‧종점부 악취저감시설(스프레이방식 등) 설치 : 19개소

- 하수박스(하수관 유입부) 낙차완화시설 설치 : 180개소

- 맨홀 부관 및 인버트 설치 : 801개소(부관 30, 인버트 771)

- 빗물받이 이설 및 악취방지덮개 설치 : 1,859개소

- 기타 : 하수박스 격벽, 하수박스 구배조정 등

2. 수시배정 요구

□ 수시배정 요구내역

(단위: 백만원)

예산과목	'16년 예산현액	기배정액	금회 요구액	배정누계	배정잔액	비고
▪하수도 악취개선 (환특, 071-1100-1148-373)	1,000	0	1,000	1,000	0
- 자치단체자본보조(330-03)	1,000	0	1,000	1,000	0

□ 수시배정 요구사유

○ 해마다 증가 추세인 하수도 악취를 저감하기 위하여 악취의 발생 요인별 시설개선(하수도 악취개선)에 국비 지원 필요

○ 관광객이 많이 찾는 도심명소 등 하수도 악취 개선사업의 시급성 및 연내 원활한 재정 집행을 위해 조속한 수시배정 요청

□ 수시배정 요구 세부내역

○ 하수도 악취 개선사업비: 1,000백만원

- 악취 실태조사 및 악취발생 요인별 저감시설 설치 : 1,000백만원

□ 2016년 월별 집행계획

(단위 : 백만원)

'16 예산현액			집행계획
계	전년 이월액	'16예산	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1,000	0	1,000										500		500

3. 향후 계획

○ ‘16.9월      : 사업지역 대상선정 및 세부계획 수립(서울시)

○ ‘16.10~    : 하수도 악취 저감사업 추진

붙임		사업비 산정기준 및 소요예산

□ 사업비 산정기준

구 분	악취저감시설		소요비용 (천원)
정화조(펌프식)	공기공급장치 등		2,000～3,000
토구·하수박스 (시‧종점부)	스프레이 악취저감장치	폭 1m 미만	15,000
		폭 1m 이상	30,000～4,000
하수박스(하수관 유입부)	낙차방지유도장치		500
맨 홀	부관붙임맨홀		500
	인버트		500～1,000
	스프레이 악취저감장치		15,000
빗물받이	악취차단장치		100～150
	빗물받이 이설		2,000

※ 총사업비의 15% 이내에서 악취조사‧측정 및 사업효과 분석비로 사용 가능

□ 서울시 소요예산(국고) : 1,000백만원

구 분		사 업 비 (백만원)			시 설 개 선 물 량 (개소)
					정화조	맨홀		하수박스		빗물받이 등
						부관	인버트	낙차완화	스프레이 장치 등	이설	악취차단 장치	기타
서울시	종로구	386			116			43	3	20	50
	중구	135			37		23	4		10	205
	용산구	40					20			10
	성동구	278			23		60			15	100	하수관로 구배조정 144m
	광진구	157			16	3	20	50	1	10	300
	동대문구	181			14	5	24	5		10	100	하수관로 격벽 1km
	중랑구	129			11	10	85	10		10	350
	성북구	20								10
	강북구	59			13		14			10
	도봉구	49			10		10			10
	노원구	108					10		1	15
	은평구	265				4	41	12	5	25	40
	서대문구	32			16
	마포구	92			20		2			25
	양천구	74			15		25			10
	강서구	41					11			15
	구로구	256			10		125		2	25	554
	금천구	117					25		2	10
	영등포구	335			27	8	167	56	3	23	160
	동작구	107					12		1	32
	관악구	148					38		1	40
	서초구	50					10			20
	강남구	77			29					10
	송파구	140			33		25			25
	강동구	74			15		24			10
	소계	계	국비	지방비	405	30	771	180	19	400	1,859 (기타 2건)
		3,350	1,000	2,350

※ 기타 : 하수관로 구배조정(157,000천원/식, 하수관로 구배조정 개량 및 공사비, 폐기물처리비 등)

하수관로 격벽(100,000천원/km, 하수관로내 격벽설치 및 공사비)