수익금 교부 신청서

1. 사업개요

○ 목    적 : 은평구민체육센터 구조안전진단 결과 중대한 결함이 있는 것으로 진단된 옥외주차장에 지반보강공사를 시행하여 주민 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

○ 대    상 : 은평구민체육센터

○ 사업내용 : 구민체육센터 옥외주차장 지반보강공사 및 타일교체

○ 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 8

2. 소요예산

(단위:천원)

구 분	총사업비	수익금	지방비	기 타
총 계	682	682	0
은평구민체육센터	682	682	0

3. 수익금 교부신청액 및 시기                   (단위 : 천원)

사업명	세부사업명		합계	교부시기
				1/4	2/4	3/4	4/4
총 계			682,000				682,000
은평구민 체육센터 옥외주차장 개보수공사	구조안전성 검토 및 지반조사		10,000				10,000
	지반보강공사	소 계	399,800				399,800
		토사 천공	87,824
		풍화암 천공	93,040
		SEAL제 주입	4,463
		밀크그라우트	185,736
		플랜트 설치·해체	6,097
		PVC PIPE 설치	800
		기타 경비	21,840
	관급자재(시멘트) 구입		71,200				71,200
	옥상 방수공사		70,000				70,000
	타일교체공사	소 계	131,000				131,000
		철거공사	34,000
		타일공사	97,000

첨  부 : 사업계획서, 수익금 통장(사본) 각 1부

은평구청장 (직인)

세부사업계획서

1. 사 업 명 : 은평구민체육센터 옥외주차장 개보수사업

2. 사업시행자 : 은평구청

3. 사업내용

가. 목  적

은평구민체육센터가 구조안전진단 결과 중대한 결함이 있는 것으로 진단된 옥외주차장에 지반보강공사를 시행하여 주민안전에 만전을 기하고자 함.

나. 기  간 : 2014. 12. ~ 2015. 8.(9개월)

다. 장  소 : 서울특별시 은평구 진관1로 40

라. 세부사업내용

구 분	공 사 내 역	소요예산	비 고
총 계		682,000
구조안정성 검토용역	구조안전성 검토 및 지반조사	10,000
지반보강공사	소 계	399,800
	토사 천공	87,824
	풍화암천공	93,040
	SEAL제 주입	4,463
	밀크그라우트	185,736
	플랜트 설치 및 해체	6,097
	기계기구 및 PVC PIPE 설치	800
	기타 경비	21,840
관급자재	시멘트 구입	71,200
방수공사	옥상 방수공사	70,000
타일 교체공사	소 계	131,000
	철거 공사(1,100㎡)	34,000
	타일 공사(1,100㎡)	97,000

마. 기대효과

○ 위험 시설물에 대한 개보수공사를 시행하여 주민안전사고를 예방하고 시설 안정성 확보를 통한 구정 신뢰도 향상

4. 사업추진 계획

추진시기	세부사업내용	비 고
2015. 02. ~ 03.	구조안전진단 및 지반조사용역
2015. 4.	계약심사 및 공사 발주
2013. 5.	지반보강공사 및 타일 교체공사 착공
2013. 8.	준 공

5. 소요예산 내역서

(단위 : 천원)

총사업비	수익금	지방비	기타
682,000	682,000	0

6. 금회 교부신청액 : 682,000천원

첨부 : 소요예산 산출내역서 1부

은평구청장 (직인)

<붙임 1>

소요예산 산출내역서

사업명	항목	금액(천원)	산출내역(천원)	비 고
은평구민 체육센터 옥외주차장 개보수공사	구조검토	10,000	- 주차장 구조검토 및 지반조사 : 10,000
	토사천공	87,824	- 주차장 토사천공(3,190㎡) : 87,824
	풍화암천공	93,040	- 주차장 풍화암 천공(2,610㎡) : 225,000
	SEAL제 주입	4,463	- 천공된 주입구에 SEAL제 주입 (38㎥) : 4,463
	밀크 그라우트	185,736	- 밀크그라우트(1,392㎥) : 244,583
	플랜트 설치 및 해체	6,097	- 플랜트 설치 및 해체(노무비) : 6,097
	PVC PIPE 설치	800	- 기계기구 설치(3회) 및 PVC PIPE 설치(113㎡) : 800
	기타 경비	21,840	- 일반관리비, 환경보전비, 보험료 등 : 21,840
	관급자재 구입	71,200	- 관급자재(시멘트 19,140대) 구입 : 71,200
	방수공사	70,000	- 구민체육센터 옥상 방수공사 : 70,000
	타일 철거	34,000	- 옥외바닥타일 철거(1,100㎡) : 34,000
	타일공사	97,000	- 바닥타일공사(1,100㎡) : 97,000
총계		682,000

첨     부 [수익금 교부 계좌]

가. 계좌번호 : 1601-10600-010-4, 계좌명 : 은평 보조금일반회계

※ 가상계좌로 통장사본 없음