[별지 제2호 서식]

수익금 교부 신청서

1. 사업개요

○ 목   적 : 노후된 공공체육시설의 위험시설물을 개선하여 이용주민들의 안전한 이용환경을 조성하여 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

○ 대    상 : 성북구민운동장, 성북종합레포츠타운, 북악골프연습장

○ 사업내용 : 노후 공공체육시설 위험시설물 안전개선공사

○ 사업기간 : 2014. 12. ~ 2015. 6.

2. 소요예산

(단위:천원)

구 분	총사업비	수익금	지방비	기 타
총 계	626,000	626,000	-
성북구민운동장	415,000	415,000	-
성북종합레포츠	83,000	83,000	-
북악골프연습장	128,000	128,000	-

3. 수익금 교부신청액 및 시기                   (단위 : 천원)

사업명	세부사업명	합계	교부시기
			1/4	2/4	3/4	4/4
총 계		626,000				626,000
성북구민운동장 위험시설물 안전개선	소 계	415,000				415,000
	위험시설물(콘크리트구조물) 개보수 공사	405,000				405,000
	운동장 바닥 평탄화 및 배수로 정비 공사	10,000				10,000
성북종합레포츠 위험시설물 안전개선	소 계	83,000				83,000
	승강기교체공사	28,000				28,000
	실내 골프연습장 망교체 및 철탑보수공사	25,000				25,000
	수영장주요설비 (밸브 등)교체공사	15,000				15,000
	수영장안전사고예방보수·보강공사	15,000				15,000
북악골프연습장 위험시설물 안전개선	소 계	128,000				128,000
	기상관측시스템 설치공사	21,000				21,000
	주차장도로 포장공사	60,000				60,000
	주차장 추락방지용 볼라드 및 차량정지용 스토퍼 설치공사	27,000				27,000
	위험 시설물 개선공사	7,000				7,000
	철탑트러스 이송로 보수공사	13,000				13,000

첨  부 : 사업계획서, 수익금 통장(사본) 각 1부

세부사업계획서

1. 사  업  명 : 성북구민운동장 위험시설물 안전개선공사

2. 사업시행자 : 성북구청장

3. 사업내용

가. 목  적 : 관람석 및 옹벽으로 사용되는 콘크리트 구조물의 안전을 개선하고, 운동장 노후화에 따른 평탄화 및 배수로 공사를 시행하여 각종 안전사고 예방과 적정한 시설물 유지관리 철저를 기하고자 함.

나. 기  간 : 2014. 12. ~ 2015. 6.

다. 장  소 : 서울특별시 성북구 상월곡동 산 1-41

라. 세부사업내용

1. 위험시설물(콘크리트 구조물) 개보수 공사 : 405백만원

2. 운동장 평탄화 및 배수로 정비공사 : 10백만원

마. 기대효과

- 노후된 시설물을 보수·보강하여 이용주민들의 안전한 이용환경을 조성하여 안전사고를 미연에 방지

4. 사업추진 계획

추진시기	세부사업내용	비 고
2014.12~2015.04	콘크리트 구조물 철거공사 : 2,915㎡
2015.04~2015.06	관람석 재설치 공사 : 690㎡
2015.04~2015.06	옹벽 재설치 공사 : 670㎡
2014.12~2015.06	운동장 평탄화 및 다짐공사
2014.12~2015.06	배수로 정비 공사

5. 소요예산 내역서                                         (단위 : 천원)

총사업비	수익금	지방비	기타
415,000	415,000

6. 금회 교부신청액 : 415,000천원

첨부 : 소요예산 산출내역서 1부

성북구청장 (직인)

<붙임 1>

소요예산 산출내역서

사업명	구 분	금액(천원)	산출근거(천원)	비고
성북구민운동장 위험시설물 시설개선공사	콘크리트 구조물 철거	76,000	콘크리트 구조물 철거공사(2,915㎡) = 76,000
	관람석 재설치	221,000	관람석 재설치 공사(690㎡) = 221,000
	옹벽 재설치	108,000	옹벽 재설치 공사 (670㎡) = 108,000
	운동장 평탄화 및 다짐작업	5,000	운동장 평탄화 및 다짐공사 1식 = 5,000
	배수로 정비 작업	5,000	배수로 정비 공사 1식 = 5,000
	계	415,000

세부사업계획서

1. 사  업  명 : 성북종합레포츠타운 위험시설물 안전개선공사

2. 사업시행자 : 성북구청장

3. 사업내용

가. 목  적 : 노후 승강기와 수영장 노후 시설물 안전개선 공사를 시행하여 각종 안전사고 예방과 적정한 시설물 유지관리 철저를 기하고자 함.

나. 기  간 : 2014. 12. ~ 2015. 6.

다. 장  소 : 서울특별시 성북구 한천로 58길 307

라. 세부사업내용

1. 승강기 교체공사 : 28백만원

2. 실내 골프연습장 망교체 및 철탑 보수공사 : 25백만원

3. 수영장 주요설비(밸브 등) 교체 공사 : 15백만원

4. 수영장 안전사고 예방 보수·보강 공사 : 15백만원

마. 기대효과

- 노후된 시설물을 보수·보강하여 이용주민들의 안전한 이용환경을 조성하여 안전사고를 미연에 방지

4. 사업추진 계획

추진시기	세부사업내용	비 고
2014.12~2015.06	승강기 교체공사
2014.12~2015.06	실내 골프연습장 망교체 및 철탑 보수공사
2014.12~2015.06	수영장 주요설비(밸브 등) 교체 공사
2014.12~2015.06	수영장 안전사고 예방 보수·보강 공사

5. 소요예산 내역서                                         (단위 : 천원)

총사업비	수익금	지방비	기타
83,000	83,000

6. 금회 교부신청액 : 83,000천원

첨부 : 소요예산 산출내역서 1부

성북구청장 (직인)

<붙임 1>

소요예산 산출내역서

사업명	구 분	금액(천원)	산출근거(천원)	비고
성북종합레포츠 위험시설물 시설개선공사	콘크리트 구조물 철거	28,000	승강기 교체 공사 1식 = 28,000
	실내 골프연습장 망교체	15,000	실내 골프연습장 망교체 = 15,000
	철탑보수공사	10,000	철탑보수공사 = 10,000
	주요 밸브(버터플라이, 게이트), 스트레이너 등 교체	10,000	주요 밸브(버터플라이, 게이트), 스트레이너 등 교체 1식 = 10,000
	수영장 순환배관 부분 교체	5,000	수영장 순환배관 부분 교체 1식 = 5,000
	수영장 난간교체 및 미끄럼 방지 교체공사	15,000	수영장 난간교체 및 미끄럼 방지 교체공사 1식 = 15,000
	계	83,000

세부사업계획서

1. 사  업  명 : 북악골프장 위험시설물 안전개선공사

2. 사업시행자 : 성북구청장

3. 사업내용

가. 목  적 : 주차장 포장 공사, 추락방지용 볼라드, 차량 정지용 스토퍼를 설치 공사를 시행하여 각종 안전사고 예방과 적정한 시설물 유지관리 철저를 기하고자 함.

나. 기  간 : 2014. 12. ~ 2015. 6.

다. 장  소 : 서울특별시 성북구 북악산로 537-14

라. 세부사업내용

1. 기상관측시스템 설치공사 : 21백만원

2. 주차장 도로 포장 공사 : 60백만원

3. 주차장 추락방지용 볼라드 및 차량정지용 스토퍼 등 설치공사 : 27백만원

4. 위험 시설물 개선공사 : 7백만원

5. 철탑 트러스 이송로 보수 : 13백만원

마. 기대효과

- 노후된 시설물을 보수·보강하여 이용주민들의 안전한 이용환경을 조성하여 안전사고를 미연에 방지

4. 사업추진 계획

추진시기	세부사업내용	비 고
2014.12~2015.06	기상관측시스템 설치공사
2014.12~2015.06	주차장 도로 포장 공사
2014.12~2015.06	주차장 추락방지용 볼라드 및 차량정지용 스토퍼 등 설치공사
2014.12~2015.06	위험 시설물 개선공사
2014.12~2015.06	철탑 트러스 이송로 보수

5. 소요예산 내역서                                         (단위 : 천원)

총사업비	수익금	지방비	기타
128,000	128,000

6. 금회 교부신청액 : 128,000천원

첨부 : 소요예산 산출내역서 1부

성북구청장 (직인)

<붙임 1>

소요예산 산출내역서

사업명	구 분	금액(천원)	산출근거(천원)	비고
북악골프연습장 위험시설물 시설개선공사	기상관측시스템 설치공사	21,000	기상관측시스템 설치공사 1식 = 21,000
	주차장 도로 포장 공사	60,000	주차장도로 포장 공사(총80면) = 60,000
	주차장 볼라드 및 차량정지용 등 설치공사	27,000	주차장 볼라드(30개), 스토퍼(160개) 설치 공사 1식 = 27,000
	그물망펜스철거 및 가림막펜스 등 설치공사	7,000	그물망펜스철거 및 가림막펜스 등 설치공사 1식 = 7,000
	철탑이송로 보수공사	13,000	철탑트러스 이송로 보수공사 1식 = 13,000
	계	128,000

<붙임 2>

교부금 입금은행

은행명 : 우리은행

예금주 : 성북구청장

계좌번호 : 1601-10600-007-4