서울특별시 중랑물재생센터

자가용전기설비 안전진단 수행계획서

2018. 8.

서울동부지사

1. 진단목적

본 진단은 중랑물재생센터의 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여 문제점에 대한 개선방향을 제시하고 이에 대한 대책을 수립하여 향후 전기설비 유지관리 및 개․보수자료로 활용하고, 또한 전기설비의 효율적인 관리방안과 전력설비에 대한 신뢰성을 향상시키는데 목적이 있다.

2. 일반사항

항 목	내 용
고 객 명	서울특별시 중랑물재생센터
진 단 명	자가용전기설비 안전진단
진단금액	36,290,400원 (VAT 별도)
진단기간	2018. 8. 27. ~ 2018. 9. 3.
설치장소	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지)
책임기술자	진단총괄	부장 길성오	현장진단	과장 윤재현

3. 투입인원 : 48명 (현장 : 36명, 내근 : 12명)

4. 진단항목

4.1 자외선영상코로나진단

1) 진단개요

활선상태에서 고압 이상의 전기설비에서 대하여 UV 카메라를 이용, 측정 및

레코딩하여 설비에서 발생되는 코로나, 아크, 부분방전의 위치 탐지

2) 진단대상: 주변전실 및 보조변전실 고압반

4.2 적외선열화상진단

1) 진단개요

전기설비에서 발생하는 열은 대기중으로 발산되는데 이때 발열부에서 대기중으로

복사되는 복사에너지 중 파장이 2～6㎛인 중간 적외선만을 특수 렌지로 감지 영상

처리기에 의해 열화상으로 만들어 각 부위의 온도 분포를 영상으로 출력 비교분석

2) 진단대상: 주변전실 및 보조변전실 고압반

4.3 기타항목

계전기시험, 차단기 연동시험, 절연내력시험, 절연저항측정, 접지저항측정 등.

5. 투입장비

1) 적외선 열화상 진단장비

∙전기사용(무정전)상태에서 비접촉방식으로 이상발열 여부진단

2) 자외선 코로나 영상 진단장비

∙ 충전부와 대지간 자외선 코로나 측정 ∙ 충전부와 절연체 사이의 자외선 코로나 측정

3) 종합계전기 시험기

∙보호계전기 이상유무 판단 ∙3E(지락, 단락, 과부하) 및 4E(지락, 단락, 과부하, 결상)에 대한 종합적인 분석

4) 비파괴절연진단장치

∙회전기, 변압기, 케입블 등의 고압기기 절연내력 측정

5) 디지털 다기능계측기, 절연저항계(500V, 1,000V)

디지털 다기능계측기	절연저항계(500V)	절연저항계(1,000V)
∙ 디지털 다기능계측기 : 전로의 절연저항, 접지저항, 직류·교류 전압, 검상 등 측정 ∙ 절연저항계(500V) : 저압기기 및 전로의 절연상태 측정 ∙ 절연저항계(1,000V) : 고압기기 및 전로의 절연상태 측정 (절연저항, 전압, 저항)

6) 클램프메타, 누설전류계

클램프메타	누설전류계
∙ 클램프메타 : 전기기기 및 배선 등의 직류·교류(전압,전류), 저항, 주파수 등 측정 ∙ 누설전류계 : 무정전 상태에서 배선 및 전기기기의 누전여부 확인

7) 안전장구

6. 납품보고서

○ 수    량 : 3권

○ 납품기한 : 현장진단 완료 후 2개월 이내

7. 예정공정표

(정전진단 8/27 ~ 8/28) 총 12명

설비 및 인원 일정	계전기시험, 차단기 연동시험, 절연내력시험, 절연저항측정, 접지저항측정
8/27 (10:00~17:00)	3원심농축기동, 3원심탈수기동, 3장내급수동, 중랑천용수공급동 (6명)
8/28 (10:00~17:00)	3탈취팬동, 4송풍동, 4유입동, 2방류동, 자양오수펌프장 (6명)

(무정전진단 8/27 ~ 9/3) 총 24명

설비 및 인원 일정	적외선 열화상진단, 자외선 코로나 진단
8/27(10:00~17:00)	주변전실 (6명)
8/28(10:00~17:00)	종합설비동, 자양오수펌프장 (6명)
8/29(10:00~17:00)	3송풍기전기동, 흡수정 및 유입펌프장, 3탈수동 (3명)
8/30(10:00~17:00)	소화조정실, 청계천용수공급동, 동부위생처리장 (3명)
8/31(10:00~17:00)	방류펌프동, 슬러지건조장, 3유입동 (3명)
9/3 (10:00~17:00)	3송풍동, 3본관동, 시설현대화 (3명)