『어린이대공원 놀이동산 놀이기구 제조구매설치』

실정보고 승인내역

사업개요

사 업 명 : 어린이대공원 놀이동산 유원시설 유기기구 제조구매설치

개    요 : 놀이시설 9종 설치 및 1종교체

- 서스펜디드 패미리 코스터 등 외산 7종 설치, 범퍼카 교체

- 슈퍼바이킹 등 국산 2종 설치

도 급 비 : 15,950,000,000원

기    간 : 2012. 12. 21. ~ 2014. 04. 30

도 급 자 : (주)신흥기계, (주)퍼시픽어뮤즈먼트, 월드엔지니어링

승인내용

공종	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	검토 결과
후름라이드	○후름라이드 수처리시설 당초 : 수처리시설 여과기 1대(80톤/시간) 문제점 : 향후 유지보수시 당초 제안한 여과기 1대가 고장발생할 경우 정비기간중 수처리에 어려움이 있을것으로 판단됨	○후름라이드 수처리시설 - 변경 : 수처리시설 여과기 3대 (90톤/시간, 30톤/시간×3대) 대책 : 당초 제안한 여과기 1대가 고장 발생시 정비기간중 수처리 어려움이 있을 것으로 판단되어 30톤/시간×3대로 병렬 및 by-pass 배관 설치로 고장 발생시에도 수처리가 가능토록변경	승인

끝