사업계획(변경)승인서
공공주택건설등에 관한 특별법 제35조 제1항, 동법 시행령 제20조, 제38조 제4항의 규정에 의하여 아래와 같이 사업계획을 승인합니다.
사 업 구 분	■ 주택건설사업 □ 대지조성사업 □ 승인 ■ 변경승인
승 인 번 호	2011-주택공급과 - 40 (제3회 변경) (세곡2지구 6단지)
상 호	서울특별시 에스에이치공사				등 록 번 호	218-82-00136
대 표 자	이 종 수				법인(주민)등록번호	**************
영업소소재지	서울특별시 강남구 개포로 621
대지위치	서울특별시 강남구 세곡2 보금자리주택지구 내 6단지				대지면적(㎡)	26,808.00
건축면적(㎡)	5,686.80				건 폐 율(%)	21.21
연 면 적(㎡)	48,362.56				용 적 률(%)	120.25
동수 (주/부)	12동 / 16동				세 대 수	378세대
주 택 형 별	아파트	국민임대		39㎡ : 39세대 49㎡ : 76세대	총 사 업 비	144,041,032천원 (국민주택기금 20,939,760천원)
		장기전세		59㎡ : 119세대
		공공분양		59㎡ : 92세대 84㎡ : 52세대
착공예정일	2013.12.05.				사 용 검 사 예 정 일	2015.06.09.
동고유번호	동명칭및번호		연면적(㎡)		동고유번호	동명칭및번호	연면적(㎡)
601동	공동주택		2,346.99		610동	공동주택	2,154.66
602동	공동주택		3,302.02		611동	공동주택	1,352.65
603동	공동주택		1,543.50		612동	공동주택	1,173.88
604동	공동주택		3,104.02
605동	공동주택		4,116.34
606동	공동주택		2,864.06
607동	공동주택		3,378.50
608동	공동주택		3,332.02		기타부대시설	관리사무소, 경로당, 보육시설 등 15개동	16,166.81
609동	공동주택		3,378.49		근린생활시설	1개동	148.62
변 경 사 항	∙ 붙임참조
2014년 8월 2일 서 울 특 별 시 장 □

주택건설사업계획 변경승인 내역

구 분			사 업 승 인 내 역		비고
			변경전	변경후
① 대 지 위 치			서울특별시 강남구 세곡동 세곡2 보금자리주택지구 내 6단지
② 대 지 면 적 (㎡)			26,808.00
③ 건 축 면 적 (㎡)			5,699.11	5,686.80
④ 건축 연면적 (㎡)			48,235.73	48,362.56
⑤ 건 폐 율 (%)			21.26	21.21
⑥ 용 적 률 (%)			120.09	120.25
⑦ 주택 규모	동수 및 층수		아파트 12동 378세대 (지하 2층, 지상5～10층)
	주택 형별	국민임대	전용 39㎡ : 39세대 전용 49㎡ : 76세대
		장기전세	전용 59㎡ : 119세대
		공공분양	전용 59㎡ : 92세대 전용 84㎡ : 52세대
		계	총 378세대
⑧ 사 업 기 간			2013.08.30.～2015.02.03.	2013.12.05.～ 2015.06.09.
⑨ 부대 복리 시설 현황	경 로 당		149.09 ㎡	148.94 ㎡
	작은도서관		97.85 ㎡	95.72 ㎡
	관리사무소		131.91 ㎡	135.33 ㎡
	보육시설		203.20 ㎡	203.80 ㎡
	주민공동시설		262.75 ㎡	245.06 ㎡
	경 비 실		44.26 ㎡	41.94 ㎡
	어린이놀이터		711.00 ㎡
	기계,전기,발전기실		542.47 ㎡	445.87㎡
	주 차 장		356대 면적 : 14,596.39 ㎡	346대 면적 : 14,782.25 ㎡
	근린생활시설		148.62 ㎡
⑩ 공동저수시설(TON)			600 ton

구 분				사 업 승 인 내 역						비고
				세대수	전용	주거공용	공급면적	기타공용	계약면적
⑪ 단위 세대 면적 변경	당초	임대	39A	28	39.85	17.14	56.99	28.68	85.67
			39AS	11	39.85	17.14	56.99	28.68	85.67
			49A	60	49.79	21.18	70.97	35.81	106.78
			49AS	16	49.79	21.18	70.97	35.81	106.78
		장기 전세	59B1	24	59.50	26.20	85.70	42.81	128.51
			59B1T	24	59.50	26.20	85.70	42.81	128.51
			59B1S	11	59.50	26.20	85.70	42.81	128.51
			59C1	24	59.72	26.93	86.65	42.97	129.62
			59C1T	24	59.72	26.93	86.65	42.97	129.62
			59C1S	12	59.72	26.93	86.65	42.97	129.62
		분양	59A1	84	59.97	25.91	85.88	43.15	129.03
			59B1	8	59.50	26.20	85.70	42.81	128.51
			84A1	26	84.82	34.89	119.71	61.05	180.76
			84A2	10	84.83	34.72	119.55	61.03	180.58
			84A3	8	84.83	34.61	119.44	61.04	180.48
			84B	8	84.96	35.78	120.74	61.15	181.89

구 분				사 업 승 인 내 역						비고
				세대수	전용	주거공용	공급면적	기타공용	계약면적
⑪ 단위 세대 면적 변경	변경	임대	39A	28	39.86	17.24	57.10	28.80	85.90
			39AS	11	39.86	17.24	57.10	28.80	85.90
			49A	60	49.79	21.29	71.08	35.98	107.06
			49AS	16	49.79	21.29	71.08	35.98	107.06
		장기 전세	59B1	24	59.68	26.26	85.94	43.12	129.06
			59B1T	24	59.68	26.26	85.94	43.12	129.06
			59B1S	11	59.68	26.26	85.94	43.12	129.06
			59C1	24	59.73	26.51	86.24	43.17	129.41
			59C1T	24	59.73	26.51	86.24	43.17	129.41
			59C1S	12	59.73	26.51	86.24	43.17	129.41
		분양	59A1	84	59.98	26.28	86.26	43.34	129.60
			59B1	8	59.68	26.26	85.94	43.12	129.06
			84A1	26	84.83	35.12	119.95	61.31	181.26
			84A2	10	84.83	35.02	119.85	61.31	181.16
			84A3	8	84.83	34.79	119.62	61.31	180.93
			84B	8	84.96	35.76	120.72	61.44	182.16