시 공 계 획 서

공사명 : 청계천 복개구조물 보수공사-성동

2018.  07.

비 호 건 설 (주)

목      차

1. 공사개요

2. 현장조직표 및 비상연락망

3. 공사 세부공정표

4. 주요공정의 시공절차 및 방법

5. 시공일정

6. 주요장비 동원계획

7. 주요자재 및 인력투입계획

8. 품질시험계획

9. 안전대책 및 환경대책

10. 극단적 상황대비 현장조치 시나리오

11. 최초 위험성 평가서

1. 공사개요

1) 공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사-성동

2) 공사위치 : 청개천 복개구조물(좌안 황학교~고산자교 간)

3) 발 주 처 : 서울시 성동도로사업소 시설보수과

4) 감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

5) 시 공 자 : 비호건설(주)

6) 공사기간 : 2018. 06. 22 ~ 2018. 12. 18

7) 공사금액 : 372,991,700원

8) 공사내용 :

시설물명	공 종	단위	수량	비 고
청계천복개 (좌안)	교랑받침 교체	EA	44	황학교~고산자교
	교량인상 및 인하	EA	44	황학교~고산자교
	브라켓설치	개소	20	황학교~고산자교
	단면보수	㎡	50	황학교~고산자교
	부대공	식	1	공사용조명설치 외

2.현장조직표

발 주 처			공 사 감 독				시 공 회 사
성동도로사업소			시설안전본부				비호건설(주)
소 장	신 상 식		본 부 장	김 창 헌			대표이사	김 용 언
							TEL : 02-835-0911
시설보수과			공사감독2처
과 장	박 춘 배		처 장	이 홍 규			현장대리인
							소 장	최 진 필
시설보수과			토 목 1팀				H.P :*************
담당자	이 경 수		팀 장	이 동 화
TEL : 02-2210-1552			TEL : 02-2290-6015				품질관리자
							이사	김 용 언
			토 목 1팀				TEL : 02-835-0911
			담 당		신 원 석
			TEL : 02-2290-6031
							공사팀
							팀 장		최 태 현
							H.P : *************

3. 공사 세부 공정표

4. 주요공정의 시공절차 및 방법

공 정	시 공 절 차 및 방 법
기둥단면 확대공	ㆍ기존단면 콘크리트 치핑 ㆍ철근삽입위한 콘크리트 천공 ㆍ케미칼앵커 주입 ㆍ철근삽입 및 가공, 조립 D25(천공삽입용), 16mm ㆍ거푸집 설치 ㆍ무수축몰탈 타설 ㆍ양생후 거푸집 철거 및 유압잭 인상
교량받침 보수공	ㆍ유압잭 설치 및 교량인상 ㆍ그라인딩 컷팅후 콘크리트 깨기 ㆍ교량받침 설치 ㆍ보강철근 배근 및 철근용접 ㆍ거푸집설치 및 무수축몰탈 타설 ㆍ양생후 유압잭 인하 및 철거
단면보수공	<단면 보수> ㆍ표면처리 및 고압수 세척 ㆍ방청작업(필요시) ㆍ친환경 모르타르 바름 ㆍ탄산화 및 염화방지제 도포
	<균열 보수> ㆍ표면처리 ㆍ좌대 설치 및 씰링 ㆍ에폭시 수지 주입 ㆍ좌대 제거 및 바탕면 평탄화 마감
	<표면 보수> ㆍ표면처리 및 고압수 세척 ㆍ바탕조정제 도포 ㆍ탄산화 및 염화방지제 도포 ㆍ내오염성 탄산화 염해방지제 TOP 도포

5. 시공일정

5.1 공종별 공사 소요일수

시설물명	공 종	단위	수량	공사소요일수	비 고
청계천복개구조물 (좌안)	교랑받침 교체	EA	44	150일
	기둥 단면확대	EA	20
	교량인상	개소	44
	부대공	식	1

5.2 시공일정(공정표)

“공사세부공정표(3장) 참조”

5.3 시행방법

“주요공정 시공절차 및 방법(4장) 참조”

6. 주요장비 동원계획

6.1 공종별 동원계획

6.1.1 받침 교체공 및 단부보강판공

장비명	규격	단위	일투입	비고
착암기	2.7㎥/min	대	3
공기압축기	17㎥/min	대	1
협소부천공기		대	2
고압세척기	200bar	대	1
용접기		대	1
핸드믹서기		대	1
유압잭	500kN	대	88

6.1.2 브라켓공 (1일)

장 비 명	규 격	단 위	투입대수	비 고
콤프레샤	350HP	대	1
착암기		대	4
코아드릴기		대	4
임시환기시설	송풍기	대	2

6.1.3 단면보수공

장비명	규격	단위	일투입	비고
착암기	2.7㎥/min	대	1
공기압축기	17㎥/min	대	1
고압세척기	200bar	대	1
핸드믹서기		대	1
그라인더		대	3

7. 주요자재 및 인력투입계획

7.1 주요자재

자 재 명	규 격	단 위	수 량	비 고
일체형탄성받침	150×300×30	EA	44	사급
무수축 몰탈	25kg	포	412	사급
철근	D16~25mm	TON	1.455	사급
친환경모르타르	BA-100	KG	3,176	사급

7.2 인력투입계획

7.2.1 청계천복개구조물(좌안)

직종	단위	일투입	비고
착암공	인	3
철근공	인	2
형틀목공	인	2
콘크리트공	인	3
특별인부	인	2
보통인부	인	2
보행안전도우미	인	1~2

8. 품질시험 계획

8.1 개요

가. 공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사-성동

나. 시 공 사 : 비호건설(주)

다. 현장대리인 : 최 진 필

8.2 시험계획 횟수

공 종	시험항목	시험방법	설계물량	계획시험횟수	비고
무수축 몰탈	압축 강도	KS F 2426	5.4㎥	1회	품질시험소 또는 품질시험기관 의뢰
일체형 탄성받침	전단계수		44EA	1회	자재공급원 시험성적서
	인장강도	KS M 6518의4
	파단점에서의 신장률	KS M 6518의4
	인열저항	KS M 6783의 트라우저형
	압축영구줄음율	KS M 6518의10		1회
	촉진노화	KS M 6518의7		1회
	오존저항	KS M 6518의15		1회

8.3 시험시설

당 현장은 건설기술진흥법 시행령 제89조 2항의 규정에 의한 초급품질대상공사로서 자재 품질시험은  법 제60조 1항의 규정에 따라 국·공립시험기관 또는 품질검사전문기관에 의뢰하여 시행한다.

[별지 제42호 서식]-건설기술 진흥법 시행규칙 제50조 1항

품질시험.검사대장

일련번호	년월일	시험.검사구분	재료	시험.검사항목	시험기준	시험 결과	시험결과판정	시험검사자		공사감독자확인		비고
								성명	서명	성명	서명

주)1.건설 자재별로 기재합니다.

2.시험성과표 별도 기재합니다.

3.비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등을 기재합니다.

[별지 제43호 서식]-건설기술 진흥법 시행규칙 제51조

품질시험·검사성과 총괄표

공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사- 성동

공사기간 : 2018. 06. 22 ~ 2018. 12. 18           공정:     %

공종	시험.검사종류(재료)	시험.검사 횟수					비고
		계획	실시	합격	불합격	재시험

작성일시 :     년      월       일

작 성 자 :    소속:          직위:

성명:           (인)

[별지 제18호 서식]-건설공사 감독자 업무지침 제32조

품질시험․검사실적보고서 (   월분)

공종	시험검사종목	계획시험 검사 회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실시	합격	불 합격	재 시험 검사	실시	합격	불 합격	재 시험 검사	실시	합격	불 합격	재 시험 검사

〔별지 제4호 서식〕-건설공사 감독자 업무지침 제32조

주요(지급)자재 수불부 공사명 : 청계천 복개구조물 보수공사 -성동 착공일 : 2018. 06. 22. 품 명 : 규 격 : 준공일 : 2018. 12. 18.
월 일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	확 인	비 고

9. 안전대책 및 환경대책

9.1 안전대책

9.1.1 공사개요

□ 공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사-성동

□ 공사기간 : 2018. 06. 22 ~ 2018. 12. 18

□ 도 급 사 : 비호건설(주)

□ 공사감독 : 신 원 석

□ 공사개요 : 받침교체 44개 외

□ 공사위치 : 청계천 복개구조물(좌안 황학교~고산자교 간)

□ 공 사 비 : 372,991,700원

9.1.2 안전관리조직

						안전보건 총괄책임자
						현장대리인				최 진 필
관리 감독자														기술지도계약
서울시설공단														동양안전컨설팅
신 원 석														02-969-0497
							안전담당자
							최 진 필
	장비 안전담당자												보행안전담당자
	최 태 현												보행안전도우미 배치
	전 체 근 로 자

9.1.3 공정별 안전점검계획

□ 자체안전점검

○ 점검시기 및 기록

자체 안전점검 시기

안전점검 결과의

기록 및 확인

작업 시간 전 일일교육 시 사용장비 및 안전상태 점검

안전점검 실시 후 그 결과를 수시위험성평가서의 일일   교육내용에 기록

○ 공종별 점검 항목

구 분	세 부 내 용	비 고
받침교체, 브라켓설치	ㆍ작업발판 등 안전시설 ㆍ자재, 콘크리트 파편에 대한 안전여부 ㆍ지장물 현황, 강우 유입	청계천 복개 구조물 보수공사

9.1.4 공사장 주변 안전관리계획

□ 비상사태 발생시 긴급 연락체계

성동경찰서 02-2286-0300				서울시설공단 02-2290-6031
		공 사 현 장
성동구청 종합안내 02-2286-5114				도시가스 강북1 고객센타 02)2094-0114
		사고발생 ◦ 누가 ◦ 무엇을 ◦ 언제 ◦ 어떻게 ◦ 어디서 ◦ 왜
성동도로사업소 02-2210-1552				동대문소방서 02)2212-0119
서울연세병원 02-2293-7582				한국가스공사 120

9.1.5 안전관리비 집행계획

□ 안전관리비의 산출 및 사용계획

건설업체명	비호건설(주)	공 사 명	청계천복개 (좌안) 보수공사-북부
소 재 지	서울시 영등포구 도영로22길 38	대 표 자	김 용 언
공 사 금 액	372,991,700원	공사기간	2018.06.22 ~ 2018.12.18
발 주 처	서울시 성동도로사업소	누계공정율	%
계 상 된 안전관리비	6,949,839원	사용할 안전관리비	7,100,000원

항 목	사용내역	금 액(원)	비율
1.안전관리자등 인건비 및 각종업무수당	-안전담당자 업무수당 -건설장비 유도원 노임 등	\1,300,000	18%
2.안전시설비등	-별도계상되지 않는 주요 안전시설일체	\200,000	3%
3.개인보호구 및 안전 장구 구입비 등	-각종 개인보호구의 구입,수리,관리비등	\4,700,000	66%
4.안전진단비등	-안전,보건 진단 -유해작업장 환경측정	-	-
5.안전보건 교육비 및 행사비	-자체 안전교육 -기자재 비용	-	-
6.근로자 건강진단비 등	-건강 진단비 -구급 의약품	-	-
7. 건설재해 예방 기술 지도비	-건설재해예방 위탁 수수료	\900,000	12%
계		\7,100,000	100%

□ 개인보호구 지급계획

구분	안전화	안전모	각반	안전조끼	장화 (필요시)	비고
지급수량 (인당)	1회	1회	1회	2회	1회

9.1.6 안전교육계획

□ 산업안전보건법상 안전보건교육 기준

구 분	교 육 기 준	근 거
정기교육		법 제31조 규칙 제33조
	정 기 교 육
	관리감독자		근 로 자
∎ 관리감독자	∎ 전 근로자
∎ 반기 8시간이상 또는 연간 16시간이상	∎ 매월 2시간 이상 ※ 1일 10분 이상
수시교육		법 제31조 규칙 제33조
	수 시 교 육
	신규채용시		작업내용변경시		특 별
∎신규채용근로자	∎작업변경근로자	∎유해·위험작업에 종사하는 근로자
∎1시간 이상	∎1시간 이상	∎2시간 이상

□ 안전교육계획

○ 교 육 자 : 안전총괄책임자 또는 관리감독자

○ 교육대상자 : 현장 근로자

○ 교육시간 : 매일 작업 시작전 10분이상 교육(매월 2시간 이상 충족)

⇒ TBM시행 및 BAND 기록관리

○ 기록관리 : 수시위험성평가서에 기록관리

○ 교육내용 : 당일작업의 공법이해, 당일 작업 위험요소 확인 및 예방대책 교육등

○ 특별교육 대상 공종

- 해당사항 없음.

9.2 환경대책

9.2.1 관리대상

소음, 진동, 건설폐기물,

9.2.2 행정사항

구 분	신 고 내 용	신고기한	비고
소음, 진동	특정공사 사전신고	공사개시 7일전
건설폐기물	사업장폐기물 배출자 신고	폐기물배출 7일전

9.2.3 이행방법

관리항목	관 리 방 법
소 음	∙소음한도 65dB이하로 공사시행 ∙조명용 발전기 저소음형 사용(55dB이하)
건설폐기물	∙폐기물 성상별로 구분 철저(혼합 금지) ∙폐기물 당일 배출 원칙 준수 ∙폐기물인계서 기록 철저(적재량 표시)

< 생활소음 규제기준의 범위 >               단위 : dB(A)

대상지역	대상소음 시간별	조석 (05:00～08:00)(18:00～22:00)	주간 (08:00～18:00)	심야 (22:00～05:00)
주거지역	공사장의 소음	65 이하	70 이하	55 이하

9.2.4. 환경보전비 사용계획서

환경보전비 사용계획서
	건설업체명	비호건설(주)		공 사 명		청계천 복개구조물 보수공사-성동
	소 재 지	서울시 영등포구 도영로22길 38		대 표 자		김 경 언
	공 사 금 액	372,991,700원		공사기간		2018.06.22 ~ 2018.12.18
	발 주 처	서울시 북부도로사업소		누계공정율		%
	계 상 된 환경보전비	1,259,243원		사용할 환경보전비		4,000,000원
	사 용 금 액
	항 목		금 액		비 율		비 고
	계		\1,300,000		100%
	1. 환경오염방지시설 설치 및 운영비용		\1,000,000		77%
	2. 폐기물의 처리 및 재활용 비용		\300,000		23%
	3. 현장 환경정리 비용
	4. 환경자료 및 홍보물 구입비용
	5. 기타비용		-
	위와 같이 환경보전비 사용내역서를 작성하여 제출합니다. 2018 년 07 월 일 작성자 직위 현장대리인 최 진 필 (인)

환경보전비 사용계획서

가) 환경오염방지 시설 설치 및 운영비용

내 용	수량(명)	수량	단 가	금 액	비 고
분진흡입기 설치	대	1	1,000,000	1,000,000
계				1,000,000

나) 폐기물의 처리 및 재활용  비용

내 용	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
분진망 설치	롤	10	30,000	300,000
계				300,000

다) 현장 환경정리 비용

내 용	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
계

라) 환경자료 및 홍보물 구입비용

내 용	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
계

마) 기타비용

내 용	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
계

위험성평가 실시규정

2018.

청계천 복개구조물 보수공사-성동

결 재	공사감독	현장소장	업무담당
	신 원 석	최 진 필	최 태 현

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
Ⅰ. 목적 현장소장이 시공할 공사의 특성을 고려하여 공정별 유해․위험요인을 파 악하고 평가하여 그 결과를 안전보건 목표 및 안전보건활동 추진계획 수 립시 반영하여 개선대책 수립 및 작업방법을 개선함으로써 재해를 예방하 고 지속적으로 개선․관리하는데 목적이 있음 Ⅱ. 위험성평가 방법 (업무 체계도) Ⅲ. 위험성평가 업무절차(내용 또는 방법) 1. 위험성평가서 작성방법 및 현장시스템 교육 가. 안전담당자는 안전보건경영시스템의 운영주체인 현장소장, 공종별 관리감독자, 협력업체소장, 작업반장에게 위험성평가 방법과 현장시스템(PDCA)에 대한 자료배포 및 교육을 자체적으로 실시한다. 2. 월간 예정공정표 작성 가. 공종별 관리감독자 및 협력업체소장은 향후 진행될 작업에 대한 월간예정공정표를 작성한다. 나. 월간예정공정표 양식은 업체별 양식에 맞춰 차기 주기 공정을 수립한다.

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
3. 위험성 평가 실시 가. 공종별 관리감독자는 해당 공종에 대한 위험성평가 실시전 협력업체소장, 작업반장과 상의후 작업 공종에 따른 단위작업을 분류한다. 나. 공종별 관리감독자는 다음사항을 고려하여 협력업체소장 및 작업반장과 상의후 재해로 발전할 가능성이 있는 공종의 위험요인, 대상자 및 원인 등을 미리 파악한다. 1) 불안전한 상태 : 작업체계 및 절차/방법, 취급물질의 위험성 2) 불안전한 행동 : 작업자 숙련도 등 개인특성, 작업 이해정도, 현장 위험성에 대한 무지, 개인질병과 신체상태 3) 공사 진행과정상 나타날 수 있는 주변여건(변동성) 등 다. 공종별 관리감독자는 예상된 위험요인을 도출하여 붙임의 위험성평가표에 기입한다. 1) 위험성평가서의 위험요인으로 예상되는 재해형태를 기입하고 위험의 정도에 따른 위험등급을 표기하고 관리여부를 정한다. 4. 위험성평가의 적합성 검토·승인 및 확정 가. 현장소장이 주관하여 위험성 평가회의를 실시한다. 나. 안전담당자는 위험성 평가 회의중 중점관리 사항을 재검토하고 추가적인 위험요인이나 보완사항이 있을 경우 위험성 평가표에 추가 기입한다. 다. 현장소장은 공종별 관리감독자가 도출한 위험요인, 위험등급, 개선대책과 추가위험요인에 대한 검토를 실시하고 위험성평가표에 검토의견을 작성한 한다. 라. 현장소장은 검토의견 작성시 공사감독의 검토의견을 반영한다. 5. 개선대책 이행 가. 현장소장, 안전담당자, 공종별관리감독자, 협력업체소장, 작업반장은 제기된 위험요인에 대하여 해당 공종의 개선대책을 조치한다.

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
6. 적정성 검토(이행여부 점검) 가. 각 공종별 관리감독자는 위험요인에 대한 개선대책 이행여부를 점검하여 안전담당자에게 제출한다. 나. 안전담당자는 개선대책 이행여부를 확인하고 점검표를 작성한 후 현장소장에게 제출한다. 그 중 미조치된 개선대책은 차기 위험성평가 회의시 재협의 한다. 다. 안전담당자는 안전점검을 실시하여 안전점검표를 작성한 후 현장소장에게 제출한다. 그 중 미조치된 개선대책은 차기 위험성평가 회의시 재협의한다. 7. 위험성평가 방법 가. 추진절차 1) 1단계 : 사전준비[평가대상 공정(작업) 선정] - 정확한 작업공종의 분류가 중요, 작업공정 흐름도에 따라 평가 대상 공종이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정 2) 2단계 : 유해․위험요인 파악(도출) - 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 위험요인을 상세히 파악 3) 3단계 : 위험성 추정 - 위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성의 조합 4) 4단계 : 위험성 결정 - 사업장 특성에 따라 기준이 다를 수 있으며 위험성을 추정한 결과 허용할 수 있는 위험, 허용 불가능한 위험을 결정하는 것 5) 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행 - 구체적인 위험성 감소대책을 수립/실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어오도록 하는 절차 6) 기록 : 사용된 기법(Tool) 등 위험성평가를 수행한 기록

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
나. 위험성 평가 시기 1) 최초평가 : 시공계획서 제출시 2) 수시평가 : 1주일(공사감독 지원방식) 단위 주기로 운영하는 것을 원칙으로 하되, 공사감독 지원방식의 경우 주공정이 변화할 때는 1주일 이내에 수시 위험성 평가를 실시할 수 있다. 3) 법규의 제ㆍ개정으로 위험성 평가기준이 변경 시에 실시한다. 4) 기타 위험성평가 시기는 다음과 같다. ① 새로운 작업 공종 개시 전 ② 작업의 변경이 필요한 경우 ③ 새로운 공법, 자재를 사용할 경우 ④ 중대사고 및 재해 우려가 예상되는 경우 ⑤ 기존 작업 공종에 대한 정기적인 위험성을 검토할 경우

위험성평가 실시규정

1. 실시의 목적 및 방법

다. 위험성 평가 세부 절차

<시공사 자율방식>

구 분	이 행 시 기	내 용
최초위험성 평가서 작성 ․ 제출 (시공사 → 공사감독)	시공계획서 제출시	․ 위험성 평가 DB를 참고하여 경험, 현장의 특성 등을 고려한 최초 위험성 평가서 작성 (별지 1 서식) ․ 안전관리계획서에 첨부
최초 위험성 평가 적정 여부 검토 ․ 결과통보 (공사감독 → 시공사)	최초 위험성 평가서 접수일로부터 5일이내 (휴일포함)	․ 검토내용 (누락공종여부, 근로자의 작업과 관계되는 위험요소 적정성, 위험요인의 감소대책 적정성 등) ․ 검토결과 반영토록 시공사에 통보
일일 위험성 평가서 작성․제출 (작업절차, 위험요인, 예방대책) (시공사 → 공사감독)	작업 전일 18시까지	․최초 위험성 평가 및 작업일의 기상여건, 현장상황 등을 감안하여 명일 작업계획 및 위험요인․예방대책 작성 제출 (별지 2-1 서식) ․당일 예방대책 이행여부 및 증빙자료 등을 감독에게 제출 (별지 2-1 서식)
공정회의 개최 (시공사 ↔ 공사감독)	작업 전일 18시까지	․명일 작업 계획 및 위험성 평가서 확정 (적정성 검토 및 추가의견 기록) ․당일 예방대책 이행여부 및 증빙자료 확인 *감독확인(서명) ※ 감독 현장부재시 스마트폰 앱(카카오톡 등)을 활용하여 피드백 실시
TBM활동 및 안전교육 실시 (시공사)	작업시작 전	․현장별로 현장대리인 책임하에 실시 ․사진, 참석자 명부, 내용 등 기록유지
일일 위험성평가 현장 게시 (시공사)	작업시작 전	․일일 위험성 평가서 현장게시 (게시판, 작업차량 앞유리 등 활용)
중점관리대상 이행(시공사) 이행 여부 모니터링(공사감독)	작업중	․안전순찰 및 이행활동(시공사) ․현장순회, 보고등을 통한 모니터링(공사감독)
공사감독일지 작성․결재 (공사감독 → 담당팀장)	작업 이후	․일일 위험성 평가서 첨부하여 감독일지 작성

※ 공사감독 현장부재시 이메일, 스마트폰 앱(카카오톡, 밴드) 등을 활용하여 의사소통 실시

위험성평가 실시규정

1. 실시의 목적 및 방법

<공사감독 지원방식(우리현장)>

구 분	이 행 시 기	내 용
최초위험성 평가서 작성 ․ 제출 (시공사 → 공사감독)	시공계획서 제출시	․ 위험성 평가 DB를 참고하여 경험, 현장의 특성 등을 고려한 최초 위험성 평가서 작성 (별지 1 서식) ․ 안전관리계획서에 첨부
최초 위험성 평가 적정 여부 검토 ․ 결과통보 (공사감독 → 시공사)	최초 위험성 평가서 접수일로부터 5일이내 (휴일포함)	․검토내용 (누락공종여부, 근로자의 작업과 관계되는 위험요소 적정성, 위험요인의 감소대책 적정성 등) ․ 검토결과 반영토록 시공사에 통보
수시 위험성 평가서 작성 ․ 전달 (공사감독 → 시공사)	매주 금요일 18시까지	․최초 위험성 평가 및 작업일의 기상여건, 현장상황 등을 감안하여 다음주 작업공종 및 위험요인․예방대책 작성하여 전달 (별지 2-2 서식) ※ 1주간 이루어질 모든 작업을 고려하여 평가서 작성(현장 작업조건, 구간, 공법, 기상 등)
TBM시 교육 실시 (시공사)	매일 (작업시작 전)	․수시 위험성 평가서 내용 교육실시 (사진 등 증빙자료 기록유지)
수시 위험성평가 현장 게시 (시공사)	(매일) 작업시작 전	․수시 위험성 평가서 현장게시 (게시판, 작업차량 앞유리 등 활용)
중점관리대상 이행(시공사) 이행 여부 모니터링(공사감독)	작업중	․현장입회 및 이행활동(시공사) ․현장순회, 보고등을 통한 모니터링(공사감독)
이행결과 제출 (시공사 → 공사감독)	금요일 15시까지	․감독이 작성하여 전달한 수시위험성 평가서 내용에 이행여부를 표기하고 증빙자료(사진 등)을 첨부하여 제출
공사감독일지 작성․결재 (공사감독 → 담당팀장)	매주 금요일	․1주일 중 금요일 1회는 감독일지 작성시 수시위험성 평가서를 첨부

※ 공사감독 현장부재시 이메일, 스마트폰 앱(카카오톡, 밴드) 등을 활용하여 의사소통 실시

라. 첨부  :  위험성 평가서

	위험성평가 실시규정
	2. 실시담당자 및 책임자의 역할
Ⅰ. 조직의 구성 1) 구성원의 역할 ① 현장소장 (가) 현장 시공공정 및 관련 운영활동에 대한 위험성평가 총괄책임 (나) 위험성평가표 최종검토 및 위험성평가 등급 최종결정 (다) 기술적 검토사항 및 작업허가서 운영 총괄책임 (라) 위험성평가 결과 Feed back을 통한 개선 및 최종결정 ② 공종별 관리감독자 (가) 위험성 평가기법을 숙지 (나) 대상공정(작업)의 안전보건정보(아차사고 사례 포함) 수집 (다) 팀원 간 안전보건정보 교환을 통한 완전한 이해 (라) 해당 공종의 근로자에 대한 안전교육 실시 (마) 작업장(현장) 시공공정 및 관련 운영활동에 대한 위험성평가 운영 (바) 위험성평가를 실시하기 위한 인원의 배치를 행하는 것 (사) 관계자에 대한 교육훈련을 하는 것 ③ 작업반장 (가) 사업주의 위험성평가에 대한 의향을 근로자에게 올바르게 전달하는 것 (나) 해당 공정(작업)에 대한 위험성평가표 최초 의견제출 (다) 평가대상 공정(작업)에 대한 작업지식과 경험을 보유 ④ 안전담당자 (가) 현장 위험성평가 1차 검토 및 결과에 대한 기록 유지 (나) 공종별 관리감독자, 협력업체소장, 작업반장에 대한 지속적인 교육 (다) 검토결과에 대한 개선계획을 공사감독, 현장소장 등 위험성평가회의 참석자와 협의 확정 ④ 공사감독 (가) 현장의 위험성 평가 이행여부 확인 (나) 위험성 평가서 최종 확인 (다) 위험성 평가 회의시 검토의견 제출

위험성평가 실시규정

2. 실시담당자 및 책임자의 역할

Ⅱ. 평가팀 구성 및 역할

: 관리감독자 및 협력업체 소장 등은 하도급계약 체결 전인 관계로 미정임.

계약체결 후 수정 예정.

						공사감독
						성 명	신 원 석
						연락처	02-2290-6031
						현장소장
						성 명	최 진 필
						연락처	*************
											안전담당자
											성 명			최 진 필
											연락처			*************
관리감독자(브라켓)						관리감독자(받침교체)						관리감독자(단면보수)
성 명	남성범					성 명		남성범				성 명			최양호
연락처	*************					연락처		*************				연락처			*************

담당자별 세부 업무분장

구성원	업무분장
실시책임자 (현장소장)	- 조직구성원 역할 및 권한에 대한 업무분장 실시 - 위험성평가 회의 주관 - 위험성평가표 승인 - 일일 안전점검 결과분석 및 피드백 승인 - 사업장(현장)의 안전보건교육 및 훈련계획 승인 - 사업장(현장) 안전관리를 위한 예산 집행 승인
총괄평가 담당자 (안전담당자)	- 사업장(현장) 위험성평가 회의준비 및 진행, 서기역할 - 위험성평가표 취합 및 검토 - 확정 위험성평가표 정리, 배포 - 일일 안전교육 실시[TBM시 위험성평가 내용 교육] - 위험성평가 관련 문서 및 기록 작성 지원 - 안전점검실시 후 차기 회의 시 Feed Back 자료 준비
실시담당자 (공종별 관리감독자) (미 정)	- 공정(종)별 평가담당자 공정표 작성 - 해당 공정(종)별 위험요인 추정 및 위험성 결정 - 위험성평가회의 참석 - 해당 공정(종)별 위험성평가표 교육 실시 [작업지시전달 시 또는 TBM 시 위험성평가표 내용 교육실시] - 위험성평가표를 활용한 현장 안전점검[집중관리 대상]실시 - 점검결과 피드백 실시

위험성평가 실시규정

3. 실시 연간계획 및 시기

Ⅰ. 목적

현장의 모든 안전활동을 계획에 맞춰 실시함으로써 …중략… 효율           적이고 효과적인 현장의 재해예방 활동을 전개하기 위함

Ⅱ. 업무 체계도

구 분

현장소장

안전담당자

공종별 관리감독자

협력업체, 작업반장

비 고

Plan

안전계획수립

(년간/월간/일일 등)

검토 및 협조

안전계획 승인

안전활동 계획 숙지 및 이행

위험예지활동, TBM 등 참관/지원

작업전 TBM 실시 등

근로자 이행 및 확인

Do

Check

Action

Ⅲ. 업무절차(내용 또는 방법)

1. 안전보건목표의 수립

가. 현장소장은 본사의 방침 및 목표에 부합하고 실시계획서에 의거하여 실시하는 위험성평가 결과에 따라 현장의 세부목표를 설정하고 세부 추진계획을 수립한다.

나. 현장소장은 현장의 세부 추진계획을 이행하고 안전관리자는 이에 대해 이행계획을 실행한다.

다. 안전보건목표는 전체 공사기간에 대한 목표, 연간목표, 작업장소별 목표, 단위작업에 대한 목표 등으로 분리할 수 있다.

라. 안전담당자는 다음사항 등을 고려하여 안전보건목표를 수립 한다.

① 안전보건 위험요인 평가결과 중점관리 대상

② 현장소장(경영자)의 의지

③ 법규와 기타요건

④ 이해관계자의 견해

	위험성평가 실시규정
	3. 실시 연간계획 및 시기
2. 안전활동 계획수립 가. 안전담당자는 현장 안전활동을 효과적으로 하기 위해 '년간, 월간 안전활동계획'을 수립하며 현장소장의 승인을 득한 후 이행한다. 나. 년간 안전활동계획 포함사항 1) 매년 초 또는 현장 개설시 전반적인 현장안전활동 계획수립 2) 차량계 건설기계 및 하역운반장비, 중량물취급, 유해ㆍ위험기계기구, 장비조립 및 해체 등 현장 안전활동계획 수립 3) 관리감독자, 근로자 등 제반 교육관리계획 4) 일상안전점검 및 취약시기 안전점검계획 5) 협의체회의 등 의사소통 계획 6) 일일 안전활동 Cycle 다. 월별 안전활동계획 1) 년간계획을 기초로하여 매월 월간안전활동을 수립 2) 현장시스템 운영 Cycle활동(위험성평가→협의체회의→교육→점검 시기) 3) 안전의 날 행사 및 노사합동안전점검계획 5) 외부기관 점검계획 및 수검 라.안전보건활동 일정수립 1) 다음사항 등을 고려하여 현장 안전보건 활동계획을 일정기간(월/주간)별로 적용 가능한 구체적인 세부계획을 수립하여 현장소장의 승인을 득하고 게시ㆍ공표한다. ① 현장시스템 CYCLE 주기(1회/2주) ② 위험성평가 활동(작성~승인의 시기) ③ 위험성평가회의 개최 방법 및 실시 시기 ④ 관리감독자 및 근로자(업체별/직종별,공정별)교육 실시 일자 ⑤ 현장시스템 안전점검 및 월별(노.사합동)안전점검 실시 시기 ⑥ 법규 및 기타 안전보건활동에 관한 사항 등

	위험성평가 실시규정
	3. 실시 연간계획 및 시기
※ 위험성평가 및 안전활동(예시) 연간추진계획에 따라 주기적으로 또는 수시로 위험성평가 및 안전활동 실시 [ 안전활동의 예시 ] 3. 안전활동계획 검토 및 협조 가. 안전활동계획에 변경사항이 있을 경우에는 안전담당자와 협의하여 일부 조정할 수 있다. 4. 안전활동계획승인 가. 현장소장은 안전관리자가 수립하여 보고한 안전활동계획을 검토하고 승인한다. 나. 현장소장은 현장 특성에 맞게 안전활동계획을 시기에 따라 조정할 수 있다. 5. 안전활동계획 숙지 및 이행 가. 공종별 관리감독자 및 협력업체, 작업반장 등은 안전활동계획에 참여하는 자는 승인 된 안전활동계획을 숙지하여 이행하여야 한다.

	위험성평가 실시규정
	3. 실시 연간계획 및 시기
나. 공종별 관리감독자, 협력업체 소장, 작업반장은 위험성평가 결과를 효과적으로 운영하기 위해서 안전활동을 이행한다. 1) 아침조회 참석 및 T.B.M활동 실시 2) 월별 안전활동계획에 의한 작업별 위험성평가 및 등록부 기재, 회의 및 교육참석 3) 일일 안전작업사항을 작업반장 및 근로자에게 전달실시 4) 일일순찰 점검활동 및 합동안전점검에 참여실시 5) 안전점검표에 기재된 조치사항 확인실시 6) 업무분장에 의한 그 밖의 안전활동 Ⅲ. 위험성평가 실시시기 1. 최초평가 : 시공계획서 제출시 2. 수시평가 : 1일(시공사 자율방식) 또는 1주일(공사감독 지원방식) 단위 주기로 운영하는 것을 원칙으로 하되, 공사감독 지원방식의 경우 주공정이 변화할 때는 1주일 이내에 수시 위험성 평가를 실시할 수 있다.

	위험성평가 실시규정
	4. 실시의 주지방법
Ⅰ. 안전보건방침의 표명 1. 현장소장은 안전보건수준을 향상, 도모하기 위하여 안전보건에 대한 기본적인 자세와 함께 중점과제를 「안전보건방침」이라고 표명하고, 조직원 및 근로자에게 주지시킬 필요가 있다. 2. 안전보건방침은 조직의 미래에 대한 비전과 일치하여야 하며, 현실적이어야 하고 조직이 처한 위험성의 본질을 과장하거나 과소평가해서는 아니 된다. 3. 따라서, 위험성파악, 위험성평가 및 개선대책은 성공적인 안전보건경영체제의 핵심이며, 조직의 안전보건방침에 반영되어야 한다. Ⅱ. 위험성평가 회의 1. 개요 가. 위험성평가 회의는 사전준비 다음단계로 반장급 이상의 공종별 관리감독자가 모여 위험성 추정, 위험성 결정 및 감소대책을 수립하는 단계 2. 회의진행 가. 가급적 회의 총괄은 실시책임자인 현장소장, 회의진행은 안전담당자가 서기를 병행 ① 회의시간은 회의에 참여하는 공종별 관리감독자 수, 회의 장소 및 시간 등 사업장 특성에 맞게 현장소장이 적절히 운영 ② 회의에 참여한 구성원이 알고 있는 현장별 특성을 최대한 수렴하여 위험성 결정 ※ 위험성평가회의는 시간․장소․인원을 감안하여 탄력적으로 운영하되, 위험성이 높은 유해․위험요인이 우선적으로 집중관리 될 수 있어야 함

	위험성평가 실시규정
	4. 실시의 주지방법
Ⅲ. 위험성평가 실시의 주지방법 1. 위험성평가 실시에 대한 홍보 및 실시결과에 대해 직원 및 근로자에게 주지시키는 방법에는 다음과 같은 방법이 있다. 가. 위험성평가 실시 홍보방법 ① 현장소장이 안전보건행사 등에서 구성원에게 홍보 및 주지 ② 조직 구성원이 읽을 수 있도록 현장게시판에 공지하는 방법 나. 위험성평가 실시 결과에 대한 주지방법 ① 위험성평가표를 현장 내 게시 ② 사업장내 TBM 등 안전보건활동 시 관리감독자가 구두로 전달

	위험성평가 실시규정
	5. 실시상의 유의사항
Ⅰ. 유의사항 1. 실시 상 유의사항 가. 위험성평가는 현장 내의 모든 공정(종) 및 업무에 대한 활동을 대상으로 한다. 나. 관리감독자는 건설활동 전반에 관련된 안전보건 측면의 위험성 식별과 평가를 실시하기 위한 절차를 수립한다. 다. 공정(종) 작업자가 위험성 평가를 통하여 중대한 위험을 초래할 결함을 발견하고, 작업자에게 미칠 수 있는 위험도를 인식한 경우에는 작업을 중지하고, 대피한 후 관리감독자에게 보고하는 절차를 마련하여야 한다. 라. 위험성평가는 일상 활동, 비상사태 및 과거 또는 현재에 발생되었거나 향후 발생될 가능성이 있는 위험성을 파악하고 평가하여야 한다. 2. 위험성평가 인정기준 상 유의사항 가. 사업장은 보유․사용하고 있는 위험기계․기구 등 산업기계, 유해물질 및 유해위험공정에 대한 위험성평가를 실시할 책임이 있다. 나. 사업장은 사업장의 특성․규모․공정특성을 고려하여 적절한 위험성평가 기법을 활용하여 절차에 따라 실시하여야 한다. 다. 위험성평가 대상에는 모든 근로자(공사업체, 협력업체, 방문객 포함)에게 안전보건상 영향을 주는 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 조직 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 위험시설 (나) 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질 (다) 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등) (라) 발생할 수 있는 비상조치 작업 라. 위험성평가 시 안전보건 상 영향을 최소화 하기위해 가능한 다음사항을 고려할 수 있다. (가) 교대작업, 야간근로, 장시간 근로 등 열악한 근로조건에 대한 근로자의 건강증진 방안 (나) 일시고용, 고령자 등 취약계층 근로자의 안전보건 측면 (다) 교통사고, 체육활동 등 행사 중 재해와 사고 마. 사업장은 위험성 평가결과, 위험을 제거 또는 감소시키기 위한 조치계획을 안전보건활동 추진계획에 포함하여 실시하고 모니터링 하여야 한다.

	위험성평가 실시규정
	5. 실시상의 유의사항
Ⅱ. 기록관리 1. 개요 가. 사업장에서 위험성평가를 수행한 기록은 그 자체로도 유용한 도구이므로 제반 운영활동 사항을 문서화하여 기록․관리하여야 한다. 나. 기록에는 위험성평가에 사용된 기법(Tool)과 모든 부분이 평가되었는지를 알려주기 위한 자료로 활용한다. 2. 기록에 포함하여야 할 사항 ① 위험성 평가서 평가일 ② 평가대상 공정(종)명 및 공정(종)의 구체적인 작업내용 ③ 유해․위험요인 파악 ④ 개선대책(위험성 감소대책) ⑤ 개선대책 이행여부 확인 ⑥ 그 밖에 필요한 사항으로 사업장에서 정한 부분 3. 보존기간 가. 위험성평가에 관한 기록물의 보존연한은 준공후 3년으로 한다.

10. 극단적 상황대비 현장조치 시나리오

극단적 상황대비 현장조치 시나리오

(청계천 복개구조물 보수공사-성동)

						공사감독2처

극단적 상황대비 현장조치 시나리오

(청계천 복개구조물 보수공사-성동)

18. 07.  현재

Ⅰ		공 사 현 황 (공사감독 신원석)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사-성동

○ 공사기간 : 2018.06.22 ~ 2018.12.18

○ 공사개요 : 받침교체공-44개소, 브라켓공 –20개소, 부대공 1식

○ 공사금액 : 372,991,700원

○ 도 급 사 : 비호건설(주)

○ 발 주 처 : 서울시 성동도로사업소 시설보수과

Ⅱ		극단적 상황발생시 현장조치 시나리오

가. 공사장 안전사고 발생 극단적 시나리오

□ 극단적 상황가설

○ 공사중 폭우로 인한 재해발생

□ 극단적 사고예방을 위한 사전 재해예방 대책

○ 우천에 대비한 안전신호수 배치 및 긴급통화를 위한 무전기배치

○ 청계천 상황실과의 유기적인 소통으로 긴급사항 (집중호우)에 대비

○ 기상청 예보 특보 현황, 및 위성사진 변화 추이를 수시로 점검하여           우천 및 기상변화를 예측하여 공사계획 수립.

□ 극단적 재해 발생시 단계별 시나리오 계획

구 분	조 치 내 용	담당자
사고발생	최초 발견자 119에 즉시 신고 현장대리인, 현장감독에게 알림	사고 발견자
초동조치	구급대 도착까지 피해자의 응급조치 지속시행 응급환자 병원 이송	응급조치조 (최양호)
	상황실(안전관리처 또는 당직실) 및 해당팀장에게 사고발생에 관한 구두보고 실시	공사감독
	시설 및 인명손실을 동반한 경우 작업중지 및 관계자 전원 철수	현장대리인 (최진필)
현장수습·복구	2차 피해 방지를 위한 긴급조치 및 응급복구 장비 및 인력 투입 및 수요 파악 사고원인 조사, 분석 및 현장사진 기록유지	복구작업조 (남상범)

Ⅲ		유관기관 연락처 및 비상연락망 구축

□ 유관기관 연락처 및 비상연락망 구축

성동경찰서 02)2286-0300		성동도로사업소 시설보수과 02)2210-1552			동대문경찰서 02)968-0112
성동구청 02)2286-5114		현장사무실 (청계천복개구조물보수공사-성동)			동대문구청 02)2127-5000
성동소방서 02)2622-1777					동대문소방서 02)2212-0119
서울연세병원 02)2293-7582		서울시설공단 공사감독2처 02)2290-6031			국립중앙의료원 02)1588-1775

11. 최초 위험성 평가서

- 최초 위험성 평가표 양식  ※ 감독자 최종 서명 날인후 원본 도급사 기록 보관, 사본은 감독자에게 제출

작업공종		받침교체공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
작업환경 (분진)	작업인원 전원 해당		○호흡용 보호구 미착용하고 분진 다량발생 작업중 호흡기 질환발생		상해	3	2	6	●분진 다량 발생 작업시 호흡용 보호구 착용철저
			○방진복 미착용 하고 분진발생 작업중 피부질환 발생		상해	3	1	3	●분진 발생 작업시 방진복 착용 후 작업 실시
			○분진 다량 발생 작업중 바닥 돌출물에 걸려 전도		전도	2	2	4	●분진 발생 장소에 작업전 바닥돌 출물개구부 등의 안전조치 후 작업 실시
			○조명이 불충분한 장소에서 분진 다량발생 작업중 시야미확보로 충돌 재해발생		충돌	2	2	4	●분진 발생 장소 작업전 충분한 조명설치 하여 시야 확보
			○분진의 종류 유해성을 미파악하고 작업중 유해분진에 질환 발생		질환	2	2	4	●분진 발생 작업전 분진의 종류 유해성등을 사전 파악후 예방대책마련
			○분진 발생에 대한 안전작업절차 미준수하고 작업 중다량의 분진발생으로 주변근로자 및 시설피해발생		상해	3	1	3	●분진발생 작업전 분진의 확산에 따른 주변위험을 예상하여 확산방지조치마련

작업공종		받침교체공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
작업환경 (환기)	작업인원 전원 해당		○개인보호구미착용하고분 진발생작업중호흡기질환발생		질환	3	2	6	●분진유해가스발생장소작업시공기 마스크등개인보호구착용철저
			○분진유해가스발생장소에 환기시설미설치로 질식재해발생		질환	3	1	3	●분진유해가스발생장소에는국소 배기장치등환기시설설치
			○환기장치를 불안전하게설 치하여환 기장치가낙하		충돌	2	2	4	●환기기계기구설치시에는낙하되거나전도되지않도록고정철저
			○유해공기가외부로배출되도록배출구를충분히 돌출시키지않아유해가스가지하층으로역류		상해	2	2	4	●환기장치의배출구는유해공기가역류되지않도록외부로충분히돌출시킬것
			○환기장치에 누전차단기 접지미설치로 사용중 누전에의한 감전		상해	2	2	4	●환기장치등전기기계기구는접지누전차단기설치하여감전재해예방
			○환기기구와 환기호스 연결불량으로유해가스 분 진누출		상해	3	1	3	●환기기구와환기호스의연결은누출되지않도록체결철저

작업공종		받침교체공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
콘크리트 절단 및 깨기	커터, 착암기, 공기압축기/ 착암공:4명 특별:2명		○개인보호구 미착용하고 작업중 부딪히거나 찔림		충돌	2	1	2	●안전모, 보호장갑, 보호의, 안전장화등 개인보호구착용
			○통행로 미확보로 작업자간 부딪힘		충돌	1	1	1	●주통행로 확보 및 현장주변 장애물파악 및 무리한 움직임 자제
			○ 소형컷팅기 작업시 회전체에 손가락이 끼면서 손가락 절단 위혐		절단	2	2	4	●그라인더 보호기를 장착하여 안전사고 예방
			○콘크리트깨기 작업중 콘크리트조각이 비산하여 작업자 신체에 부딪힘		충돌	2	2	4	●콘크리트깨기 작업주변 콘크리트조각 비산방지용 보양시설설치

작업공종		받침교체 및 연단보강공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
철근가공 및 운반, 조립	철근절단기 및 절곡기/ 철근공:2명 보통인부:2명		○안전모 등 개인보호구 미착용하고 작업 중 부딪히거나 찔림		절상	1	2	2	●철근 가공작업 중 안전모 안전화 등 개인보호구착용 철저
			○철근절단기, 절곡기 받침대가 작업 중 침하되면서 철근절단기 또는 절곡기전도		전도	1	2	2	●철근절단기 절곡기 받침대는 견고하고 평탄한 지반에 거치
			○철근절단기, 절곡기 외함에 접지 미실시로 작업 중 감전		감전	1	3	3	●철근절단 절곡기외함은 접지 실시
			○철근가공장과 철근절곡기 주변에 접근금지 방호울타리 미설치로 주변근로자 철근에 충돌 또는 찔림		절상	1	3	3	●철근가공장과 철근절곡기, 절단기 주변은 관계근로자 외 출입금지 방호울 타리설치
			○철근절단기의 절단날이 마모되어 절단 중 철근이 튀면서 근로자와 충돌		절상	1	2	2	●철근절단기 절단날은 절단작업이 용이하도록 마모된 것은 교체
			○철근절단기 푸트스위치에 덮개미설치로 작업 중 오,조작에 의한 협착 절단		절단	1	3	3	●철근절단기 푸트스위치에는 보호커버설치하여 오조작방지

작업공종		받침교체공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
무수축몰탈 타설 및 양생	몰탈믹서기/ 콘크리트공 : 2명 보통인부 : 2명		○안전모 등 미착용하고 작업중 부딪히거나 물체낙하에 의한 손상		손상	1	2	2	●몰탈믹서 작업시 안전모 등 개인보호구 착용 철저
			○몰탈용기 등 중량물을 무리하게 들어올리다가 요통발생		손상	1	2	2	●몰탈믹서용기 등 중량물 운반시 운반용구 사용
			○전선피복손상으로 몰탈믹서기사용 중 충전부에 감전		감전	1	2	2	●발전기 외함에는 접지실시
			○전기콘센트와 플러그를 비접지형으로사용 중 누전에 의한 감전		감전	1	2	2	●전기콘센트와 플러그는 접지형으로 사용
			○몰탈믹서기에 접지 누전차단기 미연결로 누전에 의한 감전 발생		감전	1	2	2	●몰탈믹서기 전선은 접지 누전차단기에 연결하여 사용
			○타설작업 시 작업발판이 불안전하게 설치되어 작업 중 추락		추락	1	3	3	●타설작업 시 작업발판은 견고하게 설치 안전난간대설치하고 작업 실시

작업공종		가시설공		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
강관비계 설치	강관비계/ 비계공:3명 보통인부:2명		○비계설치시 물건을 던저서 전달시 낙하물에 의한 사고 발생		전도	2	2	4	●물건을 반드시 받아치기 하여 전달
			○안전모, 안전대 등 개인보호구 미착용하고 작업중 추락		추락	2	2	4	●강관비계 설치시 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용철저
			○강관 파이프에 물기가 뭍어있을시 미끄러짐 사고 발생		전도	2	2	4	●자재 반입시 전날 비가 왔으면 자재반입을 금지하고, 부득이 반입시에는 물기를 제거하거나, 건조 후 작업
			○비계설치 후 과하중으로 인한 비계 전도		전도	1	3	3	●철근 및 폴리머몰탈을 비계위에 올려놓는 것을 피하되 부득불 놓을시 분 산배치 할것

작업공종		이동식 발전기		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장		감 독
											최태현	최진필		신원석
작 성 일		2018.07
작 성 자		최태현
											/	/		/
세부작업 (단위작업)	사용장비 /설비/인원		위험요인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예방대책				비 고
						빈도	강도
이동식 발전기	작업인원 전원 해당		○발전기를 전기 담당자외의 근로자가 임의 조작중 감전		감전	1	3	4	●발전기는 전기담당자를 지정하여 조작하도록 관리
			○발전기에 우수침투로 사용중 누설전류에 감전		감전	1	3	3	●발전기를 옥외에 설치하여 덮개 등 우수침투방지조치 실시
			○발전기 외함으로 전기가 누설되어 외함에 감전		감전	1	3	3	●발전기 외함에는 접지실시
			○발전기 사용시 가설분전함과 누전차단기등을 미설치하여 전기기계기구 사용중 감전		감전	1	3	3	●발전기 사용시에는 가설분전함을 설치하여 누전차단기 접지실시하 고 사용
			○출력단자부에 출력전압이 미표기되어 전압과 불일치하는 전기기계기구 사용중 감전		감전	1	3	3	●발전기 출력단자부에 정격전압표시하여 적합한 전기기계기구 연결 되도록 조치
			○충전부 보호커버 미설치로 작업중 충전부에 감전		감전	1	3	3	●발전기 충전부에는 보호커버 설치하여 충전부 보호조치

[서식.2-2] 수시 위험성 평가표 양식 (공사감독 지원방식)

위험성 평가서
작업공종					위험요인 및 대책										확 인	현장대리인		감독
작업기간
작 성 자		공사감독 신원석
세부작업 (단위작업)		장비,인원		장소/위치		위험요인	재해 형태		위험성			위험 등급	예방대책	적정성 검토 및 의견			이행여부 확인
									빈도		강도						시공사 (공종별 담당자)		공사감독 (6등급이상)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
																	(인)		(인)
구 분 (본부 방침, 대내외 점검 지적사항)	연번		위험요인		예방대책			회의일시 17.08.01 [ 8월 1주차 공정회의]		회의내용							공정회의 참석자 서명 (협력업체, 반장, 공종담당)
	1																(인)		(인)
	2																(인)		(인)
	3																(인)		(인)

수시 위험성 평가표 증빙자료 (공사감독 지원방식)

20대중점관리항목 체크리스트 + 일일안전체크리스트			안 전 교 육 (일일·정기·특별)
점검사항		점검결과	교 육 내 용		교 육 자 서 명 부
근 로 자 보 호 기 본 10 대 항 목	1. 근로자의 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용여부		교육시간 : 09:00~ 09:15	교육자 : (인)
			·일일교육 - 당일작업 공법이해 - 세부시공순서 및 주의사항 - 위험성평가에 따른 위험요인 등 ·정기교육 - 산업안전 및 사고예방에 관한 사항 - 직업병, 질병 예방에 관한 사항 - 유해·위험 작업환경 관리에 대한 사항 등 ·특별교육 - 산업안전보건법에 따른 특별교육 대상작업
	2. 천공 작업시 보안경착용여부
	3. 작업시 바닥면의 돌출물 정리 정돈 여부
	4. 전기누전차단기 미설치 여부
	5. 분진마스크 착용여부
	6. 환기시설 가동여부
	7. 용접 또는 절단기 작업시 소화기 배치여부
	8. 우천대비 주변 근로자 통제 여부
	9. 공종별 작업 전 안전교육 실시 여부
	10.전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시 여부
안 전 시 공 기 본 10 대 항 목	1. 시공계획서 미작성 및 감독 검토승인 없이 임의 시공
					외 부 점 검
	2. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 위반여부
	3. 굴착구배 확보가 곤란한 지반에 대해서는 흙막이지보공 설치를 계획여부
	4. 동바리, 비계작업 시공계획서 미작성 및 미준수
	5. 관부설 및 포장공사 중 교통처리계획 수립여부
	6. 굴착깊이 2m이상 작업 시 특별안전교육 실시확인
	7. 시공계획서 등 사전검토 없이 가시설 임의 또는 과다철거 확인
	8. 포장장비를 운반트럭에서 하역 시 안전작업절차를 준수여부
	9. 장비작업계획서 미작성, 아웃트리거 미거치, 장비허가검사 미이행, 신호수 미배치 확인
	10. 인력굴착 시 용수의 발생 유무 및 용수량의 변화를 확인 및 부석제거, 기계 및 자재의 방치 여부

일일 점검 사진
교통안내표지판 및 공사안내간판			신호수(교통·장비)
TBM 활동(일일·정기교육)	특별교육(해당될 시)	예방대책 이행사진

[서식.3] 건설공사 업무분장표-게시용

						건설공사 업무분장표-게시용(예시)

공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사

	성 명	구 분	업 무 내 용
	최진필 (안전관리자)	일 반 사 항	※ 공정관리, 원가관리, 안전․품질관리, 환경관리 등 현장업무 전반에 대한 총괄책임
		안 전 관 리	❚ 안전관리게획서의 작성 및 제출 ❚ 안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독 ❚ 안전사고가 발생할 우려가 있거나 안전사고가 발생한 경우의 비상동원 및 응급조치 ❚ 안전관리비, 산업안전보건관리비의 집행 감독 ❚ 안전관리에 필요한 시설 및 장비 등의 지원 ❚ 위험성평가의 총괄 관리(방침과 추진목표 문서화, 실시규정 작성 지원 등)
		비상시	❚ 비상사태 유형에 따라 유도조, 응급조치조, 복구작업조, 상황조 총괄지휘 - 응급조치, 긴급대피, 2차 피해 확산 방지, 복구업무 등
	최진필 (현장대리인)	시 공 관 리	❚ 설계도서 접수, 기록, 식별관리(도면문서 및 전산자료 관리대장 유지) ❚ 설계변경 요청서 작성 및 보고 ❚ 공정표 작성(공정분석 및 지연대책) 및 인원, 자재, 장비투입계획 수립 ❚ 협력업체 관리 감독 및 기성작성 ❚ 시공중 발생되는 장애제거
		안 전 관 리	❚ 위험성평가 실시 - 유해․위험요인을 파악하고 위험성 추정 및 결정 - 위험성 감소대책의 수립 및 실행 - 위험성평가 실시시기, 절차와 내용 ❚ 자체 안전점검 실시의 확인 및 점검 결과에 따른 조치 ❚ 안전교육 실시 및 작업장 정리정돈 및 통로확보, 근로자의 작업복·보호구 착용의 확인
		비상시	❚ 인명구조 및 초동조치 업무 - 피해자의 긴급응급조치 - 상황조와 긴밀한 연락, 응급환자 병원이송
	김용언 (품질관리자)	시 공 관 리	❚ 품질관리계획서 및 품질시험계획서 작성 및 검토관리 ❚ 설계변경 요청시 품질적정성 검토 ❚ 자재구매사양, 현장설명서, 공사시방서 검토 ❚ 선정시험 및 공급원 승인요청 ❚ 자재시험 및 분석관리, 계측기 검교정 주기 관리
		안 전 관 리	❚ 안전시설 설치 상태 점검 ❚ 담당업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여 ❚ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록물 보관
		비상시	❚ 긴급조치 및 응급복구 시행 ❚ 재해복구 대책 수립 및 시행 ❚ 인명·시설물의 피해 파악 및 응급조치 ❚ 사고원인 조사, 분석 및 상세보고 ❚ 피해지역 현장촬영 등 기록유지 ❚ 장비, 자재, 인원동원계획 수립 및 시행 ❚ 복구장비 확인·정비 및 자재확보 점검