시공계획서 승인 내용

구분	시설관리공단 검토 내용	시설관리공단 지시 내용	사업소 승인내용
현장조직표	❍ 당해 공사를 적절히 수행할 수 있는 현장 조직 구축여부 - 현장대리인 및 품질관리자 등 기 선임된자로 적정하게 작성됨 - 유관기관 비상연락망 작성 적정	❍ 현장대리인 현장상주 철저 ❍ 현장대리인 등 주요 관계자 변경시 즉시 보고	❍ 원안 시행
공사 세부공정표	❍ 공사기한 내에 공정의 순서, 일정 및 계획 작업량의 적합성 검토 - 일일 인력 및 장비투입계획 작성됨 - 공기 내 공사완료토록 적정하게 작성됨	❍ 예정공정표 준수 철저 및 예정공정 변경시 변경 공정표 제출	❍ 4구간 및 5구간은 성동도로사업소에서 상반기 포장정비 계획이 수립되어 있으므로 조속히 공사 완료할 것 [4,5구간 공사완료일(예정) : ’17.06.20.] ❍ 1구간, 2구간 및 3구간은 예정공정표보다 추진 일정을 앞당겨 조속히 시행할 것
주요 공정별 시공절차 및 방법	❍ 주요공종 시공방법에 대한 도면과 시방서 일치여부 확인 - 주요공종 시공방법 등 일치여부 적정 ❍ 필요시 시험시공 및 시공상세도를 제출받아 적정성 검토 - 해당없음	❍ 시공전 단수 및 공사 안내 철저 ❍ 단수시간 준수철저 ❍ 현장여건 변동 등으로 인한 설계변경이 필요한 경우는 실정보고 및 승인을 득한 후 공사시행	❍ 원안 시행
인력, 자재, 장비 투입계획	❍ 주요 공종에 대한 인력, 자재, 장비 투입에 대한 계획 확인 - 현장실정에 맞는 장비, 자재 및 인력투입 계획이 작성됨 ❍ 예정공정표와 연계한 적정성 검토 필요시 추가투입 계획 검토 - 필요시 추가투입 검토 예정	❍ 관급자재 및 사급자재 적기에 투입토록 사전 준비 철저 ❍ 관급자재 대체사용시 사용신청 철저	❍ 원안 시행
구분	시설관리공단 검토 내용	시설관리공단 지시 내용	사업소 승인내용
안전관리대책	❍ 가이드라인에 의거 심사한 안전관리대책 적정여부 - 안전관리대책 작성 적정	❍ 개인보호구 지급계획 수정완료 ❍ 안전시설물 설치 철저	❍ 주택가 및 보도구간 공사시 보행자 통로를 필히 확보하고 보행안전 도우미와 교통정리원을 배치하여 보행자 안전 확보할 것
환경관리대책	❍ 공사장주변 환경관리 대책 - 비산먼지, 소음, 진동 등에 대한 현장 환경관리 방법 등의 대책 작성 적정	❍ 환경 민원예방활동 철저	❍ 주택가 구간 작업시 사전 홍보 철저
품질시험계획	❍ 품질관리 기구조직 ❍ 공종별 품질시험계획 - 공정별 품질시험계획 및 작성 적정	❍ 주요 공정별 검측서 사전 작성 후 제출 및 검측 시행 철저	❍ 픔질 시험계획 이행 철저 및 사급자재(환토재 등) 관리 철저
최초 위험성 평가서	❍ 근로자의 작업과 관계되는 위험요소 선정 적정성 - 최초 위험성 평가 작성 적정 ❍ 위험요인의 감소대책 적정성 - 위험요인 감소대책 작성 적정	❍ 위험성평가서에 입각한 일일 안전교육실시 ❍ 위험요인 사전 제거 활동 철저	❍ 원안 시행
기타 공사추진에 필요한 사항	❍ 감독자가 공사 추진과 관련하여 필요한 사항이 있을 경우 추가 제출토록 서면으로 지시하고 검토 - 공사추진과정에 따라 필요사항 추가 제출 예정 - 극단적 상황 시나리오 작성됨	❍ 극단적 상황 시나리오에 대해 작업자가 공유할 수 있도록 현장교육 철저	❍ 원안 시행