문서번호	도로시설과-14705
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관	도로시설담당	도로시설과장		안전건설교통국장
협 조 자

시도상 도로사면 낙석방지시설 설치 계획

2014. 7.

안전건설교통국

도로시설과

시도상 도로사면 낙석방지시설 설치 계획

시도상의 도로사면내에 식생하고 있는 수목의 뿌리가 암 절리틈을 통해 성장하여 절리확대로 인해 낙석발생을 유도하고 있는 바, 낙석방지 시설을 설치하여 안전사고를 미연에 예방하고자 함.

□ 현    황

○ 성북구 관내에 위치한 시도상의 자연 사면(비탈면)에 모암으로부터 이탈된 뜬돌이 분포되어 있어 비탈면의 구조적 안정을 위협할 가능성이 있고

○ 지난 24일 저녁에서 25일 새벽 사이에 내린 비로 인해 실제 낙석이 발생하여 안전사고 예방을 위하여 시급히 보호시설의 설치가 시급한 실정임.

민원내용 (민원인 : 김**, 2014.6.25.)

6월23일,24일 양일간 비가 내린후 24일 저녁에서 25일 새벽 사이에 북악산길 137번 가로등 앞 건너편 산책로에 어른 머리만한 암석 네다섯 개가 떨어지는 낙석사고가 발생하여 산책로 일부를 막고 있습니다.

낙석이 떨어진 경사면 윗부분을 관찰해 보니까 최근에 전지작업으로 잘려지고 남은 아카시아나무의 밑둥 몇개가 가파른  경사면에 달려 있고 경사면의 갈라진 암석은 금방이라도 붕괴될듯 위험해 보입니다. 또 낙석위치에서 좌측으로 십미터 정도 떨어진 구간에는  나무와 잡풀도 없이 속살이 드러난 심하게 풍화된 절벽이 있는데(사진첨부) 이 구간도 토사붕괴 위험이 있어 보입니다.

낙석을 제거해 주시고 낙석위치와 그 주변의 붕괴 위험구간에 대해 철책등을 설치하여 장마철 안전사고에 대비해 주시기 바랍니다.

□ 사업 개요

○ 위    치 : 정릉동 508-171 ~ 종로구계외 1개소(북악산길 ․ 정릉길)

○ 규    모 : 낙석방지망 설치 100㎡, 낙석방지책 설치 : 100경간

○ 사업기간 : 2014. 8. ~ 2014. 10.

○ 개략공사비 : 240백만원

□ 추진 방안

○ 사면 안정화 공사 및 낙석방지망을 설치하여 최근의 기후변화에 따른 집중호우시 발생할 수 있는 자연 재해 피해를 사전에 예방하고자 하며

○ 구 예산 형편상 정비에 소요되는 예산의 확보에 어려움이 있어 서울시에 예산 지원 요구하여 공사 시행 하고자 함.

□ 소요 예산 : 240백만원

○ 사면정비                 200㎡ x 200,000원     =  40,000천원

○ 옹벽설치               100m  x 340,000원    =  22,000천원

○ 석축보수                 200㎡ x  60,000원     =  12,000천원

○ 보차도경계석 재설치     100m x  70,000원     =   7,000천원

○ 낙석방지책 설치         100경간 x 500,000원  =   50,000천원

○ 낙석방지망 설치         100㎡ x 26,000원     =  26,000천원

○ 폐기물 처리 및 기타      1식 x 83,000,000원   =  83,000천원.

□ 향후계획

○ 서울시에 예산 지원 요청 및 사업시행

□ 위치도 및 전경사진

○ 북악산로

북악산로

사 진 설 명	o 위치 : 돈암동 산 85-9 ~ 성북동 145-118번지
북악산로 낙석발생

○ 정릉로

정릉길

사 진 설 명	o 위치 : 정릉로 218 ~ 정릉동 산 86-3
낙석방지시설 노후로 보수 필요