문서번호	환경정책과-11035
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	환경정책과장
협조

취약계층 전기요금 절감 및 고효율 조명 보급

시립복지시설 LED조명 보급사업 추진계획

‘14. 7

기후환경본부

(환경정책과)

취약계층 전기요금 절감 및 고효율 조명 보급

시립복지시설 LED조명 보급사업 추진계획

취약계층 친환경․고효율 LED조명 무상 설치를 통해 전기 요금을 절감함으로써 에너지복지를 실현하고 조명전력 효율을 향상시켜 전력절감을 선도하고자 시립복지시설 LED조명 보급사업을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 경위

□ 추진근거

❍ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(행정1부시장 방침, '14.3월)

- '14년까지 50%,'18년까지 100% LED조명 보급 추진

❍ 취약계층(복지시설,저소득층) 전력효율향상사업(산자부 지침, '13.7월)

- 고효율 LED보급과 전기요금 절감 절감으로 에너지복지 실현

□ 추진경위

❍ 2014. 5월~6월 : 복지시설 조명현황 조사

❍ 2014. 7월 : LED조명 보급 추진계획 수립 시행

❍ 2014. 7월~11월 : LED조명 설치

Ⅱ		추 진 계 획

□ 사업지침(산업통상자원부 LED교체 수행지침, ‘13. 7월)

	□전력효율향상사업□
❍ 대상시설 : 보건복지부 및 여성가족부 신고시설 - (제외시설) 전기시설 리모델링․이전 계획시설, 5년 이내 교체 조명 ❍ 예산비율 : 국비 70%, 지방비 30% 매칭 ❍ 보급제품 : 고효율인증 이상 LED제품

□ 사업추진

❍ 교체대상 : 시립복지시설 20개소

- 여성가족시설 4개, 어르신시설 8개, 장애인시설 4개소, 자활시설 4개소

※ 총 67개소중 기 완료(36개소), 증축예정 및 5년 미만시설(11개소) 제외

❍ 교체수량 : 18천개

구 분	소 계	여성가족시설	노인요양시설	장애인자립시설	자활시설
설치수량	17,855	2,182	10,378	2,387	2,908
사업장소	20	여성보호센터,영보자애원 등 4개소	고덕양로원,노인 전문요양센터 등 8개소	평화로운집,곰두리 체육센터 등 4개소	은평의마을,양평 쉼터 등 4개소

❍ 교체제품 : 인증–고효율, 성능–서울시 보급기준 상위성능 제품

□ 사업예산 : 총 3,268백만원

❍ 국비 2,288백만원, 시비 980백만원

□ 사업주관

❍ 환경정책과 : LED교체기준 마련 및 사업비 배정

	□ 복지시설 LED조명 교체 기준 □
‣ 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준 준수 ‣ 고효율에너지기자재 인증서를 획득한 LED조명 제품 ‣ 구매방법은 조달구매 또는 공개입찰 통해 구매 ‣(지원제외) 자원의 낭비가 발생할 경우에는 사업 집행 불가 - 신축건물 또는 전기시설 리모델링 계획(또는 이전계획) 시설, 최근 5년이내 교체 조명 ‣(사업집행) 세부사업의 집행은 지자체에서 직접 수행. 필요시 전문성을 갖춘 기관에 위탁하여 시행 가능 ‣(사업변경) 지원 대상의 교체 등 주요 사업내용 수정시 승인

❍ 자  치  구 : LED보급사업 추진 및 사업성과 관리

- 신속한 집행과 유지관리 등 업무 효율성을 위해 사업(복지)부서 추진

단, 시립복지시설 6개소는 환경정책과 주관 설치(조달구매 추진)

□ 사업예산 배정

❍ 예산 배정은 방침결재 후 e-호조 통해 사업부서(기관)별 일괄 재배정

- 재배정 예산 : 1,883백만원(9개 기관)

❍ 미 배정예산(1,385백만원)은 희망부서 조사 수 추후 배정(7월중)

□ 사업추진 일정

❍ 2014. 7월  : 사업비 재 배정(환경정책과 ⇒ 사업부서)

❍ 2014. 7월~10월 : 사업발주 및 설치

Ⅲ		기 대 효 과

□ 전력절감 : 약 990Mwh/년(228TOE)

❍ 기존조명 대비 전력절감 50%이상 감축

구 분	기존조명	LED조명
전력사용량(Mwh/년)	2,340	1,350
절감효과	- 전력절감 : 990Mwh/년(기존조명 - LED) □ 석유환산톤 : 228TOE/년 = 990Mw/년 x 0.23 (전기소비량 적용) □ 사용시간 : 일 14시간, 월 25일 사용, 적용 : 32W-18W - 절감액 : 129백만원(단, 130원/Kwh적용)

Ⅳ		행 정 사 항

□ LED조명 제품선정위원회 개최(서울시 구매제품)

❍ 구 성 : 5명(기후환경본부 팀장급)

❍ 개 최 : ‘14. 7. 7(월) 10:30 ※ 구매 및 성능고려 최적제품 선정

※ 붙 임 : '14 기관별 LED조명 교체현황 및 예산 재배정 현황 1부. 끝.