시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

현장실정사항 검토결과

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

○ 위    치 : 성동구 자동차시장길 48 시립비전트레이닝센터

○ 공사기간 : 2014. 8. 1 ~ 10. 17

○ 도 급 액 : 139,609,400원

○ 도 급 자 : ㈜동양 대표 정성수

□ 검토내용

구 분	현황 및 문제점	조치의견	비 고
식재 공사	▶ 건물 사이공간은 반음지임 ▶ 4계절에 맞는 지피류 식재 ▶ 녹지확보(포장축소구간) ▶ 현장여건에 따른 식재수종 및 수량 조정	▶ 음지성인 식생으로 교체 (회양목, 화살나무 등) ▶ 지피류 수종 및 수량조정 - 제라늄, 꽃치자, 아주가 → 아스타, 청하국 등으로 변경 - 상록패랭이, 수호초 수량추가 ▶ 디딤석 주변 잔디 추가식재 - 105㎡ → 190㎡ ▶ 현장여건 및 생육조건에 맞게 식재수종 및 수량조정 - 교목 : 수종간 수량 조정 - 관목 : 1,676주 → 3,859주 - 지피 : 2,445본 → 3,800본
시설물 공사	▶ 수도시설 및 쉼터를 텃밭과 연계하여 효율적으로 운영 (센터 요구사항) ▶ 기존 파고라 노후로 정비요청 (센터 요구사항) ▶ 녹지대 내 에어컨 실외기 받침 재료조정 ▶ 족구장 주변 녹지확보를 위해 등의자 위치조정	▶ 수도시설 위치조정, 퍼걸러 확장, 텃밭담장주변 화단벤치 수량조정 - 퍼걸러 → 퍼걸러A(확장) - 수납벤치 : 3개 → 1개 - 화단벤치 : 22개 → 0개 ▶ 퍼걸러 상부 교체설치 - 기존 보수 → 퍼걸러B(신규) ▶ 지하매설부분으로 재료변경 - 점토블럭 → 시멘트블럭 ▶ 퍼걸러 내 위치 및 수량조정 - 등의자 : 8개 → 5개
포장 공사	▶ 기존 컨테이너 이동불가에 따른 녹지면적 줄어듬 ▶ 입구변 경계석 설치로 인한 녹지대 미관저해 ▶ 야생화원 원형 동선도 정형적인 느낌으로 부자연스러움 ▶ 장애인(휠체어)들의 정원 진출입 불편개선 ▶ 녹지대 외부경계로 토사유실 (남서측)	▶ 기존 포장면 축소(변경) - 점토블럭포장 → 디딤석 - 데크B → 디딤석 ▶ 경관에 어울리는 재질로 변경 - 자연석경계석 → 사고석 ▶ 포장재료 변경 - 점토블럭 → 사고석(150*150) ▶ 퍼걸러A 진입동선 재료변경 - 디딤돌 → 목재데크 ▶ 흙막이 설치 - 시멘트블럭 : 0m → 30m
부대 공사	▶ 아스콘 철거면적 최소화 ▶ 아스콘 철거후 지반의 배수상태 불량 ▶ 사용 편의성을 위해 상수도 시설 조정(센터 요구사항)	▶ 철거 및 추가포장 수량조정 - 철거 : 737 → 621㎡ - 포장 : 73→ 4㎡ ▶ 배수시설보강 - 맹암거 50M 신규설치 - 집수정 추가 1개소 ▶ 상수도 시설 변경 - 상수관 6M로 추가(퇴수관) - 수돗가 1개소 추가(급수 등) - 퇴수밸브 추가

□ 검토의견

○ 당초 설계된 내용에서 센터측 요청, 시공중 발생내용 등으로 현 실정에 맞게 검토한 사항으로 향후 설계 변경에 반영하고, 추가 소요예산은 본 사업의 집행잔액을 활용하고자 함