일 반 시 방 서

1. 본 설명서는 취수장 통합형차단막 철거 및 설치공사에 적용한다.

2. 본 공사는 설계도서 및 설명서에 따라 담당책임기술자(이하 감독원)의 지시에 의해     실시 한다.

3. 도급자는 공사를 수행하기 위하여 현지 대리인을 상주토록하고 공사관리 추진과 일     체의 업무를 처리토록 한다.

4. 도급자는 설계도서 및 설명서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 공정계획을 수립하     여 공사착공 전에 착공계를 제출하여야 한다.

5. 공사인부에 대하여는 교육 및 안전장구를 구비하여 안전에 만전을 기한다.

6. 본 공사는 공사도면 및 설명서에 따라 감독원의 지시에 의하여 시행하여야 하며 본     설계서 공사 도면에 명시하지 않은 경미한 공사는 도급자가 부담으로 시행한다.

7. 공사중 도급자의 부주의로 공익상 또는 사유재산에 미치는 손해가 발생할 때는 도     급자 부담으로 배상 또는 원상복구하여야 한다.

8. 공사에 사용되는 모든 자재는 ㉿등 공인된 규격품 또는 이와 동등이상의 자재를 사     용하여야 한다.

9. 통합형차단막의 철거 시 차단막의 오염물질은 세척하여 건조 후 운반선적하여야 하고     훼손이 심한 경우 분리보관 예비품으로 교체하고 경미한 경우 정비하여 설치하여야     한다.

10. 설계변경 조건

가) 시공도중 시행청의 방침이 변경되었을 때

나) 불가항력적인 천재지변등으로 인한 설계변경 요인이 발생하였을 때

다) 국가를 당사자로하는 계약법에 의한 설계변경 요인이 발생하였을 때

11. 도급자는 도급자 부담으로 감독이 지시하는 주요공정 준공사진을 전,중,후로 촬영      하여 사진첩 2부를 작성 제출하여야 한다.

12. 공사중 발생되는 각종 발생품은 지시에 따라 지정한 장소에 정리 반납한다.

13. 본 공사의 준공기한은 착공일로부터 2014년10월31일까지로한다, 단, 다음 경우에 한하여 공사기간 을 연기 할 수 있다.

- 천재․지변으로 인하여 작업이 중단될 때

- 우리소의 지시에 따라 작업이 중단되었을 때

- 발주처에서 필요하다고 인정될 경우

14. 본 공사기간 중 태풍, 집중호우 등 긴급사항발생시 감독원의 지시에 의거 72시간

이내 통합형차단막을 철거 혹은 설치를 하여야하며, 상기 시간이내에 지시사항을

완료하지 못하여 통합형 차단막이 유실되거나 기타 수질사고 등 문제발생 등 손해가

발생할 때는 도급자 부담으로 배상 및 원상복구하여야 한다.

공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 취수장 통합형차단막 철거, 설치공사

2. 공사목적 : 취수구 오염물질을 차단하는 통합형차단막을  장마철 전(6               월 중)에 철거하고 장마철이 끝난(10월 중)후에 설치하여                취수구 오염물질 차단에 만전을 기하고자함.

3. 공사내용 : 통합형차단막 철거 및 설치 200m

4. 공사기간 : 착공일로부터 2014년 10월 31일까지

5. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년

6. 예정공정표

공 정	공 사 기 간
	철 거			설 치
	1-5일	6-10일	11-15일	1-5일	6-10일	11-15일
철거작업준비
차단막 철거
차단막운반 및 선적
설치작업준비
차단막운반 및 설치
설치 후 정리작업