일 반 시 방 서

1. 본 설명서는 취수장 통합형차단막 철거 및 설치공사에 적용한다.

2. 본 공사는 설계도서 및 설명서에 따라 담당책임기술자(이하 감독원)의 지시에 의해     실시 한다.

3. 도급자는 공사를 수행하기 위하여 현지 대리인을 상주토록하고 공사관리 추진과 일체의 업무를 처리토록 한다.

4. 도급자는 설계도서 및 설명서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 공정계획을 수립하여 공사착공 전에 착공계를 제출하여야 한다.

5. 공사인부에 대하여는 교육 및 안전장구를 구비하여 안전에 만전을 기한다.

6. 본 공사는 공사도면 및 설명서에 따라 감독원의 지시에 의하여 시행하여야 하며 본     설계서 공사 도면에 명시하지 않은 경미한 공사는 도급자가 부담으로 시행한다.

7. 공사중 도급자의 부주의로 공익상 또는 사유재산에 미치는 손해가 발생할 때는 도급자 부담으로 배상 또는 원상복구하여야 한다.

8. 공사에 사용되는 모든 자재는 ㉿등 공인된 규격품 또는 이와 동등이상의 자재를 사용하여야 한다.

9. 통합형차단막의 철거 시 차단막의 오염물질은 세척하여 건조 후 운반선적하여야 하고     훼손이 심한 경우 분리보관 예비품으로 교체하고 경미한 경우 정비하여 설치하여야     한다.

10. 설계변경 조건

가) 시공도중 시행청의 방침이 변경되었을 때

나) 불가항력적인 천재지변등으로 인한 설계변경 요인이 발생하였을 때

다) 국가를 당사자로하는 계약법에 의한 설계변경 요인이 발생하였을 때

11. 도급자는 도급자 부담으로 감독이 지시하는 주요공정 준공사진을 전,중,후로 촬영      하여 사진첩 2부를 작성 제출하여야 한다.

12. 공사중 발생되는 각종 발생품은 지시에 따라 지정한 장소에 정리 반납한다.

13. 본 공사의 준공기한은 착공일로부터 2016년10월31일까지로한다, 단, 다음 경우에 한하여 공사기간 을 연기 할 수 있다.

- 천재․지변으로 인하여 작업이 중단될 때

- 우리소의 지시에 따라 작업이 중단되었을 때

- 발주처에서 필요하다고 인정될 경우

14. 본 공사기간 중 태풍, 집중호우 등 긴급사항발생시 감독원의 지시에 의거 72시간

이내 통합형차단막을 철거 혹은 설치를 하여야하며, 상기 시간이내에 지시사항을

완료하지 못하여 통합형 차단막이 유실되거나 기타 수질사고 등 문제발생 등 손해가

발생할 때는 도급자 부담으로 배상 및 원상복구하여야 한다.

공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 취수장 통합형차단막 철거, 설치공사

2. 공사목적 : 취수구 오염물질을 차단하는 통합형차단막을  장마철 전(6월 중)에 철거하고 장마철이 끝난(10월 중)후에 설치하여  취수구 오염물질 차단에 만전을 기하고자함.

3. 공사내용 : 통합형차단막 철거 및 설치 200m

4. 공사기간 : 착공일로부터 2016년 10월 31일까지

5. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년

6. 예정공정표

공 정	공 사 기 간
	철 거			설 치
	1-5일	6-10일	11-15일	1-5일	6-10일	11-15일
철거작업준비
차단막 철거
차단막운반 및 선적
설치작업준비
차단막운반 및 설치
설치 후 정리작업