설 계 설 명 서

1. 사 업 명 : 남산골 한옥마을 소나무병해충방제 및 수세회복사업

2. 사업목적 : 남산골 한옥마을 내 소나무의 병해충방제와 소나무 수세회복 (생육환경개선)을 실시하여

수세를 건강하게 회복․유지시켜 한옥마을 내 경관수목의 문화적․정서적 가치를 보존하고자 함.

3. 사업지역 : 남산골 한옥마을

4. 사업자격 : 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제24조 및 동법 시행령 제25조에 의한 수목피해 진단 처방 및 수목피해 치유사업

(방제를 포함)을 목적으로 등록된 산림사업법인(나무병원) 및 산림조합(산림청 훈령 제1099호, 『생활권 수목병해충

방제방법 등에 관한 지침』 적용).

5. 사업내용

5.1  소나무 병충해방제

5.1.1 흡즙성해충(2회)

5.1.2 진균병 및 식엽성해충(2회)

5.1.3 응애 및 진딧물류(2회)

5.2 소나무 수세회복 (생육환경개선)

5.2.1 토양제거

5.2.2 토양개량

5.2.3 생리증진제처리

6. 사업기간 : 착공일로부터 200일간

공 사 예 정 공 정 표

사 업 명 : 남산골 한옥마을 소나무병해충방제 및 수세회복사업                                                착공일로부터 200일간

기간 공정	3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		비고
1.흡즙성해충(2회)
					`
2.진균병 및 식엽성해충 (2회)
3.응애 및 진딧물류(2회)
4.소나무 수세회복 (생육환경개선)

7. 보호기간 : 사업후 2년

8. 사진촬영 : 착공 전 사진, 시공 중 주요부분 사진, 완료 후 사진을 제출하여야 한다.

공  사  일  반  시  방  서

1. 적용범위

1) 이 시방서의 적용범위는 남산골 한옥마을 소나무병해충방제 및 수세회복사업 설계도서에 수록된 공정에 적용되며 본 시방서 및

설계 도면에 명시되지 않은 사항은 건설교통부 제정 조경공사 표준시방서의 관리 기본지침을 활용한다.

2) 도면, 시방서, 내역서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 않을 때, 또는 의문이 생길 때에는 감독관의 지시에 따른다.

또한 설계도서에 누락된 사항일지라도 시공되어야 할 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하며, 설명이 불분명 할시에는 그        시방서를 작성, 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2. 용 어

1) ‘발주자’라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를         집행하는 자를 말한다.

2) ‘수급인’이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타규정에 의거 인정된 수급인의 대리인           승계인을 포함한다.

3) ‘감독자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다.          발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

4) ‘감리원’이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의          감리를 행하는 자를 말한다.

5) ‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리,        기타 공사업무를 시행하는 현장요원을 말한다.

6) ‘계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서를 말한다.

7) ‘설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.

8) ‘지시’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 현장대리인(혹은 수급인)에게, 권한의 범위 내에서 필요사항을 지시하고 실시하도록         함을 말한다.

9) ‘승인’이라 함은 수급인(혹은 현장대리인)으로부터 요청된 사항에 대해, 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 권한의 범위 내에서 허락함을          뜻한다.

10) ‘협의’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)와 현장대리인(혹은 수급인)이 대등한 입장에서 합의함을 뜻한다.

3. 감독관의 권한

1) 감독관은 공사 감독관 복무규정 등에 정해진 사항의 범위 내에서 그의 권한을 행사한다.

4. 도급자의 의무

1) 도급자는 공사의 목적물을 계약서에 정한 것에 따라 성실히 시공하고 완성해야 하며, 발주자가 최종 인수 전 까지는 관련 시설에        대하여 관리할 책임을 진다.

2) 현장대리인은 공사 기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업 현장을 이탈하는 경우에는 감독관의 승인을 얻어 필요한 조치를       취하여야 한다.

3) 도급자는 계약서에서 정한 것을 제외하고는 공사시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야한다.

4) 도급자는 공사의 목적물이 손상을 받을 경우 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라       조치하여야 하며, 또한 도급자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야한다.

5) 시공 전․중․후 현장관리 등 모든 사항은 감독관의 지시에 따라 시행하여야 하며 이에 이의를 제기할 수 없다.

6) 본 공사의 충실한 이행을 위하여 발주자가 감리 용역을 의뢰한 업체에게 도급자는 다음사항을 의무 이행하여야 한다.

-. 감리자가 필요하여 요구하는 각종도면, 자료 등의 제출

-. 감리자의 시험, 검수, 검측에 대한 협조

-. 감지자의 각종 지시사항 이행 및 결과보고 등

5. 공사현장관리

1) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경위에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2) 공사시공 중 도급자는 감독관 및 발주자의 허가 없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 않된다.

3) 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4) 도급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 하며, 파손 되었을       경우에는 감독관의 지시에 따라 원상 복구하여야 한다.

5) 공사장의 관리는 산업안전보건법 및 산재보험법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행하여야 한다.

6. 공정관리

○ 공정 및 시공계획서

1) 도급자는 착공전에 공정표, 가설공사에 필요한 제반사항, 공사용 기계기구의 사용계획, 작업장 기타 용지사용에 대하여 시공계획서를       작성하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 도급자는 감독관의 요구가 있을 때에는 공사시행의 순서, 방법, 주요자재 반입계획 주요기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획에       대하여 상세한 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

○ 공사보고

1) 도급자는 공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 소비, 천후 기타 필요한 사항을 기재한 공사보고서를 제출하여 감독관의 승인을       받아야 한다.

2) 도급자는 항상 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때에는 즉시 그 사유 및 공정관리 대책을 수립하여 감독관       에게 보고하여야 한다.

7. 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업할 때에는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독관이 인정할 때에는 도급자는 지시에 따라야 한다.

8. 공사기간

1) 도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서 상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 기간       내에 완료하여야 한다. 특히 전체공사 완료 전 특별 부분에 대하여 공사의 완료 또는 시공순서에 대한 감독관의 지시가 있을 때에는       이에 따라야 한다.

2) 천재지변, 타공사와의 연계성 등 부득이한 경우로 공사의 지연이 불가피한 경우에는 감독관의 승인을 받아 연기하여야 한다.

9. 공사일시중단

○ 감독관은 다음과 같은 경우에 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.

1) 도급자가 설계도서 및 설명서와 상이한 시공을 할 경우

2) 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사지연 또는 시공을 소홀히 할 경우

3) 기후 조건 또는 천재지변으로 인해 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우

4) 기타 감독관의 정당한 지시에 불응한 경우

10. 사용재료

1) 모든 공사용 자재는 사전 감독관의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합격품에 대하여는 즉시 공사장외로 반출 하여야 한다.

2) 본 공사에 사용되는 제반 재료는 한국공업규격품을 사용하되 부득이한 경우에는 감독관의 승인 후 이와 동질 이상의 것을 사용하여야       한다.

11. 재료관리

1) 재료가 현장에 반입되어 감독관의 검사를 받아서 합격한 후에 작업에 지장이 없는 장소에 적치하여 감독관이 쉽게 점검 할 수 있도록       하여야 한다.

2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독관이 변질 또는 불량품으로 인정할 경우 이를 사용하여서는 안된다.

3) 공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 감독관의 승인을 받아 기록해야 한다.

12. 검사

1) 도급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독관의 입회 하에 시공하여야 한다.

2) 검사관과 감독관은 직무 수행 상 필요하다고 인정할 때 파괴검사를 할 수 있으며 검사관과 감독관의 시공에 대한 시정지시는 다른        시공에 우선하여 처리한다.

13. 설계변경

○ 감독관은 건설공사집행규정에 의거 설계 변경할 수 있고, 도급자는 감독관의 지시에 따라 설계변경 제반 도서를 작성하여 제출하여야     하며 본 공사 시공 중 다음 각 호의 1에 해당되는 경우 설계변경을 요청할 수 있다.

1) 현장여건 변화에 의한 공사량의 증감

2) 현장의 제반조건이 설계서와 현저하게 상이할 때

14. 뒷정리

1) 준공검사 전 가설건물 및 공사잔재 등은 공사장 외로 반출하고 전 공구역을 청소 정비하여야 한다.

시    방    서

본 공사의 방제와 관련하여 나무병원 또는 나무병원의 기술자 (수목보호기술자, 식물보호기사)의 월 1회 이상 진단 및

예찰보고서의 내용을 참고하여, 약제의 선정, 방제의 시기, 방제 방법 등을 발주자와 수급인의 협의 하에 변경할 수 있음.

1 주요 공종별 세부 시방서

1.1 소나무 병충해 방제

흡즙성해충 방제

- 응애는 5월 중순부터 6월 상순에 발생한다고 되어 있으나, 온도, 습도의 영향을 받아 실제로는 4월 중순이후(중부지방기준) 발생하며,10월 하순경까지 불규칙하게 발생하므로 전문가의 지속적인 관찰을 통해 방제시기를 결정하여 적시에 방제해야 대발생으로 인한 피해를 막을 수 있다.또한, 응애류는 일반 살충제를 살포할 경우 천적만 제거하는 피해가 발생되므로 응애 전용약제를 사용해야 하며, 농약에 대한 저항성이  강하므로 동일계통의 약제의 연용은 피해야 한다.

- 진딧물은 빠른 것은 3월 하순부터 발생하여 10월까지 지속적으로 발생하고 그 발생 횟수도 많은 것은 9~10회까지 발생하므로 수시로 관찰하여 방제해야한다. 진딧물은 소나무, 유실수, 화목류에 많이 발생하므로 꽃이 피는 시기, 결과 초기에는 약해의 위험이 크다.

또한 진딧물은 침투이행성 농약을 써야 하며 재발생의 위험이 높으므로 약제 살포시에는 전문가의 지도가 필요하다.

진균병 및 식엽성해충 방제

- 엽고병류의 대부분의 포자가 4월중순~5월중순에 발생하여 주변수목에 확산을 시키므로 이 시기에 1회차 방제를           실시하고 6월중순~7월중순 사이에 2회차 약제 살포를 실시하도록 한다.

- 점무늬병은 5월~10월까지 지속적으로 발병되므로 이 시기에 녹병방제시기를 감안하여 효율적으로 방제한다.

2.1  소나무 수세회복(생육환경개선)

토양제거

① 복토 및 답압된 토양, 오염된 토양을 제거하고 생존 뿌리가 발견 될 때까지 계속해서 파들어간다.

② 토양제거시 가장 유의할 점은 수평근에 많이 발달된 세근이 호흡작용, 흡수작용으로 식물생리작용의 80%를 차지하고          있어 가급적 손상이 없도록하고, 제거된 토양은 토양개량제와 일부 혼합할 양을 남기고 반출하도록 한다.

토양개량

① 수목의 생육은 뿌리기능과 밀접한 관계가 있으며 호흡작용, 흡수작용, 신진대사작용을 원활하게 하여야 하므로 물리적         성질개량으로 입단구조를 만들어 보수력, 보비력, 산소공급을 원활하게 하기 위하여 석회와 부엽토를 넣어주어야

한다.

② 되메우기 흙은 토성에 따라 부엽토, 석회, 모래, 미사, 점토 및 생리증진을 위한 영양제 등과 잘 혼합하여 배수 및

양분흡수, 뿌리호흡이 용이한 입단구조의 토양으로 개량하여 준다.

생리증진제 처리

① 생리증진제는 뿌리기능이 미약하여 수세가 쇠약한 수목의 토양에 무기양료를 공급하여 생리 및 생육생장을 증대시키는

생리학적 공종으로 물에 희석하여 토양표면에 관수하거나 유공관을 통하여 토양 깊숙히 처리될 수 있도록 한다.

② 표층이 깊은 곳은 천공 후(지렛데, 괭이, 삽)처리하고 모래나 자갈이 많은 곳은 표면에 처리하여 뿌리 흡수토록

전면 처리한다.

③ 침엽수(특히 소나무류)는 지지기반이 높고 근계의 분포가 넓게 분포하여 있으므로 반지름 2～6m이내까지 희석 관주(수)

하여야 한다.

④ 생리증진제에는 각종 무기양료와 호르몬제등을 혼합 처리하여 뿌리의 발달에 유리하도록 한다.