일   반   시   방  서

제  1 조   총          칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 건설부 제정 토목공사 표준시방서, 무근 및 철근 콘크리트 표준 시방서에 의하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여 각기 해당 공사의 기재사항을 준수하고 도급자는 공사에 관련하여 제규정, 요청 및 지침서 등을 철저히 준수하여야 하며, 중복이나 모순 혹은 제시되지 아니한 의문사항은 감독관의 지시에 따라야 하며 이의 소홀로 발생되는 모든 사항은 도급자가 책임진다.

제  2 조   특 별 시 방 서

본 시방서에 명기하지 않은 사항으로서 해당 공사만의 특별 사항을 기재한 것을 특별시방서라 한다.

제  3 조   감    독    원

1. 감독원이라 함은 발주처를 대리하여 현장에 주재하며 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 반드시 수급인에게 통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고 등을 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

제  4 조   공사 공정 계획

1. 수급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표(PERT/CPM및 BAR CHART)를 제출하여야 한다.

2. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행 순서 방법, 주요자재 반입계획 및 사용계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 그때마다 변경실시공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제  5 조   보          고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

2. 수급인은 항상 공사진행사항을 계획과 대조하여 주요 공종에 대하여 현저히 지연 될 때는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 회복책의 조치를 정하여 감독원에 보고한다.

제  6 조   공사표준시방서 비치

공사에 관련되는 제표준시방서는 현장에 항시 비치하여야 한다.

제  7 조   공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설하여야 하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야 한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 부하되는 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제  8 조   측          량

1. 수급인은 시공측량 후 야장 혹은 측량성과표를 감독원에게 제출하여 검측을 받아야 한다.

2. 수급인은 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안된다.

3. 수급인은 시공완료 후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

제  9 조   용  지  사  용

1. 수급인은 감독원의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2. 공사를 수행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용보상 등은 수급인 책임하에 이루어져야 한다.

제 10 조   공 사 용 도 로

1. 수급인은 공사용 도로의 신설개량 및 보수계획을 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행하되 이에 필요한 제반수속 및 경비와 안전관리를 위한 제반조치는 수급인 부담으로 하여야 한다.

2. 수급인은 공사용 도로의 신설, 개량, 보수 및 유지를 될 수 있는 대로 일반대중에게 불편이 없도록 또 공공의 안전을 해치지 않도록 실시하여야 한다.

제 11 조   재  료  관  리

1. 재료가 현장에 반입되어 감독원의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업 기타에 지장이 없는 장소에 정리하여 재료의 품질이 변하지 않도록 보관에 철저를 기하여야 하며 수시로 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야 한다.

2. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용하여서는 안된다.

3. 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 수급인 임의로 공사현장 외에 반출해서는 안된다.

제 12 조   지급자재 및 대여품

1. 지급자재 및 대여품에 대하여는 그 수불상항을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔량을 명확하게 하여 두어야 한다.

2. 매월 지급물품 사용량 조서를, 그리고 준공시에는 지급물품 정산서를 신속하게 발주자에게 제출하여야 한다.

제 13 조   발    생    품

공사시공에 의하여 생긴 현장 발생물은 감독원의 지시에 따라 정리하여 발생물 조서를 첨부하여 감독원에게 인도하여야 한다.

제 14 조   시  공  검  사

1. 수급인은 세부공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정 할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을 시는 세부공정자료(구체적 공정실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반품질관리시험 및 공사품질관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰해야 한다.

제 15 조   공  사  검  사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사에서는 현장대리인이 검사를 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 16 조   시공 후 검사가 불가능한 곳의 시공검사

공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원의 검사를 서면 또는 도면으로 받아두어야 한다.

제 17 조   공사 현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일장소에서 시공하는 별도공사가 있을 경우는 상호협조하여  분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자의 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사 수급인명 등을 소정양식에 따라 표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

제 18 조   공사용 장비 및 기계기구

공사용 장비 및 기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에 그 수량, 성능 및 배치계획서를 감독원에 제출한다.

제 19 조   안  전  조  치

1. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전대책을 강구하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

2. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획 점검훈련 등을 설치하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

3. 공사착수 전에 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 긍지

다. 폭약 및 위험물 취급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

마. 위생적 음료수의 확보

바. 위생적 변소와 위생시설

사. 기타 필요한 사항

4. 도로의 교통을 제한하고자 할 때는 다음 요령에 위하여 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료 후 표지, 지시표 등의 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하고 교통제한 중에 교통장애를 될 수 있는 대로 피하는 공법을 취하여야 한다.

5. 작업장 내에서는 안전모자 등의 복장을 착용하여야 한다.

6. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

7. 공사 시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

8. 공사 시공 중에는 일반인의 교통 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

제 20 조   사 고 의 보 고

토사의 붕괴, 낙반가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

제 21 조  제법규 준수

1. 공사 시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 작업안정법, 재해구호법 기타 관계 법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지고 사용하는 전노무자의 모든 행위에 대한 책임은 수급인에 있다.

제 22 조   치          수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리 된 치수이다.

제 23 조   작  업  시  간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 24 조   사  진  촬  영

도급자는 공사시공에 대한 기록사진을 천연색으로 크기 3x5 인치로 2부 작성하여 준공 시에 사진첩으로 작성하여 납부한다.

제 25 조   기 성 고 작 성

도급자는 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일 전에 공사감독원을 경유하여 제출한다.

제 26 조   공사 일시 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하고 인정될 때

5. 기후의 악조건으로 공사 및 품질에 손상을 주게될 우려가 있다고 인정할 때

제 27 조   설  계  변  경

1. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계된 것인 바 조사 불능 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 시공당시 설계에 맞추어 설계변경 조치한다.

2. 시공도중 발주자의 방침에 변경되었을 때

3. 당초 지정된 골재원 및 토사장의 위치, 채취량의 변경이 있을 때

4. 콘크리트 배합시험 결과치가 변경될 때

5. 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있는 경우

6. 지급자재의 수량, 인도장소등의 변동이 있을 때

7. 주요자재의 가격 및 정부노임 단가 등의 현저한 변동이 있을 때

8. 암추정선이 변경되어 암량 및 계획고가 변경될 때

9. 연암중의 발파암 수량이 변경될 때

10. 공종별 수량의 증감이 생길 때

11. 기타 발주자가 부득이 변경을 요구하는 경우

제 28 조   그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정

1. 공사기간 및 운반거리의 변경등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정해야할 필요가 있는 경우.

제 29 조   설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 도급자의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시 준공도를 작성 감독원에 제출하여야 한다.

제 30 조   준  공  검  사

1. 도급자는 준공사항을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부, 감독원에 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 도급자 부담으로 한다.

제 31 조   공사후의  관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 32 조   도급자의  의무

1. 모든 공사는 시방서와 설계서에 부합되도록 시공하여야 하며 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

2. 도급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

3. 도급자는 국가기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

4. 도급자는 발주자가 서면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적물을 도급자 부담으로 관리하며 그 책임을 진다.

5. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.

6. 공사현장 대리인은 감독원의 승인 없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

7. 공사현장 대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응하여야 한다.

8. 도급자가 본 공사에 대한 제반검사 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기할  수 없다.

9. 본 공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때에는 도급자 부담으로 복구하여야 한다.

제 33 조   이  의  신  청

1. 도급자는 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일 전에 감독원에 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안된다.

2. 소정의 기간내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 34 조   감  독  조  치

1. 도급자는 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의하여야 한다.

2. 시방서 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제 35 조   공  기  연  장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품위, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2. 공사기간 중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을 때

특    별   시   방  서

제  1 조   일 반 사 항

시설공에 소요되는 사항을 규정하며, 이에는 노동력, 재료, 기구와 장비 및 시공기간중의 처리 유지관리에 대한 규정이 포함되어 있다. 시설물의 시설공사는 도면, 본 시방서 및 감독원의 지시를 엄격히 준수하여 시공하여야 한다.

제  2 조   치   수

1. 공사용 재료의 치수 및 품질은 설계서에 의하며, 별도 공사가 없는 것은 감독원의 승인을 받아야 한다.

2. 설계서 및 도면에 기재된 구조물 및 목재 또는 모든 재료의 치수는 별도 명시하지 않는 한 마감 치수이다.

제  3 조   토   공

1. 터파기

가) 터파기는 구조물의 축조에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독관의 검사를 받아야 한다.

나) 터파기 시공에는 시공 방법, 장비 계획 등 작업 계획을 세워 감독관의 승인을 받아야 한다.

다) 터파기는 지반의 토질 및 지하수의 상태 또는 터파기 주변의 변화 상태를 관찰하고 주위의 원지반을 이완시키지 않도록 시공하여야 한다.

라) 터파기 지점 가까이에 붕괴, 파손의 위험이 있는 구조물 또는 지하 매설물 등이 있을 경우에는 시공에 특히 주의하고, 이들에게 나쁜 영향을 미치지 않도록 조치해야 한다.

마) 터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 안되며, 소정의 기초 바닥면보다 깊게 파지 않도록 하여야 한다.

바) 암반 굴착을 위해 폭약을 사용할 경우, 필요 이상 단면에 영향을 주지 않도록 특히 주의해야 한다.

사) 터파기가 완료된 후에는 즉시 감독관의 검사를 받아야 한다.

아) 터파기 시공 중에서 지장을 주는 지하수 또는 고인 물은 양수기 및 배수구를 설치하여 적당한 방법으로 배제하여야 하며, 터파기 바닥은 물, 기타 등으로 씻겨 나가지 않도록 조치하여야 한다.

자) 되메우기 할 구조물 뒷면의 지반이 비탈면인 경우에는 층따기를 하여야 한다.

차) 터파기 바닥이 토사로써 거칠어졌을 경우에는 잡석 등을 깔고, 해머 등으로 충분히 다져야 한다.

2. 터파기한 흙의 처리

가) 터파기한 흙은 감독관과 협의하여 되메우기에 유용할 만한 흙은 별도로 저장하고, 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 즉시 터파기 장소 밖으로 운반, 처리하여야 한다.

나) 되메우기 할 재료나 잔토 처리 할 흙을 공사장에 일시적으로 쌓아 둘 경우에는 이들의 중량이 흙막이공이나 본 구조물에 피해를 주지 않도록 저장하여야 한다.

다) 되메우기 할 재료의 저장 장소는 배수가 잘 되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지하여야 하고, 이물질이 혼입되지 않도록 잘 보호해야 한다.

3. 되메우기

가) 되메우기 재료는 감독관의 승인을 얻어 사질토 또는 터파기 한 흙 가운데 양질토를 사용한다.

나) 중요한 곳에서의 되메우기는 최적함수비에 가까운 함수비로 한 층의 두께가 20㎝이내가 되도록 펴서 충분히 다져야 한다. 되메우기에 사용하는 재료가 모래인 경우에는 충분한 물다짐을 하고, 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

다) 되메우기는 지하 구조물에 손상을 주지 않도록, 콘크리트 강도를 고려하여 시공 시기를 결정해야 한다.

라) 되메우기는 동결 지반에 시공해서는 안되며, 동결된 재료를 되메우기 재료로 사용해서도 안 된다.

마) 암반을 파고 기초공사를 시공할 때에는 터파기된 곳은 되메우기 콘크리트를 시행하여 기초와 암반이 밀착되도록 하여야 한다.

제  4 조  기   초

1. 구조물의 기초는 양질의 지지층에 지지되어야 하며, 어느 부분에서나 균등한 지지력을 갖도록 시공해야 한다.

2. 구조물을 지지하는 양질의 지지층이 얇거나, 연약지반인 경우에는 구조물의 하중과 지지층의 지지력을 고려하여 직하에 대한 영향을 검토하여 자갈층에 설치하거나, 기초의 폭을 넓혀주는 등의 조치를 취하여야 한다.

3. 제작된 기초를 사용할 시에는 하부지지층의 지지력을 고려하여 침하가 일어나지 않도록 보완조치를 취해야 한다.

4. 기초는 흔들림이 없어야 하며, 기초 콘크리트가 지표면에 노출되지 않는 것을 원칙으로 한다.

제  5 조  콘크리트 공사

1.  재   료

1)  물

가) 물은 기름, 산, 염류, 유기물 등 콘크리트의 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질을 함유해서는 안된다.

나) 철근 콘크리트에는 바닷물을 혼합수로 사용해서는 아니된다.

2)  시  멘  트

가) 시멘트의 저장

① 시멘트는 지상에서 30cm이상 되는 마루를 가진 방습된 창고에 저장하여야 한다.

② 포대 시멘트는 13포대 이상 쌓아 올려서는 아니된다.

③ 저장 중에 생긴 시멘트 덩어리는 사용하여서는 아니된다.

④ 3개월 이상 창고에 저장된 포대 시멘트나 습기를 받았을 우려가 있다고 판단되는 시멘트는 사용하기 전에 사용 가능 여부를 책임자

에게 확인받아야 한다.

3)  골  재

가) 골재의 품질

골재로서 적당한 입도를 가지고 깨끗하고, 강하고, 내구성이고, 점토 덩어리, 유기불순물, 염분 등의 유해량을 포함하여서는 않된다.

나) 골재의 저장

① 잔골재와 굵은 골재는 따로 저장하고, 먼지․잡물 등의 혼입을 방지하여야 한다.

② 중요한 공사에 사용되는 골재 재료는 치수에 따라 나누어 저장하여야 한다.

③ 골재는 표면의 크기가 될 수 있는 대로 일정하도록 저장하여야 한다.

④ 굵은 골재를 취급할 때에는 크고 작은 것이 분리되지 않도록 하여야 한다.

⑤ 골재는 빙설의 혼입 또는 동결을 받지 않도록 하여야 한다.

⑥ 골재는 여름에는 일광의 직사를 받지 않도록 하여야 한다.

4) 레디믹스트 콘크리트

레디믹스트 콘크리트 KSF 4009규격에 합격한 것이라야 한다.

2. 콘크리트의 배합 및 비비기

1) 배합조건

가)  콘크리트의 배합은 다음에 따라야 한다.

① 콘크리트의 배합은 소요의 강도, 내구성 등 작업에 알맞은 워크빌리티를 가지는 범위내에서 단위수량이 되도록 작게 정하여야 한다.

② 시방배합이 설계서에 명시된 경우에는 이에 따라야 한다.

2) 비 비 기

가) 비비기에는 믹서를 사용할 경우 재료를 믹서에 넣을 때는 전재료를 동시에 균등하게 넣는 것을 원칙으로 한다.

다만, 물은 다른 재료보다 먼저 넣기 시작하여 그 속도를 일정하게 하며, 다른 재료를 다 넣고 조금후에 넣기를 완료하도록 하여야 한다.

나) 재료는 비빈 콘크리트가 플라스틱하고 균등질이 되도록 충분히 비벼야 한다.

다) 중요하지 않은 공사에 한해서 손으로 비비기를 할 수 있다.

라) 손으로 비비는 경우, 수밀성을 가진 비비기 판에서 비벼야 한다.   이 경우에 비비기는 비빈 콘크리트의 색깔을 일정하고 플라스틱하고

균등질이 될 때까지 계속하여야 한다.

3. 콘크리트 시공

1) 치기 준비

가) 콘크리트를 치기 전에 운반장치의 내부에 붙어 있는 콘크리트 및 잡물은 깨끗이 제거하여야 한다.

나) 콘크리트를 치기전에 치는 장소를 청소하고, 모든 잡물을 제거하고 거푸집널판을 충분히 적셔야 한다.

다) 콘크리트를 칠 때에는 먼저 콘크리트 속의 모르터와 동일한 정도로 배합된 모르터를 바닥면에 깔아야 한다.

라) 터파기 속의 물은 콘크리트를 치기 전에 제거하고 터파기 속에 유입하는 물은 새로 친 콘크리트가 유실되지 않도록 적당한 방법으로

제거하여야 한다.

2) 레디믹스트 콘크리트의 다루기

가) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 소정의 규격에 합격한 콘크리트를 사용해야 한다.

나) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 콘크리트를 치는데 지장이 없도록 받아들이는 시간, 방법, 기타에 관하여

제조자와 사전 의론하고 운반하여야 한다.

다) 레디믹스트 콘크리트는 치기를 끝낸 콘크리트에 해를 끼치지 않도록 운반하여야 한다.

라) 레디믹스트 콘크리트를 부릴 장소 및 방법은 사전에 결정하여야 한다.

마) 레디믹스트 콘크리트를 부릴 때는 재료분리가 생기지 않도록 하여야 하며, 재료분리가 생긴 레디믹스트 콘크리트는 치기전에 거듭비비기

를하여 사용하여야 한다.

3) 운   반

가) 비빈 콘크리트는 재료분리 및 손실이 될 수 있는대로 적게 되는 방법으로 빨리 운반해야 한다.

나) 콘크리트의 운반도중에 심한 재료분리가 일어났을 경우에는 거듭비비기를하여 균등질의 콘크리트를 유지해야 한다.

4) 콘크리트 치기

가) 콘크리트는 재료분리 및 손실을 방지할수 있는 방법으로 빨리 운반해서 쳐야 한다.  이 때에는 조금이라도 굳은 콘크리트를 사용하여서

는 안된다.

나) 치기를 끝낸 콘크리트는 어떠한 운반방법에 의한 경우라도 소정의 품질이 유지되어야 하며,  콘크리트의 운반 또는 치기 도중에 재료

분리가 일어났을 때에는 거듭비비기로서 균등질의 콘크리트가 되도록 하여야 한다.

다) 치기 및 다지기를 할 때 콘크리트의 표면에 상승하는 물이 될 수 있는대로 적게 되도록 재료의 배합 및 치기속도를 조절하여야 한다.

라) 콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오르는 물은 적당한 방법으로 제거하여야 한다.

마) 한 작업구획내의 콘크리트는 치기를 완료할 때까지 연속하여 치기를 하여야 한다.

사) 콘크리트가 굳기 시작하고 있을 때에 그 위에 콘크리트를 덧치기 할 때에는 윗층, 아래층의 콘크리트가 일체가 되도록 하여야 한다.

5) 다  지  기

가) 콘크리트는 치기 도중 및 치기 직후 봉다지기 또는 진동기 다지기를 충분히 다져서 콘크리트가 철근의 주의 또는 거푸집의 구석구석에

흘러들어 가도록 하여야 한다.  이 경우에 콘크리트가 충분히 흘러 들어가기 힘든 곳에는 치기전에 콘크리트 속의 모르터와 같은 정도의

배합된 모르터를 먼저 치거나 또는 적당한 방법으로 콘크리트가 확실히 흘러 들어가도록 하여야 한다.

나) 엷은 벽 또는 거푸집의 구조상 거푸집 진동기를 사용하든지 또는 치기직후에 거푸집의 바깥 부분을 가볍게 두들겨 콘크리트가 잘

가라 앉도록 하여야 한다

다) 봉 다지기에 의하여 콘크리트를 치는 경우에는 각 층의 두께를 된반죽일 때에는 15cm이하, 묽은 반죽일 때는 30cm 이하로 한다.

라) 진동기를 사용하여 콘크리트를 치는 경우에는 콘크리트의 배합, 다지기 1층의 두께, 진동기의 종류 및 찌르는 간격 등에 관해서 감독관

의 지시를 받아야 한다.  이 경우에 진동기는 콘크리트로 부터 천천히 뽑아서 구멍이 남지 않도록  하여야 한다.

6) 양     생

가) 콘크리트를 친 후에 고온도 또는 저온도, 급격한 온도변화, 건조, 하중, 충격 등의 유해한 영향을 받지 않도록 충분히 양생하여야 한다.

나) 양생의 방법 및 기간에 관해서는 책임자의 지시를 받아야 한다.

다) 콘크리트의 노출면은 보통 포틀랜드 시멘트를 사용할 경우 콘크리트를 친 후 적어도 5일간, 조강포틀랜드 시멘트를 사용하는 경우에는

적어도 3일간 항상 습윤상태를 유지하여야 한다.

라) 거푸집 널판이 건조할 우려가 있을 때에는 거푸집 널판을 살수 하여야 한다.

7) 표면의 마무리

가) 노출면에서 균일한 외관을 얻고자 할 경우에는 재료, 배합, 콘크리트치기의 방법 등이 변동하지 않도록 하고 시공이음과 신축이음

사이의 콘크리트는 연속해서 치도록 특히 주의하여야 한다.

나) 거푸집 널판에 접하는 면은 다음에 따라 마무리하여야 한다.

① 노출면이 되는 콘크리트 표면은 완전히 모르터로 덮히도록 다져야 한다.

② 콘크리트 표면에 혹이나 줄이 생긴 경우에는 이들을 매끈하게 따내야 하고 곰보와 흠이 생긴 경우에는 그 주변의 불안전한 부분을

쪼아내고 물로 적신 후 적당한 배합의 콘크리트 또는 모르터로 땜질을하여 매끈하게 마무리 하여야 한다.

③ 거푸집을 떼어낸 후 온도응력, 건조수측 등에 의해 표면에 발생한 균열은 감독관의 지시에 따라 보수하여야 한다.

다) 거푸집 널판에 접하지 않은 면은 다음에 따라 마무리하여야 한다.

① 다지기를 끝내고 거의 소정의 높이와 모양으로 처진 콘크리트의 표면은 스며 올라온 물이 없어진 후나 또는 표면의 물을 처리한 후

마무리하여야 한다.  이 경우에 마무리에는 나무 흙손이나 마무리 기계를 사용하여야 한다.

② 마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 탬핑 또는 되마무리를 하여 제거하여야 한다.

③ 매끄럽고 치밀한 표면이 필요할 때에는 작업이 가능한 범위내에서 되도록 늦은시간에 쇠흙손으로 콘크리트 표면을 눌러가면서 손질

하여야 한다.

라) 마모를 받는 면의 마무리는 다음에 따라야 한다.

① 마모를 받는 면의 마무리에는 물․시멘트비와 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘다져서 매끈하게 마무리한 후, 양생 기간을 연장하여야 한다.

② 마모에 대한 저항을 특히 크게 할 목적으로 특수한 마무리를 할 경우에는 책임자의 지시를 받아야 한다.

마) 모르터 바르기의 마무리는 다음에 따라야 한다.

① 모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는 콘크리트를 친 후 1시간 내에 콘크리트 표면에 고르게 바르고 마무리 하여야 한다

② 상당히 굳은 콘크리트 표면에 모르터 바르기의 마무리를 하는 경우에는 표면을 “정” 또는 적당한 공구로 거칠게 하고 물로 충분히

적신 다음에 시멘트 풀을 얇게 바르고, 즉시, 모르터를 발라서 마무리하여야 한다.

8) 이   음

가) 이음을 필요로 하는 경우에는 책임자의 지시에 따라 구조물의 강도 및 외관을 해치지 않도록 그 위치, 방향 및 시공방법을 정하고 필요

에 따라 적당한 보강재를 접속면에 매설해 두어야 한다.

나) 굳은 콘크리트에 새로운 콘크리트를 쳐서 이을 때에는 치기전에 거푸집을 다시 조여서 굳은 콘크리트의 표면을 처리하여야 하며, 느슨한

골재알맹이, 품질이 나쁜 콘크리트 및 이물을 완전히 제거하고 충분히 흡수시킨 후 즉시  콘크리트를 치고 이어서 먼저 친 콘크리트와 밀착

하도록 다지기를 하여야 한다.

다) 신축이음에서는 구조물이 접하는 부분을 서로 절연시켜야 한다.

4. 거푸집 및 동바리

1) 거푸집 및 동바리의 조립

가) 거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치,  모양 및 치수가 정확하게 확보되며 만족스러운 콘크리

트가 되도록 되어야 한다.

나) 거푸집 및 동바리는 연직방향하중,  횡방향하중,  콘크리트축압 및 특수하중을 고려하여야 한다.

다) 재료는 강도, 내구성, 작업성, 쳐 넣는 콘크리트에 대한 영향 및 경제성을 고려하여 선정해야 한다.

라) 거푸집은 쉽게 조립할수 있고 안전하게 떼어낼수 있게 하며, 거푸집 널판 및 패늘의 이음은 가능한대로 부재 축에 직각 또는 평행하며

모르터가 새어나오지 않는 구조로 하고, 필요한 경우에는 거푸집 청소 및 콘크리트 치기에 편리하도록 임시 개구를 만들어야 한다.

마) 동바리는 하중을 완전하게 기초에 전달하도록 해야하며 조립 및 떼어내기 편리한 구조로서 이음이나 접속부에서 하중을 안전하게 전달할

수 있어야 한다.  동바리 밑둥은 과도한 침하나 부둥침하가 일어나지 않도록 해야 한다.

바) 거푸집을 단단하게 죄는 데는 볼트 및 강봉을 쓰며, 거푸집 널판의 내면에는 박리제를 발라야 한다.

사) 동바리는 콘크리트를 친 후 그 무게에 의하여 생기는 거푸집의 처짐을 추정하여 동바리의 필요에 따라 그만한 솟음을 두어야 한다.

아) 특수 거푸집과 동바리를 사용하는 경우에는 책임자의 확인을 받아야 한다.

2) 거푸집 및 동바리 검사

가) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치기전에 책임자에게 확인을 받아야 한다.

나) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치는 동안 그 상태를 확인하여야 하며, 이상이 있을 때에는 책임자의 지시를 받아 조치하여야 한다.

3) 거푸집 및 동바리 떼어내기

가) 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 그 자중 및 시공 도중에 가해지는 하중을 받는데 필요한 강도에 도달할 때까지 떼어내서는 안된다.

나) 거푸집 및 동바리 떼어내기는 구조물의 충격 및 진동을 주지 않도록 주의하여 실시하여야 한다.

다) 거푸집이나 동바리 떼어내기의 시기 및 순서에 관해서는 감독관의 승인을 받아야 한다.

제  6 조  돌쌓기

1. 재    료

1) 석재의 품질

가) 석재는 그 용도에 적합한 강도와 내구성을 가진 양질의 것이어야 하며, 풍화하여 변색이나 변질한 광물 등을 포함하고 있어서는

않된다.

나) 석재는 용도에 적합한 것을 선택하여 사용하여야 한다.

2) 모르터 및 채움콘트리트

가) 줄눈 모르터의 재료는 콘크리트시공의 해당 규정에 따른다.

나) 모르터는 시멘트와 잔골재의 부피비 1:3으로 배합한 것으로 하며 흙손으로 펴서 깔 수 있는 반죽 질기를 얻을 수 있도록 균일하게

비벼야 한다.   물을 넣어서 비비기를 하고 45분 이상 경과한 모르터는 사용해서는 아니된다.

다) 석축에 사용되는 채움 콘크리트의 재료 및 시공은 콘크리트 시공의 해당 규정에 따른다.

2.  쌓기시공

1) 쌓기의 터파기한 바닥면은 비탈에 대하여 직각으로 다듬어져야 한다.

2) 석축의 앞면 및 뒷채움하는 뒷면에 소정의 규준틀을 설치하고 책임자의 확인을 받아야 한다.  겨냥줄은 수평이 되도록 해야 한다.

3) 터파기 바닥면이 길고 깊이가 다른 경우에는 계단식으로 바닥면을 마무리 해야하며,  기초지반은 쌓기 개시전에 책임자의 확인을 받아야

한다.  기초지반의 지지력이 부족하다고 판단될 경우에는 기초말뚝, 토대목 및 기초 콘크리트 등을 시공하여야 한다.

4) 석재는 쌓기개시 전에 되도록 충분한 양을 현장에 준비하여 골라 쓸 수 있도록 하여야 한다.

5) 돌 쌓기는 가장 낮은 지반에서 시작하여 거의 같은 높이로 번갈아 쌓아야 하며 신축 이음이 있는 경우에는 이음과 이음 사이, 신축이음이

없는 경우에는 상당히 긴 구간을 차례로 쌓아 높이의 차가 크지 않도록 하여야 한다.

6) 막돌 및 잡석의 돌이는 다듬메로 다음어 안정하게 밀착되도록 하여야 한다.  견치돌 및 깬돌의 경우에는 쌓기층마다  돌이를 수정하고,

필요에 따라 난도 다듬질을 하여야 한다.

7) 찰  쌓  기

가) 깬돌의 찰쌓기는 골쌓기를 원칙으로 하고 밑돌은 큰 돌을 사용하여 튼튼하게 인접한 돌에 밀착하도록 하여야한다.

나) 찰쌓기의 석재 및 블록은 사용 전에 흙, 기타의 부착물을 제거하고 충분히 물축이기를 해서 사용하여야 한다.

다) 찰쌓기에서는 앞면에서 돌이를 맞추고 허리고임돌로 쌓기돌을 고정시키고 돌틈에는 채움콘크리트를 채워 앞면 돌이까지 충분히 채워

다져야 한다.

라) 찰쌓기의 1일에 쌓는 높이는 1.2m를 넘지 않도록 하여야 한다.

마) 마루 콘크리트는 뒷채움 콘크리트와 일체로 시공하여야 한다.

바) 신축이음은 약 20m 마다 두어야 하며 설계도서 또는 책임자의 지시에 따라야 한다.

사) 물빼기 구멍의 배치는 어긋나게 하고, 서로의 간격은 2m 로 하는 것을 표준으로 한다.

아) 앞면의 줄눈 모르터 시공은 줄눈부분을 물로 충분히 적셔서 시공하여야 한다.

자) 찰쌓기의 표면은 시공직후 가마니 등을 덮고 충분히 살수하여 10시간 이상 습윤상태를 유지하여야 한다.

8) 메  쌓  기

가) 메쌓기는 골쌓기를 원칙으로 한다.

나) 메쌓기의 돌이는 폭이 견치돌일 때 5～10cm, 깬돌일 때 3～6cm가 되도록 돌메로 다듬어서 맞추고 허리고임돌 및 뒷고임을 끼워

쌓아 올라감에 따라 뒷채움돌을 채워야 한다.

9) 뒷채움 및 되메우기

가) 돌쌓기의 뒷채움 재료는 천연석의 조약돌이나 부순돌로 하고 최대지름 15cm 인 돌이 적당한 입도로 혼합된 것이라야 한다.

나) 뒷채움 시공에 있어서 되메우기 재료와 뒷채움 재료가 혼합되지 않도록 하여야 한다,  뒷채움 작업 중에는 기계의 주행 또는 편심

하중에 의하여 구조물에 손상을 주지 않도록 주의한다.

다) 돌쌓기뒤에 되메우기는 돌쌓기에 맞추어 뒷채움한 후 층별로 되메우기를 하여야 하며 높은 돌쌓기에서는 한꺼번에 되메우기를 해서는

않된다.

제  7 조  통나무편책

1. 일반사항 및 적용기준

본장은 통나무편책 설치시 적용하며, 통나무편책의 설치 위치는 설계도서에 따른다.

2. 재료 및 시공

가. 본 사업의 목재는 미송방부목으로 직경 14cm의 원주목을 이용한다.

나. 미송은 방부하여 이용한다.

다. 미송 방부목의 말뚝과 횡목, 횡목과 횡목의 결속은 전산볼트를 이용하여야 한다.

라. 전산볼트의 구멍은 현장내에서 뚫어야 하며, 볼트의 구멍은 일직선이 되게 정확하게 하여 지정규격의 너트 및 와셔를 이용하여

결속하여야 한다.

마. 주름관을 이용한 거푸집이 안정적으로 위치할 수 있도록 충분한 깊이의 터파기를 실시한후, 콘크리트 치기를 실시하여야 한다.

바. 방부원주목 기둥은 콘크리트의 결속을 위하여 기초에 근입되는 부위 하부에 이형철근(D16mm) 25cm 2개를 십자 형태로 결속하여

원목과 콘크리트가 분리되지 않도록 한다.

제  8 조  론생네트설치

1. 일반사항 및 적용기준

본 장은 론생네트설치에 적용하며, 위치는 설계도서를 따른다.

2. 재료 및 시공

가. 규격은 1m*20m를 한롤로 사용한다.

나. 론생네트의 재질은 천연 황마사를 이용한다.

다. 네트, 식생지, 종자를 일체화시키고 고른 발아를 위하여 3.5cm × 5.5cm  크기의 다이아몬드 형 사각 내에 종자 및 비료를

고정, 부착시킨다. 종자는 ㎡당 20g, 비료는 15g 으로 한다.

라. 적용하면은 경사도 1:1미만의 절,성토사면에 이용한다.

마. 통나무편책, 돌흙막이 시공을 완료한후, 사면에 성토후 사면을 정리한다. 사면정리는 사면에 어지러운 자갈, 돌을 골라 식재가 가능

한 사면이 되도록 한다.

바. 정리된 사면에 론생네트를 펴붙이고 핀(ㄱ형)으로 고정시킨다.

- 고정핀 규격 L=200(꺾인 부분 포함) / 핀 사용량 : 1EA / ㎡

사. 네트의 좌우 이음시에는 고정핀을 사용하여 20mm 맞물리게 잇는다.

아. 양호한 발아 및 생육을 위해 현장 여건상 필요시 복토를 행하되 전체적으로 약 1/2정도(1㎡당 2~3삽 정도) 덮이게 흩뿌려준다.

제  9 조  낙석방지책

1. 일반사항

1.1 적용 범위

(1)본 시방은 낙석발생시 하부 시설 또는 인명 보호를 위한 낙석방지책에 대하여 규정한다.

1.2참조 규격

(1) KS D 3566 일반 구조용 탄소강관

(2) KS D 3503 일반 구조용 압연강재

(3) KS D 3552 철선

(4) KS B 1002 육각 볼트

(5) KS D 8308 융용아연도금

(6) KS D 1012 6각 너트

2. 자재

2.1 재료

울타리에 사용되는 재료 및 부속품은 아래 표와 같으며 그 기능을 발휘하는데 충분한 강도로 유지 보존되어야 한다.

(1) 울타리에는 사용할 모든 재료는 본 시방서 규정 및 한국공업규격에 적합한 재료를 사용하여 야 하고, 수급자는 제반 시험항목에 대한 공인기관의 시험성적서를 포함한 자재 공급원 승인 서를 감독관에게 제출 후 승인을 받아야 한다.

(2) 모든 자재는 KS 품의 사용을 원칙으로 하되 KS 품이 없을 경우에는 국내 생산품중 최상품 이어야 하며, 도면·사양서 등에 적합한 제반조건을 갖추어 야한다.

2.2.구성품

(1) 철제 울타리는 일반적으로 다음 표와 같이 구성된다(2051-6 표 참조).

사 용 구 분	적 용 규 격
주주, 보조지주, 출입문 지지대	KS D 3566 일반구조용 탄소강관
지지대, 연결쇠, 가로지지대 앵글, 밴드, 출입문 고정대	KS D 3503 일반구조용 압연강재
철 망	KS D 7018 체인링크 철망 KS D 7036 P.V.C 코팅 철망
6 각 볼 트	KS D 1002 6각 볼트

2.3 부속 재료

(1) 합판 또는 강제거푸집, 원관재료

(2) 레미콘(골재, 시멘트)

(3) 박리제

(4) 결속선

2.4규격 및 품질기준

(1) 울타리는 용도 및 목적, 장소 등에 따라 규격이 결정될 수 있으므로 본 시방서에서는 따로 규정하지 않는다.

(2) 울타리에 사용되는 모든 재료는 신품으로서 2.1 재료에 표시한 규격 또는 이와 동등 이상의 품질을 가지는 재료로서 각기 그 기능을 발휘하는데 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

(3) 수급자는 재료를 발주하기 전에 소요되는 모든 자재를 검토하여 제조업체, 시험성적서, 카탈로그(Catalogue) 등을 포함한 자재 공급원 승인을 받아야 한다.

(4) 사전재료 공급원 승인을 득한 제품이라 할지라도 감독관이 요구할 때에는 제조공장에서의 품 질검사와 공사현장에 반입된 자재에 대한 견본 색출 및 품질시험을 할 수 있으며, 검사 및 시험결과 불량 및 기준미달 제품이 발견될 시에는 수급자 부담으로 지체없이 교체하여야 한다.

(5) 재료 치수의 허용오차는 KS 규정에 준한다.

2.5 조립

(1) 재료의 조립은 대부분 볼트·너트로 이루어지며, 지지대와 망의 조립은 망 고정클립 (Clip)을 사용 할 수 있다

(2) 모든 재료는 현장 조립을 원칙으로 한다.

(3) 용접으로 이루어지는 조립은 특히 용접부위에 녹이 발생하지 않도록 용접 슬러그 (Slug)를 철저히 제거하고 방청페인트와 페인트를 칠해야 한다.

(4) 조립은 시공순서에 맞게 하되 현장에서의 취급, 운반, 설치 등에 지장을 받지 않도록 검토 되어야 한다.

(5) 모든 재료는 조립시 불량품 또는 변형, 하자품을 확인하여 교체 처리한다.

3. 시공

3.1시공순서 및 설치방법

(1) 경시

1) 정확한 경계선 또는 구획선을 숙지해야 한다.

2) 굴곡지점 또는 경계선이 유동적일 수 있는 지점에는 공사 완료시까지 보존 가능한 표식주를 설치하여야 한다.

3) 경시선은 토지 또는 구획 경계선, 구조물의 위치 및 간격, 민원 발생요인 유무 등을 종합 검토하여 설치하여야 한다.

4) 설치한 경시선은 자연현상에 의거 임의 변동이 되지 않도록 명확하게 표시되어야 한다.

(2) 터파기, 거푸집, 콘크리트, 잔토처리등은 전술한 시방서를 따른다.

(3) 주주(주주) 설치

1) 주주는 수직으로 일정한 간격을 유지하면서 가능한 직선상에 설치한다.

2) 주주는 기초 콘크리트의 중심부에 배치하며, 철망 설치시 지면과의 공간이 생기지 않도록 높이을 조정한다.

3) 주주상의 각종 볼트 설치구멍의 방향과 높이가 같도록 설치한다.

4) 파손, 도금 불량 등 하자가 있는 제품은 설치해선는 안된다(전제품 공통).

5) 원심력 콘크리트 기둥은 좁은 단면 쪽이 외곽방향으로 설치한다.

6) 기초파기의 제한으로 위치가 변경될시 좌.위측의 기둥 위치도 일부 조정하여 1스팬(Span)당 간격을 비숫하게 조정한다.

(4) 철망. 철조망. 앵글. 볼트. 너트 조립

1) 앵글. 볼트.너트 등은 주주에 사전 결속처리한다.

2) 철망이나 철조망은 느슨하지 않도록 단단히 당겨서 설치하고 고정볼트를 완전히 조여서 유 동이 없도록 해야 한다.

3) 유자철조망은 완전히 펴서 일직선이 되게 하고 윤형철조망은 원형이 일정한 간격이 되도록 펴야 하며, 유자철조망과 윤형철조망은 1스팬당 4-6개소에 이탈되지 않도록 결속해야 한다.

4) 원심력 콘크리트에 사용되는 볼트에는 와셔를 이용하여 볼트. 너트가 빠지지 않도록 해야 한다.

5) 모든 볼트는 너트가 울타리 내부쪽에 오도록 한다.

3.2현장 뒷정리

(1) 공사가 완료된 후에는 공사 잔유물의 회수나, 임시가설물 등을 회수하고 꺠끗이 뒷정리를 해야 한다.

(2) 공사간 발생한 피해에 대하여는 철저히 파악 보상 조치하여 차후 민원이 발생치 않도록 해야 한다.

3.3최종검사 및 체크리스트

(1) 현장 소장은 공사 현장을 일괄 점검하여 미비점을 보완하고 수량을 확인한다.

(2) 공사 감독관리 최종 점검하고 지적 사항은 시정 조치한다.

제  9 조  낙석방지망(고강도 마크로네트)

1. 제품사양

1)마크로네트

스틸와이어를 2중으로 엮어 육각형의 형상으로 하고 철망의 소선에，５％ 알미늄 아연도금 처리한 타입으로 그 위에 폴리 염화비닐 피복（이하，PVC）을 처리한 타입이다.

마크로DT는，덮는식의 사면재해방지망으로 사용하고 마크로HEA와 변용하여 암사면표층부안정화를 위한 사면대책으로 사용한다.

그림－１ 마크로DT형상도	그림－２ 마크로DT메쉬상세도

표－１　마크로DT치수표

L=길이 (m)	H=높이 (m)
25	2 , 3 , 4
50	2 , 3 , 4

표－２마크로DT표준타입（5%알미늄아연합금도금사양）

메쉬			선경 (mm)
타입	D (mm)	허용차	메쉬	외변
8×10	80	16% -4%	2.7	3.4
			3.0	3.9

표－３) 마크로DT표준차입（5%알미늄아연합금도금＋PVC사양）

타입	레이싱와이어 선경 (mm)	메쉬와이어 선경 (mm)	외변와이어 선경 (mm)
8×10	내경 2.2 / 외경 3.2	내경 2.7 / 외경 3.7	내경. 3.4 / 외경 4.4

표－４)　와이어경의 허용차와 메쉬 최소부착량

와이어경	mm	2.20	2.40	2.70	3.00	3.40	3.90
와이어경 허용차	(±)φ mm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
도금최소부착량	g/m2	230	230	245	255	265	275

■ 마크로앵커

이형봉강을 사용한 자천공앵커를 표준으로 하여 지반조건，작용하중에 대응하며 길이，재질，직경을 선택한다

표－１)　표준사용재질

재질	항복점（N/mm2）			인장강도（N/mm2）
SD345	345	～	440		490	이상
SD390	390	～	510		560	이상
SD490	490	～	625		620	이상

2. 시공순서

(1) 준비공(조사, 시공 노선 선정, 앵커설치 위치의 결정)

1) 설계서에 따른 시공 범위를 조사한다. 이 때 다음 사항을 주의하여야 한다.

2) 시공과정의 안전 및 작업효율을 최대화할 수 있는 시공 노선을 선정하여야 한다.

3) 자재 반입용 케이블의 설치에서 수목을 이용하는 경우에는 수목의 굵기・장소・뿌리의 길이등을 충분히 주의해서 전도 등의 사고가 없도록 설치한다.

4) 필요한 경우 예비 와이어를 준비하여 안전대책에 충실해야한다.

5) 수목을 이용하는 경우 짚 등으로 수목의 수피가 손상하지 않도록 주의한다.

6) 동력 윈 장치 설치 장소 선정 시 평탄하고 안정된 장소 및 통행 등 작업에 방해가 되지 않도록 장소를 선택한다.

7) 지주위치（앵커위치）의 선정은 설계서에 기재된 위치를 선정하되 앵커의 타설에 적당하지 않은 장소일 경우 가능한  설계 위치 주변에 타설 가능한 위치로 변경한다.

(2) 앵커공

앵커는 다음의 요령으로 설치합니다.

1) 굴착 : 착암기을 사용하여 사면에 대해 직각으로 천공한다. 굴착 각도는 폴 및 삼각자을 이용하여 소정의 각도가 되도록 계측한다.

2) 그라우트 주입 : 굴착 후에 그라우트를 충진한다. 그라우트는 시멘트 페이스트를 표준으로 한다.

시멘트 페이스트는 소정의 양으로 배합 후, 믹서에서 2∼5분 정도 교반한다.

시멘트 페이스트는 교반 후 즉시 주입한다. 또한, 시멘트 페이스트에 점성이 생긴 경우는 재교반 한다.

출구에서 양호한 시멘트 페이스트의 배출 되는가를 확인한다.

양생후 플레이트 배면에 공극이 발생하지 않도록 모르타르등을 충진하고 고정플레이트・너트을 결합시킨다.

주입을 종료한 앵커는 그라우트가 경화하여 소정의 강도을 얻을 때까지 앵커에 인발력・회전력・충격력 등이 가해지지       않도록 주의한다.

(3) 단부 고정 와이어로프 설치

1) 와이어로프을 소정의 길이（하방예비필요길이＋1m）로 절단한다.

2) 단부끝 하부 지지 와이어로프는 지주 밑부터 단부끝 예비 앵커에 붙여 고정장치로 단부고정앵커에 정착시킨다.

(4) 네트 설치 및 고정

1) 네트를 사면상부에서 부터 내려가며 설치한다. 이 때 상부에는 네트가고정을 확실히 하여 네트가 흘러내리는 것에 주의한다.

2) 네트의 접합부를 결합로프에 고정한다.

3) 횡로프를 설치하여 결합코일과 네트를 고정시킨다.

(5) 앵커 고정

1) 네트를 사면에 고르게 고정시킨다..

2) 앵커에 고정플레이트, 와셔, 너트로 네트와 앵커를 고정하고 네트가 확실하게 고정시킨다.