Ⅰ「스마트 건설기술 기술도입」 시범사업 추진개요

□ 도기본 2020 시범사업 대상

① 대상사업

연번	사업명	추진단계	사업규모	담당부서
1	영동대로 지하공간 복합개발 사업	기본설계	L=1km, 지하7층, 지상공원	영동대로추진단
2	동부간선도로(창동~상계) 지하차도 건설공사	실시설계	~25.3 1,651억	토목부
3	진접선(4호선연장)차량기지 2공구 건설공사	실시설계 공사발주준비	5.335억, ~26.2월 진입도로+차량기지	도철 토목부
4	서울사진미술관건립공사	기본설계	지하2층, 지상4층, 연면적 6,769㎡	건축부
5	양곡도매시장 건립공사	설계공모		건축부

② 추진사항

- 스마트 건설기술도입을 위한 단계별 스마트기술도입 계획수립

- 시범사업 추진계획에 따라 단계별 업무수행

- 스마트 건설기술도입된 기술현황을 모니터링화하여 매뉴얼 및 표준안 작성

□  시범사업 추진을 위한 부서간 실무 TF위원회 운영

			스마트건설기술도입 TF위원회
분야별 전문TF			시범사업 부서간TF			스마크건설기술 자문위원회
건축, 토목, 안전, 설비분야			설계. 시공, 안전, 유지관리, 플렛폼			BIM, IOT, 안전. 플렉폼 등
전문가+공종별 공사관계자(설계자+시공자+감리자+담당공무원)			시반사업 5개부서 업무관계부서			스마트기술전문가
필요시 운영			월 1~2회 운영			스마트 건설기술 분야별 필요시 수시 운영 및 상담

□ 도입 분야별 핵심기술 구축

① 중점분야별 연계 및 디지털 정보 흐름도

② 도입 중점분야별 핵심기술

중점분야	세부기술
1. 건설장비 자동화 및 관제기술	지능형 건설장비 관제 기술
	건설현장 정보 수집 및 분석 기술
	디지털 기반 도로 건설장비 자동화 기술
2. 도로 구조물 스마트 건설기술	디지털 기반 도로구조물 설계-제작-시공 지원기술
	도로구조물 원격･자동화 시공 기술
	지능형 도로구조물 시공품질 관리 기술
3. 스마트 안전 통합 관제기술	스마트 안전 통합 관제 시스템
	건설현장 근로자 안전확보 기술
	임시 구조물 스마트 안전확보 기술
4. 스마트건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드	도로분야 디지털 데이터 통합 표준 기반 건설생산 프로세스 통합 관리 및 스마트 지식관리 기술
	스마트 건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리 기술
	스마트 건설기술 종합 테스트베드 구축 및 운영기술

③ 사업단계별 핵심기술

□  시범사업을 위한  R&D 사업 추진

① 스마트건설기술도입 로드맵 및 표준 매뉴얼 작성

- 서울기술연구원 등과 공동수행

- 용역비 지원

② 시범사업에 대한 스마트 건설기술 지원

- 서울 주택도시공사, 서울기술연구원 등 관계기관 참여

- BIM, 드론, 로봇, IoT, 빅데이터, AI 등 기술 설계 시공 기술도입 지원

③ 시법사업 플렛폼 구축

- One-Pmis 연계한 시스템 개발

- BIM 설계 시공관리 데이터 관리 플렛폼 구축

- 통합 유지관리 관제시스템 구축

□ 도입 분야별 핵심기술 세부사항

ㅇ (1분야 : 건설장비 자동화 및 관제기술) 드론 자율 계측에 의한 초정밀 3차원 Digital Map을 구축하고, 이를 도로건설장비 자동화 기술과 융합하거나, 다양한 타입의 국내외 건설장비를 실시간 관제

<건설장비 자동화 및 관제 기술 개발 개념도>

ㅇ (2분야 : 도로구조물 스마트 건설기술) 도로구조물 설계-제작-시공의 혁신을 위한 디지털(BIM) 가상 건설, 고소(高所)·고위험 환경에서 VR·로봇·시뮬레이션·센싱 활용한 도로구조물 무인·자동화 시공

<도로구조물 스마트 건설 기술 개발 개념도>

ㅇ (3분야 : 스마트 안전 통합 관제기술) 현장 근로자 안전용 웨어러블 디바이스 및 교육 플랫폼, 임시구조물 설치·해체 패턴 인식 기술 등을 개발하고, 이를 AI 기반 안전 통합 관제하는 시스템 개발

<스마트 안전 통합 관제 기술 개발 개념도>

ㅇ (4분야 : 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드) 중점분야 1~3의 생성 정보를 교환 가능한 디지털 정보로 표준화하여 저장하고, 민·관 모두 공유 및 활용 가능한 디지털 지식 플랫폼 개발 및 종합 테스트베드 운영

<스마트 건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드 개념도>

Ⅱ 시범사업 추진 방향 및 준비 일정

□  시범사업의 방향

① 제도개선 방안 마련

- 스마트 건설기술제도 도입시 발주방법 마련

- 스마트건설기술평가항목 신설

- 고난도 스마트 건설기술 확정가격 확보방안 마련

- 스마트 건설 건설기준정비(표준시방서 등)

- 첨단기술 의무화 및 목표 기준마련(점수제 등)

- 스마트 설계비용 산츨근거 마련(실비 또는 기준설계비 할증 등)

- 건설사업관리자 선정 기준마련(스마트 건설공사시 실적 등 평가)

- 건설사업관리자 선정시 스마트 감리기술 제안시 평가기준 마련

② Test Bed 사업을 통한 표준 스마트 건설 기준 및 유지관리 방안 마련

- 시범사업을 통한 지원신기술 검증 기준 마련

- 스마트 기술 도입 현장별 도입기술에 대한 모니터링 및 평가실시

- 스마트 건설 기술 메뮤얼 및 로드맵 작성

- 설계, 시공, 유지관리를 위한 데이터 관리를 위한 플랫폼 구축

③ 기술지원 및 예산지원 방안 마련 등

- 기술지원을 위한 전문기술자 자문위원 지원

- 예산반영이 어려운 부분에 대한 대책 마련 (전문기관과 R&D사업 추진)

시범사업 추진을 위한 사전 준비사항

① 스마트 건설 설계 기준 마련

- 스마트 건설 기술 적용 리스트(도입사례) 작성 및 선택기준 마련

- 공사별 단계에 따라 설계부문, 시공부문, 유지관리부문, 안전부문으로 나누어 시범사업기준 작성

- 건축공사, 토목공사, 설비공사로 구분하여 매뉴얼 작성

② BIM도입 설계 기준 마련

- BIM설계도입 단계 기준설정 (3D모델 기본, 이후단계 등)

- BIM설계도입  수준별 비용 산출 기준 마련

- BIM설계도입 설계지침 및 성과품 납품기준 마련

- BIM설계 프로그램의 기준 마련 (국토부 기준 참조)

③ 예산 추가 기준 마련

- 스마트 건설기술도입시 설계비 증액 기준 마련

- 공사비 추가공사비 증액기준 마련

④ 설계 및 공사기간 기준마련

- BIM설계 설계기간 추가기준 마련

- 스마트 건설기술 도입 내용에 따라 공사기간 추가여부 및 기준 마련

⑤ 시범사업별 스마트건설기술 도입 선정

- 설계, 시공, 안전관리, 유지관리 부문중 각 2개 이상 선정

- 현장별로 5~10개 기술선정 하여 시행(사전작업 필요)

향후 일정 계획

① 시범사업 부서간 TF회의 자료 제출(2020. 9. 2한)

- 시범사업 현황 및 스마트 건설 기술도입 계획(각부서)

- 추가 예산 및 마련방안(각부서)

- 스마트건설 기술 사례 및 과업사례 준비(총무부, 서기연, 각부서)

- 스마트건설기술 도입을 위한 관계자 설문조사(서기연)

② 시범사업 부서간 TF회의 실시(2020. 9. 3예정)

- 참석자 : 시범사업부서, 안전관리과, 총무부, 서기연 담당

- 시범사업 계획안

- 시범사업 설계기준안

③ 시범사업 설계기준 및 추진계획 수립(총무부, 2020. 9.10예정)

스마트 건설기술도입을 위한 TEST BED사업 추진 현황

(2020. 8. 현재)

연번	사업명	사업진행단계	사업규모	설계기간	스마트 건설기수도입 기술(예정)		사업부서	담당자 (☏)
	위치	시행방법	사업예산 (억원)	공사기간	단계	기술명	사업주관부서
1	영동대로 지하공간 복합개발 사업	토목 발주 건축/시스템 실시설계	지하7층 200만㎥환승센터597m터널403m	기본 18.2~20.12 실시 20.11~21.12	설계	BIM	영동대로추진단	김형건2430 정용훈2432
					시공	BIM
	봉은사역~삼성역	기술제안	설계비 252 감리비 17(2020) 공사비 542(2020) 총사업비 17,459	공사 21.11~27.12	안전관리		동남권사업과
					유지관리
2	동부간선도로(창동~상계) 지하차도 건설공사	실시설계	지하차도 1,700m	기본 17.12~18.12 실시 20.05~20,12	설계	BIM, 드론	토목부 교량건설	장종환2575 황윤기2577 노순재2579
					시공	AI, IoT센서, ICT
	창동교~상계교	기술제안	설계비 49 감리비 79 공사비 1,523	공사 21.1~25.3	안전관리	드론	동북권사업과
					유지관리	빅데이터
3	진접선(4호선연장)차량 기지 2공구 건설공사	공사중	진입로 1.14Km 차량기지 194.140㎡ 건축물14동	~2018.12	설계		도철토목부 토목2과	임병깅7042 인경태7221 김민수7224
					시공
	남양주 진접 금곡리	기술제안	감리비 63 공사비 1,089	1차 18.12~20.12 2차 20.12~26.2	안전관리		상동
					유지관리
4	서울사진미술관 건립공사	기본설계	-2/4층 연면적6,769	기본 및 실시 20.03~21.02	설계		건축부 문화시설	박근우2625지성균2629
					시공
	도봉구 창동 1-7	일반경쟁	설계비 13.2 감리비 21.2 공사비 209.7	공사 21.05~23.06	안전관리		박물관과	김미숙 2133-4234
					유지관리
5	양곡도매시장 건립공사	기본설계	-2/2층 1만㎡ 내외	공모예정 20.10 설계21.03~21.13	설계		건축부	정채문2645 고병연2649
					시공
	서초구 양재동229	일반경쟁	총사업비 1,050	공사21.03~21.12	안전관리		도시논업
					유지관리

스마트 건설 시범사업 일정표

연번	주요업무	현공정	’20.9~12				’21												’22~’23							’24~’25				’26~27
							1~3			4~6			7~9			10~12
1	영동대로 지하공간 복합개발 사업	실시설계 공사착공
																					22.12			23.12			24.12		25.12		26.12		27.12
			기본설계				실시설계												공사시행											공사준공(27.12)
2	동부간선도로 지하차도 건설공사	실시설계
			실시설계				공사시행																			공사준공(25.3)
3	진접선(4호선연장)차량 기지 2공구 건설공사	공사중
			1차공사(차량진입로)				2차 차량기지																							공사준공(26.2)
4	서울사진미술관 건립공사	실시설계
			실시설계							발주입찰			공사시행						공사준공(23.6)
5	양곡도매시장 건립공사	설계공모에정
			현상공모				기본설계						실시설계						공사시행(~22.12)

스마트 건설 시범사업 연도별 일정표

연도별	설계공모단계	기본설계	실시설계	공사발주	공사시행	준공	유지관리
2020	⑤ 양곡도매시장	① 영동대로 ④ 서울사진미술관	② 동부간선도로 ④ 서울사진미술관	① 영동대로	③ 진접선차량기지
2021		⑤ 양곡도매시장	① 영동대로 ④ 서울사진미술관⑤ 양곡도매시장	④ 서울사진미술관② 동부간선도로	② 동부간선도로 ③ 진접선차량기지 ④ 서울사진미술관
2022				⑤ 양곡도매시장	① 영동대로 ② 동부간선도로 ③ 진접선차량기지 ④ 서울사진미술관 ⑤ 양곡도매시장	⑤ 양곡도매시장
2023					① 영동대로 ② 동부간선도로 ③ 진접선차량기지 ④ 서울사진미술관	④ 서울사진미술관	④ 서울사진미술관 ⑤ 양곡도매시장
2024					① 영동대로 ② 동부간선도로 ③ 진접선차량기지
2025					① 영동대로 ② 동부간선도로 ③ 진접선차량기지	② 동부간선도로	② 동부간선도로
2026					① 영동대로 ③ 진접선차량기지	③ 진접선차량기지	③ 진접선차량기지
2017					① 영동대로	① 영동대로	① 영동대로

시범사업 단계별 스마트 건설기술 설정목표

구 분	시범사업 준비단계	시범사업시행단계	완료이후
설계단계	스마트 설계과업내용 작성	과업내용대로 설계구축	자료관리 시스템에 비치
시공단계	스마트건설기술 도입 매뉴 결정	시설설치 및 자료관리	단계별 시공자료 입력
유지관리단계	유지관리에 필요한 매뉴결정	시설설치 및 데이터 구축	전체자료 관리

현장별 스마트 건설 기술 도입 현황

연번	주요업무	현공정	설계단계	시공단계	안전관리	유지관리
1	영동대로 지하공간 복합개발 사업	실시설계 공사착공	BIM	BIM
2	동부간선도로 지하차도 건설공사	실시설계	BIM, 드론	AI, IoT센서, ICT	드론	빅데이터
3	진접선(4호선연장)차량 기지 2공구 건설공사	공사중
4	서울사진미술관 건립공사	기본설계	미정	미정	미정	미정
5	양곡도매시장 건립공사	설계공모에정	미정	미정	미정	미정