금구건설(주)

주소:서울시 은평구 연서로4길 10 /전화 :02-582-6870 /팩스 : 582-6871

문서번호 : 제2015-15호	선결					지시
수 신 : 강남수도사업소장	접수		일자 시간			결 재 . 공 람
일 자 : 2015. 10. 26.			번호
참 조 : 담당감독 귀하	처리과
	담당자
	심사자					심사일

제    목 : 작업 연기 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 시행중인 “2015년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)”

에 대한 시보57공사를 시행 하고자 하였으나 다음의 사정으로 인하여 작업을 연기하고자

하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-   다  음   -

1. 연기사유

-도로굴착 협의   및 민원인 주말 공사 요청

2.연기작업지시

지시번호	공종	작업기한		비 고
		당 초	변 경
시보57	변실보수	10.16~10.25	10.16~11.20

- 끝 -

금구건설(주) 대표이사 이덕성