시비보조금 교부신청서

사업명	은평구 비지정문화재 보존 정비사업
신 청 자	주 소	서울시 은평구 은평로 195(녹번동84)
	기 관 명	서울특별시 은평구			전화번호	02-351-6534
	대표자명	김 우 영
교부신청금액	금삼천만원 (￦30,000,000 )			희망 교부시기				상반기
교 부 계 좌	은 행 명	우리은행
	계좌번호	1601-10600-0104
	예 금 주	은평보조금일반회계
총 사 업 비 (단위 : 천원)	계	시비	구비				기타
	30,000	30,000	-				-
프로그램 개요	ㅇ 사업근거 : 은평뉴타운 내 내시ㆍ궁녀묘역 정비, 시장방침(2013) ㅇ 사업목적 : 은평구 소재 이말산 및 해룡산 일대 환관ㆍ궁녀 묘소 중 서울시 문화재위원회의 현장조사 결과 보존․정비가 시급한 일부 묘역(6기)에 대한 보존ㆍ정비를 추진하여 더 이상의 훼손을 방지하고 역사 교육 자료로 활용하고자 함 ㅇ 사업위치 : 서울특별시 은평구 진관동 산63-3일원 및 신사동 산 31 ㅇ 사업기간 : 2014. 2 ~ 12월 ㅇ 대상묘역 : 상선 노윤천 묘 등 6기 ㅇ 사업내용 : 훼손된 묘역의 보존ㆍ정비
「서울특별시 보조금 관리조례」제13조의 규정에 의거 시비보조금을 신청합니다. 2014년 1월 14일 서울특별시장 귀하
붙임 : 사업계획서 1부

은평구 비지정문화재 보존 정비사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 2 ~ 12월

○ 위    치 : 은평구 진관동 산 63-3일원 및 신사동 산 31

○ 사업내용 : 훼손된 묘역의 보존 정비

○ 대상묘역 : 상선 노윤천 묘 외 5기

○ 소요예산 : 30,000천원(시비)

□ 사업목적

○ ‘10년「이말산 조선시대 분묘군 종합정비 기본계획 학술연구용역」을 시행하였으나, 자치구 재정여건상 보존 정비를 추진할 수 없어 후속 실행조치를 못하여 지속적인 민원이 제기됨에 따라,

○ 은평구 소재 이말산 및 해룡산 일대 환관․궁녀 묘소 중 서울시 문화재위원회의 현장조사 결과 보존․정비가 시급한 일부 묘역(6기)에 대한 보존․정비를 추진하여 더 이상의 훼손을 방지하고 역사 교육 자료로 활용하고자 함

□ 추진경과

○ 2010.02.19 : 이말산 조선시대분묘군 종합정비 학술용역 준공

○ 2013.05.03 : 서울시 문화재위원 현장조사 실시

○ 2013.05.28 : 문화재위원 현장조사 결과 통보

- 현장조사 결과 : 상선 노윤천 묘 외 7기 보존 정비 필요

○ 2013.08.09 : 1기 보존 정비 완료 통보(서울시, 국립공원관리공단)

□ 세부 사업추진내용

○ 해당 묘역에 대한 지적측량 실시

○ 토지소유자 동의여부 확인

○ 훼손된 환관․궁녀 묘역에 대한 보존․정비용역 시행

□ 소요예산 세부내역

(단위:천원)

지출항목	소요예산	산 출 근 거
보존정비 용역비	26,560	- 인 건 비 : 200천원x7명x12일=16,800천원 - 장비사용료 : 500천원x2대x6일=6,000천원 - 잔디식재비 : 25평x9천원x4기=900천원 - 재 료 비 : 1식x460천원=460천원 - 안내판설치 등 : 6식x400천원=2,400천원
지적측량비	3,440	- 지적측량비 : 1식x3,440천원=3,440천원
계	30,000

□ 기대효과

- 이말산․해룡산 일대 환관․궁녀 묘역의 훼손 방지

- 지역의 관광자원화 및 역사 교육 자료로 활용