		동작구
수신	서울특별시장(임대주택과장)
(경유)
제목	어르신 자립형 공공임대주택 건립사업 시비보조금 교부 신청

우리구 소유 어린이집 부지에 어르신 자립형 공공임대주택과 어린이집을 복합으로 건립하는 사업의 설계용역을 위한 시비보조금을 아래와 같이 교부 요청하오니 적극적인 지원 부탁드립니다.

- 아     래 -

□ 사업개요

- 대지위치 : 동작구 여의대방로24길 113

- 건립규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 1,530㎡

- 사업기간 : ‘16. 3. ~ ’17. 11.

□ 소요예산

- 총 소요예산 : 3,381백만원

(단위 : 백만원)

설계용역비	설계공모비	공사비	감리용역비	합 계
150	10	3,186	35	3,381

- 교부 요청액 : 160백만원(설계용역비 및 공모비)

- 입금계좌 : 우리은행 1601-10600-017-6(동작구청)

□ 향후계획

- ‘16. 7.  : 설계용역 착수

- ‘16. 9.  : 설계용역 준공

- ‘16. 10. : 사업계획 승인

- ‘17. 11. : 준   공

붙 임 : 1. 설계 내역서 1부.

2. 설계공모시행문 1부.  끝.

							동작구청장
주무관										건축관리팀장										건축과장
협조자
시행			건축과-11452									(	2016.05.13.					)		접수			임대주택과-5747								(	2016.5.13.					)
우	06928					서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동)															/
전화		02-820-1390						/전송			02-820-9984					/													/	비공개(5)