설계변경(최종) 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2015년(2차) 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2016. 4.

심의장소 : 급수운영과

강남수도 사업소

(급수운영과)

설계변경(최종) 사유서

공사개요

❍ 공 사 명 : 2015년 (2차)강남구 관내 상수도시설물 및 보수공사(단가계약)

❍ 공사개요 : 노후밸브정비 36개소, 소화전정비 22개소,

❍ 계약기간 : 2016.01.12 ~ 2016.04.30

❍ 도 급 비 : 금232,047,000원

❍ 도 급 자 : 보일씨앤씨 ㈜    대표 강 향주

설계변경 세부내용 및 사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 터파기(보통)(견질토사0-1)공정 등 35개 공정

- 물량감소 : 아스팔트절단(100~150mm) 공정 등 431개 공정

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 17개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 부단수천공 분기점분기(200mm) 등 33개공정

설계변경 내역                                     (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	232,047,000	197,100,000	34,947,000
공 급 가 액	210,951,819	179,181,819	31,770,000
부가 가치세	21,095,181	17,918,181	3,177,000

따로붙임 : 설계변경(최종) 내역서 1부.  끝.

심의위원회 의견

◦ "2015년(2차) 강남구 관내 상수도시설물 및 보수공사(단가계약)" 설계변경(제최종)에 따른 사전 심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	급수운영과장
위 원	급수운영과
위 원	급수운영과
위 원	급수운영과
위 원	시설관리과

2016. 4.